제주특별자치도개발공사 공고 제2024 - 118호

[제주삼다수 스마트팩토리 건립공사]

설계·시공 일괄 입찰공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 공 사 명 : 제주삼다수 스마트팩토리 건립공사

나. 공사내용

1) 위 치 : 제주특별자치도 제주시 남조로 1717-35 일원

2) 규 모

- 건축면적 : 15,027㎡ / 연면적 21,862㎡

- 건 폐 율 : 29.71% / 용적율 : 36.81% (제주삼다수공장 전체 대비 규모)

- 주 용 도 : 공장, 창고, 업무시설 등

- 주요시설 : 신규생산공장(L6), 사무동, 창고, 보안동, 식당동, 기존 식당동 리모델링 및 증축, 기존 경비동 철거 등

- 주요공종 : 건축(80.80%), 전기(14.73%), 정보통신(1.70%), 소방(2.77%)

※ 본 공사는 스마트 건설기술을 적용하는 설계·시공 일괄공사입니다.

※ 본 공사의 주 공종은 건축공사 입니다.

※ 입찰안내서는 입찰참가자격 사전심사 적격 업체에 한하여 현장설명에 참석한 업체의 이메일로 배포할 예정입니다.

3) 공사기간 : 착공일로부터 608일간

- 공사기간은 작업일수 및 비작업일수, 준공에 필요한 인허가기간, 건축공사의 준비기간 및 정리기간, 시운전기간(건축부문)을 포함함.

4) 설계서 작성기간(공휴일, 휴일 포함)

- 기본설계 : 현장설명일로부터 90일

- 실시설계 : 실시설계적격자 선정 통보일로부터 150일(공휴일, 휴일 포함)

5) 추정금액 : 62,456,560,000원 (설계시공 일괄)

(추정가격 56,778,690,909원 + 부가가치세액 5,677,869,091원)

다. 공사개요 : 현장설명서 참조(열람)

라. 과업범위 : 설계·시공 일괄 수행(향후 분리발주 발생 시 해당범위 제외)

※ 실시설계 시 관련 법령에 의거하여 분리발주 시행범위 설정

※ 본 사업은 설계와 시공단계까지 적용 가능한 스마트 건설기술을 일괄적으로 적용하는 스마트건설공사입니다. [대형공사 등의 입찰방법 심의기준 제2조(적용범위) 제5호]

※ 본 공사는 정부권장정책 녹색제품우선구매 대상이며, 공사용자재 품목에 녹색제품이 있는 경우 녹색제품을 우선 구매하여야합니다.

마. 입찰진행일정(예정)

구 분	추진일정	방 법	비 고
입찰참가자격 사전심사접수	공고일 ~ 2024.06.03.(월)	직접제출	18:00 마감
입찰참가자격 적격통보	2024.06.19.(수)	조달청 나라장터 공사 홈페이지	17:00 통보
현장설명회	2024.06.27.(목)	사전심사 적격자	14:00 개시
질의접수	2024.06.27.(목) ~ 2024.07.08.(월)	전자메일 접수	메일주소 현장설명회 별도 공지
가격 입찰서 제출	2024.09.19.(목) ~ 2024.09.24.(화)	조달청 나라장터	17:00 마감
기본설계도서 접수	2024.09.24.(화)	직접제출	17:00 마감
개찰	2024.09.30.(월)	조달청 나라장터	본 공사의 개찰은 나라장터에 게시된 개찰일시에도 불구하고 「지방계약법 시행령」 제98조 제4항에 따라 기본설계 심의완료 후 입찰자별 점수를 통보하면 별도로 개찰일시를 정하여 실시합니다.

2. 입찰 및 계약방식

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제6장 대형공사계약에 의한 설계·시공 일괄입찰로 집행하는 공사입니다.

나. 입찰참가자격 사전심사 대상 공사입니다.

다. 실시설계 적격자 결정은 ‘가중치기준방식’에 의하여 선정합니다.

1) 가중치는 설계점수 80%, 가격점수 20%입니다.

라. 본 공사는 계속비 공사입니다.

마. 공사손해보험 가입 대상 공사이며 계약상대자 가입방식(계약상대자와 보험회사의 계약)으로 진행됩니다.

바. 본 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료, 건설근로자 퇴직공제부금 반영 대상 공사입니다.

1) 입찰참가자는 입찰금액 산정 시(내역입찰의 경우 산출내역서 포함)국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 건설근로자퇴직공제부금을 「건설산업기본법시행령」제26조의2에 의해 국토교통부장관이 매년 고시하는 요율에 따라 각각 계상하여야 합니다.

2) 국민건강보험료 등은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제1장 제9절에 정한 바에 따라 사후 정산합니다.

사. 입찰자는 「건설산업기본법 시행령」제34조의4 제2항에 의한 하도급대금 지급보증서 발급에 소요되는 금액을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 의거 산출내역서에 명시하여야 하며, 발주기관은 동 시행령 제34조의4 제4항에 따라 사후 정산할 수 있습니다.

아. 이 공사는「산업안전보건법」제72조에 따른 산업안전보건관리비 계상 대상 공사입니다.

1) 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준은 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따릅니다.

자. 본 공사는 「건설기술진흥법」제63조에 따른 안전관리비 계상 대상 공사입니다.

1) 안전관리비 계상 및 사용기준은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 바에 따릅니다.

차. 본 공사는 「건설기술진흥법」제56조에 따른 품질관리비 계상 대상 공사입니다.

카. 본 공사는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제12조에 의한 공사용 자재 직접구매 대상입니다.

1) 공사용 자재 직접구매 대상품목 선정은 최종설계서를 기준으로 하며, 직접구매 예외적용 여부는 공사현장소재지 관할 지방중소벤처기업청장과 협의결과에 따릅니다.

2) 직접구매 대상 품목으로 확정된 자재에 대하여는 발주기관이 직접 구매하여 공급하며 그에 해당하는 금액은 계약금액에서 공제합니다.

3) 직접구매 대상 품목의 선정방법, 선정절차, 적용가격 등 제반사항은 「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준」(조달청 훈령 제2105호, 2023.06.07)을 적용합니다.

타. 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제282호, 2024.03.28.)에 따라 재공고입찰이 유찰될 경우 최종 공고의 단독 입찰자와 이 기준에 의한 절차에 따라 수의계약을 체결할 수 있습니다.

파. 기타 세부사항은 입찰안내서 또는 현장설명 시 공지하며 입찰자는 이를 반드시 숙지하고 입찰에 참여해야 하며, 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 있습니다.

3. 입찰참가자격(아래 요건을 모두 충족하는 자)

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 해당 자격을 갖춘 자로서

※「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조의5에 해당되는 자는   입찰에 참가할 수 없습니다.

나. 입찰에 참가하려는 자는 입찰공고일 기준 ‘다’의 시공분야 및 ‘라’의 설계분야 면허를 모두 충족한 자이어야 합니다.

다. 시공분야

1) 「건설산업기본법」에 의한 건축공사업(또는 토목건축공사업) 등록자

2) 「전기공사업법」에 의한 전기공사업 등록자

3) 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사업 등록자

4) 「소방시설공사업법」에 의한 전문소방시설공사업 등록자

라. 설계분야

1) 「건축사법」에 의하여 건축사 면허를 소지하고 건축사사무소 개설을 신고한 자

2) 「전력기술관리법」에 의한 전력시설물의 종합설계업을 등록한 자

3) 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링사업(정보통신) 또는 「기술사법」에 의한 기술사사무소(정보통신)를 등록한 자

4) 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설설계업을 등록한 자

마. 입찰참가자격 사전심사 적격자로서 현장설명회에 참가한 자에 한합니다.

바. 건설업 업역개편에 따른 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.

※ 본 공사는 기존 제주삼다수 제조공장이 운영되고 있는 가운에 신규생산공장(L6), 업무시설, 창고 등이 증축되는 다수의 전문 공종으로 구성된 종합공사로서 현장여건 상 공정계획, 시공방법 등에 대한 검토 및 조정과 지속적인 공정, 품질 및 시공관리가 필요하여 “종합건설업의 종합적인 계획·관리·조정”의 역할이 필요함에 따라 건설업 업역개편에 따른 종합·전문 간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.

사. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조, 동법 시행규칙 제25조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 「시공능력평가액으로 입찰참가자격을 제한하는 공사」로서 건축공사의 시공능력평가액이 입찰참가 신청서류 접수마감일을 기준으로 아래 금액 이상인 업체이어야 합니다.

구 분	시공능력평가액(원)	업종평가비율(%)	비 고
건축공사	36,553,854,655	100%

아. 공동이행방식으로 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하는 자의 시공능력평가액은 공동수급체 구성원 각각의 시공능력평가액에 시공비율을 곱하여 합산한 시공능력평가액으로 합니다.

자. 조달청 국가종합전자조달시스템 전자입찰 사용자등록을 필하여야 합니다.

차.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)의 규정에 의거 입찰참가자격의 제한을 받는 업체는 입찰서를 제출할 수 없습니다.

4. 입찰참가자격 사전심사 (PQ심사)

가. 본 공사의 입찰참가자격 사전심사는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제14조 및 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준[행정안전부예규 제272호(2023.12.21.)] 제4장 일괄입찰 등의 입찰참가자격 사전심사 기준을 준용합니다.

나. 입찰에 참여하고자 하는 자는 위의 규정에서 요구하는 자료를 성실하게 작성하여 제출하여야 합니다. 만약, 제출 서류가 불성실하거나 허위 등이 있을 경우 발생하는 불이익에 대해서는 책임지지 않습니다.

다. 공동도급 구성원 중 설계참여자에 대해서는 사전심사를 하지 않습니다.

라. 사전심사 평가 중 지역업체 가산평가는 지방계약법 제29조 제2항에 따른 지역의무공동도급 입찰공사로 적용 제외합니다.

마. 입찰자가 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하는 경우 이행방식(공동이행 또는 분담이행) 및 출자비율에 관계없이 전체 공동수급체 구성원별로 각각 경영상태 적격요건을 심사합니다.

바. 입찰참가자격 사전심사(P.Q) 신청서 제출 및 심사

1) 제출기한 : 2024.05.22.(수) ~ 2024.06.03.(월) 18:00

2) 제출장소 : 제주특별자치도개발공사 공장혁신TFT(제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35, 제주특별자치도개발공사 연구동 2층 공장혁신 TFT)

3) 제출방법 : 직접 방문 제출

4) 제출서류 : 2부(원본 1부, 사본 1부)

- 공문 1부

- 사업자등록증, 인감증명서(사용인감 사용 시 사용인감계 첨부), 법인등기부등본, 공동수급협정서, 면허수첩 각 1부.

- 사전심사신청서 신청서(지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준 제4장 <별지 제1호>)

- 사전심사 자기평가 심사표 등 신청서류 1식

※ 자세한 사전심사 신청서류는 공고서에 첨부된 입찰참가자격 사전심사 기준 11. 심사신청 및 서류제출을 참조하시기 바랍니다.

5) 적격요건 통보 : 2024.06.19.(목) (나라장터에 게시하며 개별 통보는 하지 않습니다)

5. 현장설명

가. 일시 : 2024.06.27.(목) 14:00(예정)

나. 장소 : 제주특별자치도개발공사 삼다수공장 연구동 1층 영상관

[담당부서 공장혁신TFT (☎ 064-786-4274)]

※ 현장설명회 장소는 공사 사정에 의해 변경될 수 있으며 추후 공지할 예정임

다. 참가자격

1) 입찰참가자격 사전심사 적격자에 한합니다.

2) 현장설명은 입찰참가자격 중 입찰참가자격[입찰공고문 3.의 다항 1)호 ~ 4)호를 입증할 수 있는 서류(사업자등록증 포함)]를 제출한 자에 한합니다.

3)「건설기술진흥법」에 의한 건축분야 특급기술자 또는 국가기술자격법에 의한 건축분야 기술사 또는 건축사 이어야 합니다.

4) 참석인원은 대표사 및 공동수급체 구성원별 1명 이내로 제한합니다.

※ 현장설명에 참가하는 자는 국가기술 자격수첩 사본(원본 제시) 또는 건설기술자 경력수첩 사본(원본 제시) 또는 건설기술자 경력증명서 그리고 4대보험 중 어느 하나 가입증명서류, 대리참석의 경우 위임장과 도장(서명으로 대체 가능)을 지참하여야 합니다.

※ 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의서 제출[사전심사 기준 붙임 3 참조]

6. 공동계약

가. 본 입찰은 공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 혼합방식)이 가능합니다.

나. 공동수급체 구성원은 대표사를 포함하여 10개사 이내로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 입찰금액의 5%이상으로 하여야 합니다.(단, 설계분야 참가자는 구성원 수에 포함하지 아니합니다.)

다. 본 공사는 지역의무공동도급이 적용되는 공사로서 제주특별자치도에 법인등기사항증명서상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 둔 지역업체[입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 계속 유지하여야 함]의 시공참여비율이 전체 공사금액의 40%이상(대표사가 지역업체인 경우에도 의무비율 이상이어야 함)으로 공동계약을 하여야 합니다. 다만, 입찰참가자격을 모두 갖춘 지역업체는 단독으로 입찰에 참여할 수 있습니다.

※ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 상호출자제한기업집단 소속 계열

회사간 공동수급체 구성은 불가합니다.

라. 공동수급체 대표자는 출자비율이 가장 많은 자이어야 합니다

마. 지역의무비율에 미달한 자는 입찰무효 처리합니다.

바. 이 입찰은 「일괄입찰 등의 공사입찰특별유의서」제8조 제4항에 따라 「건설산업기본법」에 의한 토목건축공사업 시공능력평가액기준 상위 10위 이내 업체 간에는 공동수급체를 구성할 수 없습니다. 다만, 단독으로는 실적·업종(면허)이 부족하여 이를 보완하고자 하는 경우에는 공동수급체 구성이 가능합니다.

사. 1건의 개별입찰 내에서 공동수급업체를 중복적으로 결성하여 입찰에 참가할 수 없습니다.

아. 공동수급협정서는 입찰참가자격사전심사(P.Q) 신청서 제출 시 제출하여야 하며 공동수급협정서 제출 이후에는 취소 및 변경할 수 없습니다.

자. 공동수급체를 구성하여 참가하는 경우에는 구성원 모두 입찰참가자격 등록을 하여야 합니다.

7. 입찰서 제출

가. 본 입찰은 조달청 전자입찰로만 집행하므로 조달청 입찰참가자격 미등록업체는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰서 제출마감일 전일(휴일인 경우 조달청 등록 가능일)까지 조달청 조달서비스센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격 등록을 하여야 하며, 전자입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스템(G2B)(http://www.g2b.go.kr)을 이용하여 제출하여야 합니다.

1) 전자입찰서 제출기간 : 2024.09.19.(목) 10:00 ~ 2024.09.24.(화) 17:00

나. 제출한 입찰서는 취소하거나 수정할 수 없습니다. 단, 국가종합전자조달시스템(G2B) 전자입찰특별유의서(조달청고시 제2023-18호, 2023.06.26.)에 따라 입찰의 취소를 신청할 수 있습니다.

다. 입찰서 제출확인은 국가종합전자조달시스템(G2B)의 보낸문서함에서 확인하시기 바라며 입찰서 제출기간 중에는 24시간 입찰서 제출이 가능합니다.

라. 전자입찰서의 제출마감 시간에 장애가 발생할 수 있으므로 가능한 한 마감 1시간   전까지 투찰을 완료하여 주시기 바랍니다.

마. 본 건은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 입찰서 제출이 가능합니다. 다만, 지문인식신원확인 입찰이 곤란한 자는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제6호 및 제7호의 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

8. 기본 설계도서 제출(직접 방문제출)

가. 제출마감 : 2024.09.24.(화) 17:00 까지

나. 제출장소 : 제주특별자치도개발공사 [제주시 첨단로 330(세미양빌딩) C동 1층]

※ 추후 발주기관 사정에 따라 제출장소 변경 시 별도 공지 예정

다. 제출서류 : 기본설계도서 및 기타 관련서류(입찰안내서 참조)

9. 입찰보증금

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조제3항의 규정에 의거 면제하되, 입찰보증금 납부 면제는 조달청 전자입찰시스템을 이용하여 입찰보증금 납부 확약 내용이 명기된 입찰서의 제출로 갈음합니다.

나. 낙찰자가 정당한 이유없이 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조의 규정에 의거 면제받은 입찰보증금(입찰금액의 2.5%)을 현금으로 징수되며, 부정당업자로 처리되어 입찰참가자격제한 처분을 받게 됩니다.

10. 입찰의 무효

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조, 동법 시행규칙 제42조에 의합니다.

11. 개찰 및 낙찰자 결정

가. 개 찰

1) 개찰장소 : 국가종합전자정보시스템(나라장터)

2) 개찰일시 : 2024.09.30.(월) 16:00,

※ 본 공사의 개찰은 나라장터에 게시된 개찰일시에도 불구하고 「지방계약법 시행령」 제98조 제4항에 따라 기본설계 심의완료 후 입찰자별 점수를 통보하면 별도로 개찰일시를 정하여 실시합니다.

나. 낙찰자 결정은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제100조에 따라 지방건설기술심의위원회부터 실시설계 심의 및 적격통지를 받은 때에 동 실시설계 적격자를 낙찰자로 결정합니다.

12. 청렴계약 이행서약서 제출

가. 본 입찰에 참가하는 자는 우리공사 청렴계약 이행서약서에 동의하고 이를 제출한 것으로 간주합니다.

나. 낙찰자는 계약체결시 대표자가 서명한 청렴계약 이행서약서를 반드시 제출하여야 합니다.

13. 건설근로자 임금비용 구분지급 및 「하도급지킴이」이용 등 안내 사항

가. 본 공사를 이행함에 있어 공종별 공사에 대한 하도급가능여부, 하도급승인절차 등은 건설산업기본법령, 전기공사업법령, 정보통신공사업법령, 소방시설공사업법령 등에 따릅니다.

나. 본 공사에 대한 하도급 시 건설산업기본법령, 전기공사업법령, 정보통신공사업법령, 소방시설공사업법령 등 개별법령의 하도급 관련규정을 준수하여야 합니다.

다. 본 공사는「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」제7조의3(임금비용의 구분지급 및 확인)에 근거한 ‘건설근로자 임금비용 구분지급 및 확인제도’가 적용되는 공사이므로, 도급인(발주자 포함)은 수급인에게 건설근로자의 임금비용을 다른 공사비와 구분하여 매월 지급하여야 하며, 그 내역을 확인하여야 합니다.

라. 본 공사는 행정안전부「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 근거한 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’가 적용되는 공사이며, 착공시에 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서를 제출하여야 합니다.

마. 본 공사는 제휴은행과 연계하여 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금의 적정 지급 여부를 확인하는 공사이며「하도급 등의 대금지급 확인 시스템(이하 “대금지급 시스템”이라 한다.)」계약자(하도급업체 포함)는 대금지급 시스템을 이용하여 하도급자, 건설근로자, 장비/자재업체에게 대금을 지급하고 그 내역을 우리공사에 제출하여야 합니다.

※ 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금 등의 지급은 ‘인출 제한’기능을 사용하여야 합니다.

※ 대금지급시스템 [별지 참조]

: 조달청 하도급 지킴이 http://www.g2b.go.kr:8105/intro.html 문의 1588-0800

바. 전자적 대금지급시스템과 관련하여 우리 공사에서 도입을 추진하고 있는 차세대 클린페이 시스템을 이용하여 대금을 지급할 수도 있음을 알려드립니다.

14. 기타사항

가. 추정금액(62,456,560,000원) 범위 내에서 설계도서 및 가격입찰서를 제출하시기 바랍니다.

나. 입찰자는 국가종합전자조달시스템 조달업체이용약관, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 시방서, 기타 입찰에 필요한 모든 사항(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 예규 등)을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.

다. 전자입찰 참가 희망업체의 전산장비 준비 부족 등의 사유로 인하여 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란할 경우는 투찰 마감시간 이전에 조달청 전자조달 콜센터(☎1588-0800)에 문의하여 주시기 바라며, 장애 발생에도 불구하고 조달청 전자조달 콜센터로 문의하지 않아 발생되는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

라. 현장 설명시 발주처에서 작성 배부한 입찰안내서 등 본 공사 입찰에 필요한 제반사항을 숙지하고 입찰에 응하여야 합니다.

마. 실시설계 적격자로 선정되지 아니한 자(낙찰탈락자) 중 설계점수가 입찰공고에 명시한 일정점수(60점)을 초과하는 자에 대하여는 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제282호, 2024.03.28.)에 따라 설계보상비를 지급합니다.

바. 전자입찰시스템 장애로 인하여 예정된 입찰집행이 어려운 경우 개찰시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.

사. 계약상대자는 대금청구시 청구금액의 2.5%에 해당하는 제주특별자치도지역개발공채를 소화하고 매입필증을 제출하여야 합니다.

아. 본 입찰과 관련하여 우리공사와 입찰자간 공고문의 입찰참가자격 등에 대하여 해석상 이견이 있을 경우 특별히 법령 및 규정에 정한 것이 없는 한 우리공사의 해석에 따릅니다.

자. 우리공사는 공정사회 및 중소기업 기술보호를 위한 JPDC 비밀유지협약(NDA) 제도를 추진중에 있습니다. 낙찰자 선정후 본 계약 체결시 ‘비밀유지협약서(표준양식)’에 의한 협약을 체결하여야 합니다.

차. 본 공사의 계약자는 국토교통부 정보통신망(www.kiscon.net), 건설행정시스템 세움터(www.eais.go.kr)에 관련 자료를 등재하고 관리하여야 함을 확인하고 입찰에 참여하시기 바랍니다.

15. 보충정보 제공

가. 전자입찰 이용안내 : 조달청 전자조달 콜센터(☎1588-0800)

나. 공사내용(설계 및 시공 등)에 관한 사항 : 공장혁신TFT(☎064-786-4274)

다. 입찰 및 계약에 관한 사항 : 구매계약팀(☎064-780-3415)

위와 같이 공고합니다.

2024년 05월 22일

제주특별자치도개발공사 계약담당