부산광역시 강서구 송정동 1774번지                         TEL. 051)941-8009

FAX. 051)941-0050

공 사 입 찰 설 명 서

◎ 공  사  명 : 부산그린파워(주) 폐기물 매립시설 조성공사

◎ 현장설명회 : 2011년 11월 25일 14시

◎ 입찰개시 및 투찰 마감  : 2011년 12월 27일 9시 ~ 14시

◎ 개찰 일시  : 2011년 12월 27일 16시

이 입찰설명서는 입찰자가 숙지하고 준수하여야 할 사항을 기재한 것으로서 모든 입찰 희망자는 이를 열람하여야 합니다.

본 건과 관련하여 문의할 사항이 있을 경우 아래를 참고하시기 바랍니다.

○ 입찰 진행담당 : 부산그린파워(주) 관리부 김청명 (T. 051-941-8009)

○ 공사 및 설계  : 부산그린파워(주) 기술부 김정호 (T. 051-941-8009)

○ 전자입찰 담당 : 더케이교원나라(주) 최동준 (T. 02-787-2812)

부산그린파워 주식회사

이 입찰에 참가하는 자는 다음의 입찰 설명서를 구성하는 공고 및 각종 규정을 반드시 열람하고 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따라 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있음을 알려드립니다.

- 다     음 -

1. 공사입찰공고

2. 청렴계약이행각서

3. 공사입찰유의서

4. 전자입찰유의서

5. 청렴계약입찰특별유의서

[첨부서류] 현장설명서

공 사 입 찰 공 고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 공 사 명 : 부산그린파워(주) 폐기물 매립시설 조성 공사

나. 공사현장 : 부산광역시 강서구 송정동 1774번지

다. 공사개요

○ 공구별 면적

구 분	면적(㎡)		비 고
1공구	64,381		현재 운영중
2공구	38,231		공사구간
3공구	33,720
4공구	35,053
유보지	10,196
매립시설계	181,581
기타 부지	23,000
전 체	203,085

○ 주요공종

- 토공

- 연약지반개량공

- 매립장차수공

- 지하수집수공

- 침출수집수공

- 가스포집공

- 우수배제공

- 기타 및 부대시설공

라. 공사기간

- 전체공사기간  : 2012년 1월 ~ 2019년 12월 (42개월)

- 연약지반개량  : 2012년 1월(착공) ~ 2014년 6월 (30개월)

- 2 공 구 조 성 : 2013년 3월 ~ 2013년  8월 (6개월)

- 3 공 구 조 성 : 2016년 1월 ~ 2016년  6월 (6개월)

- 4 공 구 조 성 : 2019년 7월 ~ 2019년 12월 (6개월)

※ 상기 공사기간은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음.

마. 공사기초금액 : 금 36,385,500,000원정(부가가치세 포함)

2. 입찰방법 :  총액입찰, 제한경쟁입찰, 최저가 입찰, 전자입찰

가. 본 입찰은 전자입찰로만 진행되며, 전자입찰서는 더케이교원나라(주)

(http://s2b.teachiworld.com) 전자입찰 사이트를 이용하여 제출하여야 합니다.

나. 청렴계약제가 적용됩니다.

	입찰 공고	현장설명회	입찰등록서류마감	입찰개시 및 투찰마감	개찰
일 시	2011.11.18.(금)	2011.11.25.(금) 14:00	2011.12.26.(월) 17:00	2011.12.27.(화) 09:00 ∼ 14:00	2011.12.27.(화) 16:00
장 소	더케이교원나라 B2B	당사 회의실 (부산시 강서구 송정동 1774)	당사 관리부 (부산시 강서구 송정동 1774)	투찰업체 담당자 PC	당사 계약담당자 PC
비고	○ 현장설명회 참가자격 : 토목분야 기술사 또는 토목분야 특급기술자 ○ 현장설명회 구비서류 : 자격증 사본(원본 지참 제시), 재직증명서, 법인인감증명서 각 1부, 사용인감도장, 본인 신분증 ○ 현장설명회 이후 시방서 및 설계서를 열람 할 수 있음

3. 입찰 주요일정

※ 현장설명 시작 이후 입실이 불가하며, 현장설명 중 퇴실 후 재입실이 불가

4. 입찰 참가 자격사항

가. 건설산업기본법령에 의한 토목건축공사업 또는 토목공사업 등록 업체

나. 2011년도 토목시공능력평가액이 165,375,000,000원 이상인 업체

다. 2010년도 결산서 상의 부채비율 250% 미만인 업체

라. 입찰공고일 현재 국토해양부 제정 건설기술관리법령에 의한 신용평가등급 중 기업         신용평가등급 BBB0이상 또는 기업어음에 대한 신용평가등급 A30이상 또는 회사채         에 대한 신용평가등급 BBB0이상인 업체

마. 현장설명에 참가하고 입찰등록을 필한 업체

바. 입찰 공고일 현재 기준 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생, 파산 또는 부         도, 워크아웃, 화의, 법정관리(신청기업 및 동 절차 중에 있는 업체 포함)대상이            아닌 업체

사. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 76조에 의한 부정당업체가 아닌         업체

아. 더케이교원나라(주) B2B(www.s2b.teachiworld.com)에 전자입찰 이용자 등록을 필한        업체(미등록업체는 입찰등록 마감일 이전에 이용자 등록을 하여야 합니다.)

5. 공동계약 : 공동계약은 불허합니다.

6. 입찰의 무효

가. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

나. 대리권이 없는 자가 한 입찰

다. 입찰보증금 납부일까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰

라. 입찰서가 소정일시까지 소정 장소에 도착하지 아니한 입찰

마. 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

바. 동일사항에 대하여 타인이 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰

사. 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해 또는 고의로 직원의 업무집행을 방해한

자의 입찰

아. 입찰서에 기재한 중요부분에 착오가 있음을 이유로 입찰참가자가 소정의 절차를           거쳐 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 입찰집행자가 이를 인정한 입찰

자. 지정된 방식의 입찰서를 사용하지 않고 제출한 입찰

차. 현장설명회에 참가하지 아니한 자의 입찰

카. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당업체들이         하나의 입찰을 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어           모두 무효

7. 입찰보증금

가. 입찰금액 총액의 100분의 5이상을 입찰등록마감일까지 현금 또는 당사가 인정하는         입찰보증보험증권으로 납부해야 하며, 우선협상대상자가 소정의 기한내에 계약을          체결하지 아니할 때에는 당해 입찰보증금은 당사에 귀속합니다.

나. 입찰보증금의 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전부터 입찰서 제출마감일 30일            이후까지이어야 합니다.

※ 입찰보증금은 입찰등록 서류 마감시까지는 납부하여야 합니다.

8. 건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료 등 정산 안내

가. 입찰참가자는 입찰금액 산정시 원가계산서상에 반영된 경비항목(산업재해, 고용보험,         연금보험, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금, 안전관리비, 환경보전비 등) 비율은          조정없이 반영하여야 하며, 사후 정산하여야 합니다.

9. 입찰등록서류

가. 입찰참가신청서(당사 소정양식) 1부

나. 서약서(당사 소정양식) 1부

다. 금융거래이상유무확인서 1부

라. 사업자등록증, 공사업면허증 및 면허수첩 각1부(원본대조필)

마. 법인등기부등본 1부(3개월 이내)

바. 법인인감증명서 1부(3개월 이내)

※ 사용인감 날인시 사용인감계 함께 제출

사. 시공능력평가액 확인원 1부

아. 2010년도 재무제표(회계법인 확인필) 또는 감사보고서 1부

자. 위 ‘아’ 항목 내 부채비율 별도 표기하여 인감 날인

차. 신용평가 확인원 1부

카. 입찰보증금(입찰금액의 5/100 이상) 또는 입찰유의서 제3조 각 호의 보증서

타. 시, 국세 완납 증명서 각 1부

파. 청렴계약이행각서(당사 소정양식) 1부

10. 우선협상대상자 결정 및 계약방법

가. 입찰자 설계VE 수행

- 공사 입찰방법은 공사입찰공고에 의거하여 기존 설계 기본방침(ex. 매립용량                2,920,015㎥ 등) 변경 없이 원안설계와 동등 또는 그 이상의 기능과 효과를 가진           방안을 제시하고 이를 근거로 한 공사비 절감을 최우선 목표로 합니다.

- 입찰에 참여하는 업체가 주관이 되어 설계VE를 수행하며, 설계와 시공은 일괄             보증해야 합니다.  또한 이에 따른 비용 등 모든 제반사항은 입찰에 참여하는             업체 부담으로 합니다.

- 설계VE에 대해 관련 분야별 전문기술사의 검증이 반드시 필요하며 향후                  기술사의 경력확인서를 필히 제출해야 합니다.

나. 설계VE 결과를 반영하여 최저가격으로 입찰한 업체가 우선협상대상자로 선정됩니다

다. 최저가격은 당사가 정한 내부규정에 따라 처리합니다.

라. 우선협상대상자는 설계VE에 대한 결과를 계약 전 당사에 제출하고 적정성 여부를          당사 내부규정에 따라 처리합니다.

마. 우선협상대상자는 당사가 요청하는 설계변경 사항에 대해 필히 응해야 하며, 변경         내용에 대해서는 우선협상과정에서 협의할 예정이고, 공사계약은 협의 완료후 체결        됩니다.

바. 상기 “다”호에 의해 부적합할 경우 또는 “라”, “마”호의 조건이 수용되지 아니하는        경우 차순위 업체로 우선협상대상자가 변경됩니다.

11. 입찰 유의사항

가. 입찰자는 당사의 입찰공고, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 현장설명서 및 더케         이교원나라(주) B2B 약관, 이용법, PC사용환경 등 기타 입찰에 필요한 모든 사항에         관하여 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게         있습니다.

나. 제출서류를 위조 또는 변조하여 제출한 업체가 적발되었을 때에는 낙찰 무효로 합         니다.

다. 입찰공고 및 입찰결과에 대한 정보는 더케이교원나라(주)(www.s2b.teachiworld.com)         에 게재됩니다.  기타 입찰에 관한 상세한 내용은 당사(051-941-8009)로 문의 하시기         바라며, 더케이교원나라(주) 입찰 사이트 회원 가입 및 투찰 방법 등에 대해서는 더         케이교원나라(주)(02-787-2812)에 문의하시기 바랍니다.

라. 더케이교원나라(주) B2B의 전자입찰 시행에 따른 수수료는 낙찰업체가 부담합니다.

마. 본 입찰에 참가하는 모든 업체는 청렴계약이행각서를 제출하여야 하며, 각서 내용을         위반하는 업체는 향후 입찰참가를 제한합니다.

바. 문의

- 입찰 진행담당 : 부산그린파워(주) 관리부 김청명 (T. 051-941-8009)

- 공사 및 설계  : 부산그린파워(주) 기술부 김정호 (T. 051-941-8009)

- 전자입찰 담당 : 더케이교원나라(주) B2B사업팀 최동준 (T. 02-787-2812)

※ 기타사항 : 원도급자가 전문업체와 공사를 진행하고자 할 때는 전문업체의 시공실적을                인정합니다.

※ 당사소개 : 한국교직원공제회가 전액 투자한 KTB자산운용(주)의 펀드를 통해 설립된                   저희 부산그린파워(주)는 6만 2천여평의 부지 위에 5만 5천여평의 매립                   면적을 기반으로 폐기물 매립 및 소각사업 뿐만 아니라, 태양광 발전,                     플라즈마 발전이 복합된 발전 클러스터를 건립하는 사업을 계획하고 있습                 니다.

2011.11.18.

부산그린파워 주식회사 대표이사

청렴계약 이행각서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 귀사에서 발주하는 모든 공사, 물품 제조 및 납품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 귀사의 청렴계약 취지에 적극 호응하여 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여    입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠으며, 이를 위반하여 일   체의 불공정한 행위가 사실로 드러날 경우에는 귀사의 「청렴계약 입찰특별유의서」에 의거   하여 귀사에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하   의 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

또한 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 "독점규제 및 공정거래에 관한   법률"에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하   지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한   이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계   직원에게 금품․향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 귀사가 시행하는 입찰에 입찰참   가자격제한 처분을 받은 날로부터 귀사가 제한하는 기간(6개월이상 2년이하)동안 참가하   지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품․향응 등을 제공한 사실이 드러날  경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사 임․직원이 관계직원에게 금품․향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 귀사의 조치와 관련하여 당사가 귀사를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2011.   .   .

서 약 자 :                                         (인)

부산그린파워(주) 대표이사 귀하

공사입찰유의서

제 1 조 (목 적)

이 유의서는 부산그린파워(주)(이하 “당사”라 한다)가 행하는 공사에 대한 입찰에 있어 당       해 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (입찰참가신청)

① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰공고 등에 지정된 기한 내에 다음 각 호의 서류           를 당사에 직접 제출하여 입찰참가를 신청하여야 한다.

1. 입찰참가 신청서(당사 소정양식) 1부

2. 입찰참가 자격을 증명하는 서류 1부

3. 법인인감 및 인감증명서 1부

4. 기타 현장설명 및 입찰공고에 요구하는 서류

② 제1항 제2호의 경우에는 원본을 제시하고 사본에 “원본대조필”을 명기하고 인감            으로 날인하여 제출하여야 한다.

제 3 조 (입찰보증금)

① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰신청 마감일까지 입찰금액의 100분의 5 이상의           입찰보증금을 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기           앞수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 다음 각 호의 보증서 등으로 당사에 납부하           여야 한다.

1. 국가재정법 시행령 제46조 제4항의 규정에 의한 금융기관 및 은행법에 의한               외국 금융기관이 발행한 지급보증서

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제192조에 따른 증권

3. 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권

4. 건설산업기본법에 의한 공제조합, 전기공사공제조합법에 의한 전기공사공제조              합, 신용보증기금법에 의한 신용보증기금, 기술신용보증기금법에 의한 기술신               용보증기금, 정보통신공사업법에 의한 정보통신공제조합, 엔지니어링기술진흥               법에 의한 엔지니어링공제조합, 산업발전법에 의한 공제조합, 소프트웨어산업               진흥법에 의한 소프트웨어공제조합, 전력기술관리법에 의한 전력기술인단체                 (지식경제부장관이 기획재정부장관과 협의하여 고시하는 단체에 한한다), 환               경친화적산업구조로의전환촉진에관한법률에 의하여 환경설비의 하자보증을 행              하는 한국기계공업진흥회, 건설폐기물의재활용촉진에관한법률에 의한 공제조               합, 골재채취법에 의한 공제조합, 지역신용보증재단법에 의한 신용보증재단                 또는 관광진흥법에 의하여 한국관광협회중앙회가 발행한 채무액 등의 지급을               보증하는 보증서

5. 제1호에 규정된 금융기관 및 외국금융기관과 체신관서가 발행한 정기예금증서

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 신탁업자가 발행하는 수익증권

7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 집합투자업자가 발행하는 수익증권        ② 낙찰자가 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 당해 입찰보증금은           당사에 귀속한다.

③ 입찰보증금은 입찰절차 종료 후 입찰자의 청구에 의하여 반환한다. 다만, 낙찰자            의 입찰보증금은 계약 체결시까지 반환하지 아니한다.

제 4 조 (입 찰)

① 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가할 수 없다.

② 입찰참가신청서 제출시 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가 할 수           있다.

③ 제15조의 규정에 의한 부정당업자로 입찰참가자격을 제한받고 있는 자는 제2항의           규정에 의한 대리인으로 할 수 없다.

제 5 조 (입찰서의 작성) 입찰서는 소정의 서식에 의하여 작성하여야 하며, 입찰금액은 부        가가치세를 포함한 총액을 표기하여야 한다.

제 6 조 (입찰서의 제출 등)

① 입찰서는 1인 1통만을 제출하여야 한다.

② 일단 제출한 입찰서는 취소, 철회, 교환 또는 변경할 수 없다.

제 7 조 (낙찰자의 결정) 입찰공고 및 현장설명서에 따른다.

제 8 조 (경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한다.

제 9 조 (입찰의 무효) 다음 각 호의 1에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

2. 대리권이 없는 자가 한 입찰

3. 입찰보증금 납부일까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰

4. 입찰서가 소정일시까지 소정 장소에 도착하지 아니한 입찰

5. 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

6. 동일사항에 대하여 타인이 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰

7. 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해 또는 고의로 직원의 업무집행을 방해한

자의 입찰

8. 입찰서에 기재한 중요부분에 착오가 있음을 이유로 입찰참가자가 소정의 절차를            거쳐 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 입찰집행자가 이를 인정한 입찰

9. 지정된 방식의 입찰서를 사용하지 않고 제출한 입찰

10. 현장설명회에 참가하지 아니한 자의 입찰

제 10 조 (관계사항의 숙지) 입찰자는 공사입찰유의서, 현장설명서, 시방서, 설계도면, 계         약일반조건 등 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰 전에 완전히 숙지하여야        하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있다.

제 11 조 (입찰의 연기 등)

① 당사는 필요한 경우에는 현장설명서 등에 예정된 입찰 또는 개찰의 일시를 연기할           수 있다. 이때에는 현사유와 연기 일시를 입찰참가자에게 통지하여야 한다.

② 당사는 입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰참가자가 없거나 최저가 입찰자가            없을 경우 다시 입찰에 붙일 수 있다. 이 경우 입찰자 또는 입찰 횟수의 제한을            받지 아니한다.

③ 입찰참가자나 최저가 입찰자가 없는 경우 또는 최저가 입찰자가 계약을 체결하지           아니하는 경우에는 본 계약 건 입찰등록자에 한하여 재입찰에 붙일 수 있다.

④ 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰의 연기로 인하여 발생한 비용을 당사에 청구할           수 없다.

제 12 조 (입찰보증금의 계약보증금으로의 대체)

① 최저가 입찰자가 납부한 입찰보증금은 소정의 절차에 따라 계약보증금으로 대체할           수 있다.  다만, 입찰보증금과 계약보증금과의 차이가 있는 경우에는 그 차액을             추가로 납부하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 대체는 계약이 성립한 때에 이루어진 것으로 본다.

제 13 조 (계약의 체결)

① 당사와 계약을 체결하고자 하는 자는 관계법령의 규정에의하여 필요한 관계서류를           계약담당자에게 제출하여야 한다

② 우선협상대상자가 정당한 이유없이 제1항의 규정에 의하여 계약을 체결하지 아니           할 때에는 당사로부터 당해 우선협상대상자가 취소 된다.

③ 우선협상대상자가 개찰 후 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생, 파산             또는 부도, 워크아웃, 화의, 법정관리(신청기업 및 동 절차 중에 있는 업체 포함)인           경우에는 우선협상대상자가 취소된다.

제 14 조 (계약의 성립)

계약은 당사와 계약상대자가 계약서를 작성, 기명날인함으로써 확정된다.

제 15 조 (기타사항) 현장설명서, 계약일반조건 및 이 입찰유의서에 명시되지 아니한 기타            의 사항에 대하여는 당사에서 정하는 바에 의한다.

전 자 입 찰 유 의 서

제 1 조 (목적) 이 유의서는 부산그린파워(주)(이하 “당사”라 한다)가 실시하는 전자입찰에     있어 특별히 유의하여야할 사항을 정함을 목적으로 한다. 이 유의서는 당사 입찰유의     서의 부속서류로서 전반적인 입찰 진행과정에서 전자입찰에 관하여 적용한다.

제 2 조 (전자입찰참가를 위한 업체등록) 전자입찰에 참가하고자 하는 자는 전자입찰서 제     출마감일 전일까지 더케이교원나라(주) B2B(www.s2b.teachiworld.com)에 등록을 완료     하여야 한다.

제 3 조(전자입찰의 참가방법 등) 전자입찰에 참가하는 방법은 다음과 같다.

1. 전자입찰자는 더케이교원나라(주) B2B(www.s2b.teachiworld.com) 등록을 마친 후     시스템에 접속하여야 하며 접속 중에는 시스템의 안내에 따라야 한다.

2. 전자입찰서의 제출은 시스템에 의하여 입찰서를 송신함으로써 완료되며, 입찰자는 입      찰 후 입찰서가 이상 없이 제출되었음을 확인하여야 한다.

3. 전자입찰서의 제출 시각은 전자거래기본법 제6조 및 전자서명법 제20조에서 정한     바에 따라 전자입찰서가 시스템 문서접수지원서버에 접수된 시각으로 한다.

제 4 조 (전자입찰서의 제출) ① 전자입찰자는 입찰공고에 지정된 기간 내에 시스템을 통하     여 전자입찰서를 제출하여야 한다.

② 동일사항에 대하여 1인의 입찰자는 1통의 입찰서만을 제출할 수 있다.

제 5 조 (전자입찰의 취소신청) ① 전자입찰서의 입찰금액 등 중요부분의 기재오류를 이유     로 전자입찰자가 입찰취소 의사를 표시하면 전자입찰집행자는 당해 입찰서를 무효처     리 할 수 있다. 취소의사를 표시한 전자입찰자는 당해 입찰에 참가할 수 없으나 전자     재입찰에 부치는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 전자입찰의 취소에 대한 의사표시는 개찰시간 전까지 서면으로 전자입찰집행자에      게 직접 제출하여야 한다. 다만, 직접 제출이 곤란한 경우에는 개찰시간 전까지 우편      또는 모사전송(FAX)의 방법으로 전자입찰집행자에게 제출(모사전송시 추후 원본 제      출)할 수 있다.

제 6 조 (전자입찰의 개찰) 전자입찰의 개찰은 입찰공고에 명시된 입찰장소에서 지정된         일시에 전자입찰집행자가 집행하며, 전자입찰자 또는 그 대리인은 개찰에 참관할 수      있다. 이 경우 전자입찰집행자는 개찰에 참관하고자 하는 자에게 신분증 및 입찰참가      등록증의 제시를 요구할 수 있다.

제 7 조 (입찰의 취소) ① 낙찰자 선정통보 이전에 당사의 불가피한 사유가 있을 때에는       당해 입찰을 취소할 수 있다.

② 전자입찰집행자는 정상적으로 전자입찰서를 제출하였으나 PC나 시스템의 오류 등      으로 인하여 공정한 입찰의 집행이 곤란하다고 판단될 경우 해당 입찰 전체를 취소      할 수 있다.

③ 전자입찰자는 제1항 및 제2항의 조치에 대하여 이의제기나 그로 인한 손해배상을      청구할 수 없다.

제 8 조 (개찰결과 확인) 개찰이 완료된 후 전자입찰자는 시스템을 통하여 그 입찰결과(본      인과 우선협상대상자 정보)를 확인할 수 있다.

제 9 조 (동일가격입찰인 경우의 결정)전자입찰의 결과 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인     때에는 추첨을 통하여 우선협상대상자를 결정한다.

제 10 조 (전자재입찰) ①전자입찰로 재입찰을 실시하는 경우에는 시스템에서 입찰시간을       다시 정하여 입찰에 부칠 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 전자재입찰에 참가하고자 하는 자는 개찰결과 조회화면에서      새로 정한 입찰서 제출마감시간 내에 전자입찰서를 제출하여야 한다.

제 11 조 (정보안내) 전자입찰의 공고 및 결과에 대한 정보는 더케이교원나라(주)

(www.s2b.teachiworld.com) 입찰사이트에서 제공된다.

청렴계약 입찰특별유의서

제 1 조 (목적) 이 청렴계약 입찰특별유의서는 부산그린파워(주)(이하“그린파워”)에서 공사․물품․용역․구매 등에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 "입찰유의서" 외에 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (입찰참가업체의 청렴계약 이행각서 제출) ① 입찰에 참여하는 모든 업체는 발주기관과 입찰참여업체가 상호신뢰를 바탕으로 입찰, 계약 및 계약이행과정에서의 담합 등 불공정행위나 관계직원에게 금품․향응 등 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반시 입찰참가자격 제한, 계약해제 등을 감수하겠다는 「청렴계약이행각서」(이하 “청렴각서”)를 제출하여야 한다.

② 우선협상대상자로 선정된 업체는 계약체결시 청렴각서에 인감날인하여 제출하여야 한다.

제 3 조 (계약담당자 등의 청렴계약 이행서약서 징구) 계약 관련 담당부서장(부ㆍ팀장 포함) 및 계약담당자가 입찰, 계약 및 계약이행과정에서 입찰참가업체로부터 어떠한 명목의 금품이나 향응을 요구하거나 받지 않으며 위반 시에는 관계법에 따라 징계 등 문책을 감수하겠다고 서명한『청렴계약 이행서약서』를 제출하여 보관하여야 한다.

제 4 조 (부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 그린파워에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 관련법령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰,계약 및 계약이행과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 그린파워에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰, 계약 및 계약이행과정에서 관계직원에게 금품․향응 등을 제공함으로서 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 금품․향응 등을 제공한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰, 계약 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품․향응 등을 제공한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 못한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 입찰참가자격을 제한하는 그린파워 처분과 관련하여 입찰에 참가하는 업체는 그린파워를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이의를 제기하지 아니한다.

제 5 조 (계약해지 등) 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외하거나 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다. 다만, 발주기관의 사업수행상 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 발주 기관의 사업수행상 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 그린파워의 처리에 대하여 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제 6 조 (기타사항) 입찰에 참가하는 업체의 임․직원과 대리인이 관계직원에게 금품․향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하여야 한다.