2003년도 적용 표준품셈 개정내용

2002.    12

대  한  건  설  협  회

목             차

Ⅰ. 토 목 부 문 제1장 적용기준 1-16 품의 할증 ----------------------------- 1 제3장 토 공 3-1-3 암석절취 ----------------------------- 2 3-11 암 성토 ----------------------------- 8 제7장 돌쌓기 및 헐기 7-6 석축벽돌헐기 및 콘크리트부수기 ----------- 10 제10장 기계화시공 10-1 기계화시공 적용기준 -------------------- 11 10-11 덤프트럭 ---------------------------- 12 10-19 크러셔 ----------------------------- 14 제12장 도로포장 및 유지 12-15 콘크리트포장 거푸집 ------------------- 15 12-26 차선도색 ---------------------------- 16 12-27-3 도로유지공(7. 시선유도표지 설치 및 철거) -------- 19 12-35 방음벽 설치 --------------------------- 20 제17장 철강 및 철골공사 17-2 강교도장 ------------------------------ 23	제18장 개 간 18-10 답면고르기 ------------------------ 26 제19장 관 부설 및 접합 19-23 단수천공분기점 분기 --------------- 27 제20장 토질 및 토양조사 20-9 대구경보링(지하수개발) --------------- 28 제21장 측량 21-24 수치지도 작성 ------------------ 33 21-29 신규등록측량 ------------------ 58 21-30 등록전환측량 ------------------ 59 21-31 분 할 측 량 ------------------ 60 21-32 경계복원측량 ------------------ 60 21-33 지적삼각측량 ------------------ 61 21-34 지적도근측량 ------------------ 61 21-35 지적확정측량 ------------------ 62 21-36 지적도 작성 ------------------ 63 부록1. 건설기계가격표 ------------------------ 64 부록3. 참고품 14. LMC 교면포장 ------------------------- 65 15. P.B.D공법 ---------------------------- 72

Ⅱ. 건 축 부 문 제4장 조경공사 4-3-1 나무높이에 의한 굴취 -------------- 75 4-4-1 나무높이에 의한 식재 -------------- 75 4-4-4 관목류 식재 ---------------------- 76 4-4-7 롤형 지피식물 식재 --------------- 77 4-5-1 전정(2.가로수전정) ---------------- 78 4-6 정원석 쌓기 및 놓기 --------------- 79 제6장 철근콘크리트공사 6-3-5 유로폼 --------------------------- 80 제7장 철골공사 7-2-5 스터드볼트 설치 ----------------- 81 제13장 방수공사 13-8 코킹 및 신축줄눈 ------------------ 82 제14장 지붕 및 홈통공사 14-1-7 폴리카보네이트 지붕잇기 ----------- 83 제19장 칠공사 19-3 조합유성페인트칠 ----------------- 84 제20장 수장공사 20-3 도배바름 ------------------------ 85 20-7 걸레받이 붙임 -------------------- 86	Ⅲ. 기계설비부문 제II편 기계설비공사 제1장 공통공사 1-2-6 적산열량계 설치 ------------- 87 제2장 공기조화설비공사 2-1-9 전기보일러 설치 ------------- 89 2-1-10 전기온수기 설치 ------------- 89 2-5-8 중앙처리장치 설치 ------------ 90 2-5-9 입·출력장치 설치 ----------- 91 2-5-10 콘솔 설치 ----------------- 92 제III편 플랜트설비공사 제1장 공통공사 1-1-1 플랜트 배관 ----------------- 93 제5장 쓰레기 소각기계설비 공사 5-1 소각로 설치 ------------------- 94 5-2 폐열보일러 설치 --------------- 97 5-4 반건식 반응탑 설치 ------------- 99 5-5 탈질설비 설치 --------------- 101 제6장 하수처리 기계설비 공사 6-1 수중펌프 설치 --------------- 103 6-2 모노레일 설치 --------------- 104

Ⅰ. 토 목 부 문

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
1-16 품의할증	보완	1-16 품의 할증 4. 야간작업 PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률저하를 20%까지 계상한다. <작업능률저하 20%인 경우 적용예시＞[eqn: 1 over 1-0.2]=1.25>	1-16 품의 할증 4. 야간작업 PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25%까지 가산한다.	* 건축·기계설비 부문도 일괄적으로 개정

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
3-1-3 암석절취	보완	3-1-3 암석절취 1. 육 상 가. 암석절취(편절형) (□당)	3-1-3 암석절취 1. 육 상 가. 미진동암파쇄굴착 (□당)	* 건축부문도 일괄적으로 개정
종별 암질	폭 약 (kg)	뇌 관	도 화 선	비트 (개)	화약공 (인)	보통 인부 (개)	착암공 (인)	착암기 (시간)	공기 압축기 (시간)	갱부 (인)	미진동 파쇄기 (□)	비트 (개)	로드 (개)	생크로드 (개)	슬리브 (개)	화 약 취급공 (인)	보통 인부 (인)	크롤러 드 릴 (시간)	공 기 압축기 (시간)	대형 브레이커 (시간)	대형브레이커치즐 (개)
인력 (개)	기계 (개)	인력 (m)	기계 (m)	인력
0.283	0.0079	0.0047	0.0047	0.0118	0.0264	0.0528	0.211	0.2320	0.0455	0.0009
풍화암 연 암 보통암 경 암	0.08 0.12 0.16 0.20	1.8 2.7 3.6 4.5	0.4 0.6 0.8 1.0	0.5 0.9 1.6 2.3	0.4 0.6 0.9 1.3	0.003 0.004 0.005 0.005	0.05 0.06 0.07 0.08	0.13 0.14 0.16 0.19	0.017 0.032 0.048 0.080	0.105 0.192 0.288 0.483	0.035 0.064 0.096 0.161	0.20 0.45 0.75 1.10
* 본품은 공기압축기＞10.3□ / min(365cfm), 착암기＞레그해머 30kg급, 비트＞스웨덴제 Copco Bit, 현장조건은 보통을 기준으로 한 것임. 나. 암석절취(리퍼병행) (□당)
나. 정밀진동제어발파 (□당)
구분 암질	폭 약 (kg)	뇌 관 (개)	비 트 (개)	화약공 (인)	보통인부 (인)	착암공 (인)	착암기 (시간)	공기압축기 (시간)	리퍼도저운전	폭약 (□)	뇌관 (개)	비트 (개)	로드 (개)	생크로드 (개)	슬리브 (개)	화 약 취급공 (인)	보통 인부 (인)	크롤러 드 릴 (시간)	공 기 압축기 (시간)	대형 브레이커 (시간)	대형브레이커치즐 (개)
20t급 (시간)	30t급 (시간)
0.24	0.78	0.0052	0.0031	0.0031	0.0078	0.0263	0.0438	0.140	0.1540	0.0273	0.0006
연 암 보통암 경 암	0.078 0.112 0.150	0.39 0.56 0.75	0.0026 0.0035 0.00375	0.039 0.049 0.060	0.091 0.112 0.143	0.0208 0.0336 0.060	0.1248 0.2016 0.3623	0.0416 0.0672 0.1207	0.029 0.029 0.029	0.016 0.016 0.016
* 본품은 암석절취(편절형)와 동일기준으로 한 것임.	다. 암석절취(착암기) (□당)
폭약 (□)	뇌관 (개)	비트 (개)	화약취급공 (인)	보통인부 (인)	착암공 (인)	착암기 (시간)	공기압축기 (시간)
0.35	1.0	0.008	0.041	0.103	0.041	0.203	0.074

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
		다. 암석절취(크롤러드릴) (10□당)	라. 암석절취(크롤러드릴) (□당)
구분 암질	폭 약 (kg)	뇌 관 (개)	비 트 (개)	로 드 (개)	샹크로드 (개)	슬리브 (개)	화약공 (인)	보통인부 (인)	크롤러사용 (시간)	공기압축기사용 (시간)	발파규모 (□/공)	폭약 (□)	뇌관 (개)	비트 (개)	로드 (개)	생크로드 (개)	슬리브 (개)	화 약 취급공 (인)	보통인부 (인)	크롤러 드 릴 (시간)	공 기 압축기 (시간)
연 암 보통암 경 암	1.2 1.6 2.0	0.6 0.8 1.0	0.029 0.034 0.037	0.015 0.017 0.018	0.015 0.017 0.018	0.035 0.038 0.040	0.110 0.160 0.210	0.204 0.313 0.422	0.330 0.470 0.730	0.360 0.520 0.800
2이상 ∼5미만	0.35	0.33	0.004	0.002	0.002	0.006	0.023	0.038	0.092	0.102
5이상 ∼10미만	0.35	0.13	0.0031	0.001	0.001	0.003	0.016	0.024	0.048	0.053
* 본품은 공기압축기＞17.0□ / min(600cfm), 착암기＞크롤러드릴(17□ / min)을 기준한 것임.
10이상 ∼20미만	0.35	0.06	0.002	0.001	0.001	0.002	0.013	0.020	0.040	0.044
20이상	0.35	0.03	0.001	0.001	0.001	0.001	0.010	0.016	0.032	0.036
2. 수중 (10□당)	2. 수중 (□당)
종별 암질	폭 약 (kg)	뇌 관 (개)	비 트 (개)	착암공 (개)	화약공 (인)	보통인부 (인)	잠수부 (조)	착암기 (시간)	공기압축기 (시간)
구 분	폭약 (□)	뇌관 (개)	비트 (개)	화 약 취급공 (인)	착암공 (인)	보통인부 (인)	잠수부 (조)	착암기 (시간)	공기압축기 (시간)
풍화암	4.10	8.50	0.03	0.34	0.70	0.60	2.80(5.10)	2.10	0.70
우물통발파	0.96	3.0	0.009	0.11	0.094 (0)	0.19	0.5 (1.0)	0.474	0.158
연 암	6.20	12.70	0.04	0.64	0.90	1.00	4.30(7.60)	3.84	1.28
보통암	7.00	14.00	0.05	0.96	1.00	1.00	5.00(10.00)	5.76	1.92	우물통발파 이외	0.92	1.2	0.006	0.07	0.064 (0)	0.11	0.3 (0.6)	0.313	0.104
경 암	12.00	25.00	0.05	1.60	1.20	2.00	8.00(13.00)	9.66	3.24
* 본품은 천공발파품이며 ( )내는 잠수부 천공시 품임. * 수중 잠수부작업은 천공능력 저하율 50%가 포함된 것임. 3.인력깎기 (□당)	3.인력깎기 (□당)
종 류	할 석 공	보 통 인 부	종 류	할 석 공	보 통 인 부
풍 화 암 및 연 암 보 통 암 경 암	0.74 1.10 2.03	0.37 0.55 1.01	풍 화 암 및 연 암 보 통 암 경 암	□현행과 같음□
*본품은 발파시공이 불가능할 때 적용함.	*본품은 발파시공이 불가능할 때 적용함.

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
		[주] ① 본품은 모암 1□를 파쇄하는 것을 기준한 것이다. ② 화약은 일반 상용 다이나마이트(□ 25∼50 m/m )를 기준한 것이다. ③ 국산비트의 성능은 일제의 65%로 추정하고 성능시험에 따라 산정한다. ④ 리핑작업의 경우 자연상태 탄성파 속도가 1,800m / sec이하의 암은 발파없이 리핑으로 할 수 있고, 탄성파 속도가 1,800m / sec를 초과하는 암은 발파와 리핑작업을 병행시공할 수 있다. ⑤ 리퍼도저 선정에서 암굴착량이 25,000□ 이상의 경우에는 30t급, 25,000□ 미만에는 20t급을 사용하고 현장여건을 감안하여 결정한다. ⑥ 리퍼 병행 암석절취는 리퍼도저 투입이 가능한(절취폭 4m 이상 길이 20m이상 - 그림 1,2참조) 넓은 지역으로서 현장여건을 고려하여 결정한다.	[주] ① 육상 암석절취의 각 공법별 구분은 다음과 같다. 가. 미진동암파쇄굴착 : □미진동파쇄기□를 사용하여 암반에 균열을 발생시킨 후 대형브레이커에 의한 2차 파쇄를 실시하는 공법으로, 암질이 단단한 경우 적용성이 떨어지는 경우가 있으므로 암질을 고려하여 적용여부를 판단하여야 한다. 나. 정밀진동제어발파 : 소량의 폭약으로 암반에 균열을 발생시킨 후 대형브레이커에 의한 2차 파쇄를 실시하는 공법이다. 다. 암석절취(착암기) : 소형착암기에 의한 천공후 폭약을 장약하여 발파하는 공법으로, 절취폭이 4m 미만인 경우 등 작업장소가 협소하거나 현장여건상 크롤러드릴 사용이 곤란한 경우에 적용한다 라. 암석절취(크롤러드릴) : 크롤러드릴에 의한 천공후 폭약을 장약하여 발파하는 공법이다. ② 발파규모(굴착규모)는 발파원과 보안시설물(가축, 가옥 등)간의 이격거리 및 소음·진동규제기준, 현장조건 등을 고려하여 천공1공당 굴착량을 산정하여 결정한다. 발파규모(□/공)=최소저항선(m)×천공간격(m)×굴착심도(벤치높이)(m) ※ 진동속도에 의한 발파규모의 선정방식(예시)
					발파규모(□/공)	발파공법	허용지발당장약량(kg/delay)
		⑦ 크롤러드릴 사용 암석절취는 동일장소내에서 연속적으로 작업이 가능한 경우로서 암석절취량이 25,000□정도 이상의 경우에 적용한다. 단, 공사물량은 편의상 표시한 것으로 실제적용 과정에서는 공사기간, 현장조건 등에 따라 적의 판단 적용할 수 있다. ⑧ 암석파쇄후 깬 잡석을 채취할 경우에는 본품 이외에 소요 깬 잡석 □당 할석공 0.20인을 가산한다.
					2이상∼5미만	진동제어(소규모)	0.5이상∼1.6미만
					5이상∼10미만	진동제어(중규모)	1.6이상∼5.0미만
					10이상∼20미만	일반발파	5.0이상∼15.0미만
					20이상	대규모발파	15.0 이상
			위 허용지발당장약량은 다음 발파진동추정식에 의하여 산출한다. 다만, 시험발파에 의한 발파진동추정식의 변동이 있는 경우에는 그에 따른다. [eqn: V~=~160 { ( { D} over { SQRT {W} } )}^{-1.6 }] 여기서, V : 예상진동속도 (cm/sec) D : 폭원에서의 이격거리 (m) W : 허용지발당장약량 (kg/delay) 또한, 소음에 민감한 가축사육시설이나 종교시설 등이 근접한 경우에는 위 예시에 따르지 않고 별도 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
		⑨ 시공면의 면고르기를 요할 때에는 본품 이외에 면고르기품을 별도로 가산한다. ⑩ 석산 또는 파쇄 현장의 조건에 따라 가시설, 피복토 제거등은 별도 가산한다. 단, 수중암석 절취시는 적용하지 않는다. ⑪ 인력으로 파쇄할 경우 잡재료는 재료비의 5%이내에서 가산하고 본품 이외의 비트를 사용할 경우 그 소모는 다음표를 기준으로 한다.	③ 화약은 일반상용 에멀젼폭약(□25∼50□)을 기준한 것이나 현장여건에 따라 폭약종류를 달리할 수 있으며, 뇌관은 M.S전기뇌관(8호)을 기준한 것으로 현장여건상 비전기식뇌관을 사용할 경우에는 별도로 계상한다. ④ 발파석의 비산방지를 위한 발파보호공이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다.
구 분	굴삭기(0.7□)	보호매트
	구 분	일 본 Dia Bit	스 웨 덴 Seco	비 고
미진동암파쇄굴착, 암석절취(착암기)	0.053hr	굴삭기 기계경비의 5%
	풍 화 암 연 암 보 통 암 경 암	0.006개 0.008〃 0.010〃 0.010〃	0.004개 0.005〃 0.006〃 0.006〃
정밀진동제어발파	0.035hr	굴삭기 기계경비의 5%
암석절취(크롤러드릴) 2이상∼5미만	0.021hr	굴삭기 기계경비의 5%
⑫ 본품은 작업조건이 보통인 경우를 기준한 것이므로 현장조건을 감안 재료비(화약, 뇌관, 비트, 로드, 샹크로드, 스리브)를 제외한 품에 다음 표 범위내에서 증감할 수 있다.
암석절취(크롤러드릴) 5이상∼10미만	0.013hr	굴삭기 기계경비의 5%
⑤ 착암기를 사용한 □터파기□의 경우에는 현장조건을 감안하여 □다.암석절취(착암기)□의 재료비(폭약,뇌관,비트)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다. ⑥ 발파작업에 사용되는 발파선, 전색재료 등의 잡재료는 재료비의 5%로 계상한다. ⑦ 암석파쇄후 깬잡석을 채취할 경우에는 소요 깬잡석 □당 할석공 0.20인을 계상한다. ⑧ 암석을 용도별로 선별하거나 소할이 필요한 경우에는 선별 또는 소할품을 별도 계상할 수 있으며, 소할품은 □10-20 대형브레이커□를 사용할 경우 다음과 같다.
	현 장 조 건	증감율(%)
	작업에 제한을 받지 않는 구간의 암절취	-5
	보통조건의 암절취	0
	교통, 가옥, 전선 및 철로 등의 제한을 받는 구간의 암절취	5
⑬ 뇌관은 공업용 뇌관을 기준한 것이므로 전기뇌관을 사용할 경우에는 도화선을 가산하지 않는다. ⑭ 암석을 용도별 선별 또는 소할이 필요한 경우에는 선별 또는 소할품을 별도 가산할 수 있으며, 소할품은 □10１19 대형 브레이커□를 사용할 경우의 작업능력은 다음 표를 적용한다.
	구분 암종류	규 격
	구 분	규 격
	30cm 미만	30cm 이상
	30□미만	30□이상
연 암	10	12
	작업능력(□/hr)	9	11
경 암	8	10

항 목	구 분	현 행						개 정	비 고
		⑮ 절취암괴(크롤러드릴 사용시)의 소할이 필요한 경우 15% 범위내에서 별도 가산할 수 있다. 파쇄현장에서 싣는 장소까지의 운반이 필요할 경우에는 별도 가산한다. 본품 2. 수중파쇄는 2.5∼8m를 기준으로 한 것이며 수심 8∼15m에서는 본품의 1.5배, 수심 2.5m 이내에서는 본품의 1.2배로 한다. 다공질암에 대하여는 현지 실정에 따라 본품 이외에 별도 계상할 수 있다. 현장여건상 특수 발파공법을 적용하는 경우에는 발파품을 별도 계상할 수 있다. 암의 분류는 일반적으로 1１29 토질 및 암의 분류 □1∼9□항에 따르나 탄성파 속도 및 내압강도의 측정이 가능할 경우에는 다음표에 따를 수도 있다. 암종별 탄성파속도 및 내압강도						⑨ □라. 암석절취(크롤러드릴)□의 발파규모 □10이상∼20미만□ 및 □20이상□의 경우 암석반출을 위한 적재 및 운반 등이 용이하도록 소할이 필요한 경우 15% 범위내에서 별도 가산할 수 있다. ⑩ 시공면의 면고르기가 필요한 경우에는 면고르기품을 별도로 계상한다. ⑪ 현장여건상 가시설, 피복토 제거 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑫ 파쇄현장에서 싣는 장소까지의 운반이 필요할 경우에는 별도 계상한다. ⑬ 다공질암 또는 현장여건상 특수 파쇄공법·발파공법을 적용하는 경우에는 별도로 계상한다. ⑭ 육상 암석절취에 사용되는 착암기와 크롤러드릴, 공기압축기, 대형브레이커의 장비규격은 다음과 같다. ㉮ 암석절취(착암기) : 착암기 2.7□/min, 공기압축기 10.3□/min ㉯ 미진동암파쇄굴착, 정밀진동제어발파, 암석절취(크롤러드릴) : 크롤러드릴 17□/min, 공기압축기 17□/min ㉰ 대형브레이커 : 대형브레이커+굴삭기(유압식백호) 0.7□ ⑮ 수중 암석절취의 기준 및 적용방법은 다음과 같다. ㉮ 본 품은 천공발파를 기준한 것으로, 공기압축기 10.3□/min, 착암기 2.7□/min를 기준한 것이며, ( )내는 잠수부 천공시의 품이다. ㉯ 본 품은 수심 2.5m이상∼8m미만을 기준한 것으로, 수심 2.5m미만에서는 재료비(폭약,뇌관)를 제외한 품의 20%를 감할 수 있으며, 수심이 8m이상∼15m미만에서는 재료비(폭약,뇌관)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다. ㉰ 작업용 선박이나 가시설 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다.
		암종류 구분		자연상태의 탄성파속도 V(□ / sec)	암 편 탄성파속도 V(□ / sec)	암 편 내압강도 (kg /□)	비 고
		풍화암 연 암 보통암 경 암 극경암	A B A B A B A B A	0.7∼1.2 1.0∼1.8 1.2∼1.9 1.8∼2.8 1.9∼2.9 2.8∼4.1 2.9∼4.2 4.1이상 4.2이상	2.0∼2.7 2.5∼3.0 2.7∼3.7 3.0∼4.3 3.7∼4.7 4.3∼5.7 4.7∼5.8 5.7이상 5.8이상	300∼700 100∼200 700∼1,000 200∼500 1,000∼1,300 500∼800 1,300∼1,600 800이상 1,600이상	내압강도 1. 시편＞5□입방체 2. 노건조＞24hr 3. 수중침윤＞2일 4. 내압시험 5. 시험방향(가압방향) z축(절면에 수직) (탄성파속도가 가장 느린방향) 암편탄성파속도 1. 시편＞두께15∼20□ 상하면이 평행면 2. 측정방향 x축(탄성파속도가 가장 빠른 방향)(절면에 평행)

항 목	구 분	현 행												개 정	비 고
		위 표에서 A,B 그룹의 비교는 다음과 같다.													□기계사용터파기(암반)□의 □화약사용□ 품은 개정내용의 [주] 제5항으로 흡수
		구 분			A					B
		대표적 암명			편마암, 사질편암, 녹색편암, 각암, 석회암, 사암, 휘록응회암, 역암, 화강암, 섬록암, 감람암, 사교암, 유교암, 현암, 안산암, 현무암					흑색편암, 녹색편암, 휘록응회암, 혈암, 니암, 응회암, 집괴암
		함유물 등에 의한 시각판정			사질분, 석영분을 다량함유하고 암질이 단단한 것, 결정도가 높은 것.					사질분, 석영분이 거의 없고 응회분이 거의 없는 것, 천매상의 것
		500∼1,000gr 해머의 타격에 의한 판정			타격점의 암은 작은 평평한 암편으로 되어 비산되거나 거의 암분을 남기지 않는 것					타격점의 암자신이 부서지지 않고 분상이 되어 남고 암편이 별로 비산되지 않는 것
		3-1-4 기계사용터파기(암반) 1. 화약사용 (□당)
		종별 구분	폭약 (kg)	뇌관 (개)		도화선 (m)	비트 (개)	화약공 (인)	보통 인부 (인)		착암공 (인)	착암기 (시간)	공 기 압축기 (시간)
		풍화암 연 암 보통암 경 암	0.12 0.18 0.24 0.30	0.6 0.9 1.2 1.5		0.60 0.90 1.35 1.95	0.0045 0.006 0.0075 0.0075	0.07 0.09 0.10 0.12	0.19 0.21 0.24 0.28		0.026 0.048 0.072 0.121	0.159 0.288 0.435 0.726	0.053 0.096 0.145 0.242
		* 본품은 암석절취(편절형)와 동일기준으로 한 것임. [주] ① 본품은 자연상태를 기준한 것이며, 소운반 흙막기 및 물푸기 품은 포함되지 않았다. ② 비트는 스웨덴제(Copco) 기준이며 암석파쇄후 처리비용은 별도 계상한다. ③ 시공면의 면고르기를 요할 때는 고르기품을 별도 가산한다. ④ 뇌관은 공업용 뇌관을 기준하였으므로 전기뇌관을 사용할 경우에는 도화선을 계상하지 않는다. ⑤ 다공질 암에 대하여는 현지실정에 따라 본품 이외에 별도 계상할 수 있다.

항 목	구 분	현 행											개 정															비 고
3-11 암 성토	신설	□ 없 음 □ ※ 11-2 손료산정											3-11 암 성토(□03신설) (100□당)
													구 분				단위		규격			수 량
																						다짐두께 30□			다짐두께 60□
													특별인부				인					0.047			0.059
													양족식로울러(자주식)				시간		32톤			0.38			0.47
													진동로울러				시간		10톤			0.38			0.47
													[주] ① 본 품은 양족식로울러(자주식)를 사용하여 암(巖)을 다짐한 후 진동로울러로 추가다짐을 실시하여 도로 노체 등을 완성하는 작업에 대한 것이다. ② 암 버럭의 부설비용은 별도로 계상한다. ※ 11-2 손료산정
		분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)				분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)
																							상각비 계 수	정비비 계 수		관리비 계 수	계
									상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
		1506-0011 0012 0015 0019 0025 0030 0037	11 12 15 19 25 30 37	9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	889 889 889 889 889 889 889	583 583 583 583 583 583 583	2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472	1506-0011 0012 0015 0019 0025 0030 0032 0037	11 12 15 19 25 30 32 37	9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	889 889 889 889 889 889 889 889		583 583 583 583 583 583 583 583	2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472

항 목	구 분	현 행										개 정										비 고
		※ 11-3 운전경비 산정										※ 11-3 운전경비 산정
		분류번호	기 계 명		규격	주연료 (□)	잡재료	조종원 (인/일)		조수 (인/일)	건설기계 조장(인/일)	분류번호	기 계 명	규격		주연료 (□)	잡재료	조종원 (인/일)		조수 (인/일)	건설기계 조장(인/일)
		1506-0011 0012 0015 0019 0025 0030 0037	양족식로울러 (자주식)		11ton 12 15 19 25 30 37	12.4 15.0 24.7 29.9 29.9 35.8 45.5	20 20 20 20 20 20 20	1 1 1 1 1 1 1		- - - - - - -	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	1506-0011 0012 0015 0019 0025 0030 0032 0037	양족식로울러 (자주식)	11ton 12 15 19 25 30 32 37		12.4 15.0 24.7 29.9 29.9 35.8 38.6 45.5	20 20 20 20 20 20 20 20	1 1 1 1 1 1 1 1		- - - - - - - -	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
		※ 부록1. 건설기계가격표										※ 부록1. 건설기계가격표
		기 종		분류번호					가격($)			기 종			분류번호				가격($)
		양족식로울러 (자주식)		1506-0011 0012 0015 0019 0025 0030 0037					66,764 75,441 86,867 125,090 157,946 189,526 237,137			양족식로울러 (자주식)			1506-0011 0012 0015 0019 0025 0030 0032 0037				66,764 75,441 86,867 125,090 157,946 189,526 203,129 237,137

항 목	구 분	현 행					개 정				비 고
7-6 석축벽돌헐기 및콘크리트 부수기	보완	7-6 석축벽돌 헐기 및 콘크리트 부수기					7-6 석축벽돌 헐기 및 콘크리트 부수기
		종 별		단 위	할석공및벽돌공 (인)	보통인부(인)	종 별	단 위	할석공(인)	보통인부(인)
		메쌓기	뒷길이 45∼60□ 뒷길이 60∼90□	□당 □당	- -	0.2 0.3	□현 행 과 같 음□
		찰 쌓 기 절석(마름돌)쌓기(切石積) 벽 돌 콘크리트 철근콘크리트		□당 □당 □당 □당 □당	- 0.1 0.1 2.0 5.0	0.6 1.1 1.0 - -
		[주] ① 잡재료는 인력품의 5%이내에서 계상한다. ② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다. ③ 구조물 보수 등 부분적인 콘크리트 부수기와 따내기 등에서는 할증율을 계상할 수 있다. ④ 브레이커 사용시 10장 기계화시공에 의한다.					[주] □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
10-1 기계화시공 적용기준	보완	10-1 기계화시공 적용기준 4. 손료보정 등 가. 기계손료의 보정 다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는 그 손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산할 수 있다.			10-1 기계화시공 적용기준 4. 손료보정 등 가. 기계손료의 보정 다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는 그 손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산할 수 있다.			* 건축부문도 일괄적으로 개정
		기 종	가 산 비 율		기 종	가 산 비 율
			암석작업(연암□보통암□경암)	전석섞인토사		암석작업 (연암□보통암□경암)	전석섞인 토사
					불도우저(19톤이상 제외) 굴삭기(무한궤도) 및 로우더(무한궤도) 덤 프 트 럭	25 20 25	10 10 10
		불도우저(19톤이상 제외) 파워셔블 및 로우더(무한궤도) 덤 프 트 럭	25 20 25	10 10 10
		[주] ① 전용덤프트럭(18톤이상)과 불도우저(19톤이상)의 경우는 보정하지 않는다. 단, 타이어 불도우저, 습지 불도우저는 보정할 수 있다. □ 전석섞인 토사는 전석(0.5□이상)의 혼입율이 30%이상을 말한다.			[주] ① □현행과 같음□ □ □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
10-11 덤프트럭	보완	10-11 덤프트럭 60·q·f·E Q =□□□□□□□□□□□□□□□□□□ cm T q = □□□□×L □t 여기서 Q: 1시간당 흐트러진 상태의 작업량(□/hr) q : 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(□) □t: 자연상태에서의 토석의 단위중량(습윤밀도)(t/□) T: 덤프트럭의 적재용량(ton) L: 체적환산계수에서의 토량변화율 흐트러진상태의 체적(□) L = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 자연상태의 토량(□) f : 체적환산계수 E: 작업효율(0.9) cm:1회 사이클시간(분) cm=t1+t2+t3+t4+t5 1. 적재시간(t1)＞ □생 략□ 2. 왕복시간(t2) : □생 략□	10-11 덤프트럭 60·q·f·E Q =□□□□□□□□□□□□□□□□□□ cm T q = □□□□×L □t 여기서 Q: 1시간당 작업량(□/hr) q : 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(□) □t: 자연상태에서의 토석의 단위중량(습윤밀도)(t/□) T: 덤프트럭의 적재용량(ton) L: 체적환산계수에서의 토량변화율 흐트러진상태의 체적(□) L = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 자연상태의 토량(□) f : 체적환산계수 E: 작업효율(0.9) cm:1회 사이클시간(분) cm=t1+t2+t3+t4+t5 1. 적재시간(t1)＞ □현행과 같음□ 2. 왕복시간(t2) : □현행과 같음□	* 건축부문도 일괄적으로 개정

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
		3. 운반도로와 평균주행속도(□/hr)			3. 운반도로와 평균주행속도(□/hr)
		도 로 상 태	평균속도		도 로 상 태	평균속도
						적 재	공 차
			적 재	공 차
		□ 중 략 □			□ 중 략 □
		2차선 이상의 교통량 및 교통 대기가 많은 시가지포장도로(7,000대/일 이상) 2차선이상의 미포장도로	20	20	2차선 이상의 교통량 및 교통 대기가 많은 시가지포장도로(7,000대/일 이상) 2차선이상의 미포장도로	20	20
		2차선 이상의 시가지 포장도로(7,000∼2,000대/일) 2차선 이상의 유지관리 상태가 극히 양호한 공사용 도로	25	25
					2차선 이상의 시가지 포장도로(7,000∼2,000대/일) 2차선 이상의 유지관리 상태가 극히 양호한 공사용 도로	25	25
		2차선 이상의 교외 포장도로(2,000대/일 미만) 2차선 이상의 극히 양호한 미포장도로	25	30	2차선 이상의 교외 포장도로(2,000대/일 이상) 2차선 이상의 극히 양호한 미포장도로	25	30
		2차선 이상의 노면이 고르지 못한 포장도로 (2,000대 /일 미만)	30	35	2차선 이상의 노면이 고르지 못한 포장도로 (2,000대 /일 미만)	30	35
		2차선 이상의 포장도로(2,000대/일 미만)	35	35	2차선 이상의 포장도로(2,000대/일 미만)	35	35
		2차선 고속도로 또는 교통량(편도)1일 40,000대 이상의 4차선 고속도로	50	50	2차선 고속도로 또는 교통량(편도)1일 40,000대 이상의 4차선 고속도로	50	50
		4차선 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만)	60	60	4차선 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만)	60	60
		4. 적하시간(t3) : □생 략□ 5. 적재장소에 도착한 때로부터 적재작업이 시작될 때까지의 시간(t4):□생 략□ 6. 적재함 덮개 설치 및 해체시간(t5)＞ □생 략□ 7. 적재기계를 사용하는 경우에는 사이클시간의 산정은 다음에 의한다. cmt =[eqn: rm cms~□~n over 60~□~Es]+(t2+t3+t4+t5) 여기서 cmt: 덤프트럭의 1회 사이클시간(분) cms: 적재기계의 1회 사이클시간(초) Es: 적재기계의 작업효율 n: 덤프트럭 1대의 토량을 적재하는데 소요되는 적재기계의 사이클 횟수 n=[eqn: rm Qt over q□k]			4. 적하시간(t3) : □현행과 같음□ 5. 적재장소에 도착한 때로부터 적재작업이 시작될 때까지의 시간(t4):□현행과 같음□ 6. 적재함 덮개 설치 및 해체시간(t5)＞ □현행과 같음□ 7. 적재기계를 사용하는 경우에는 사이클시간의 산정은 다음에 의한다. cmt =[eqn: rm cms~□~n over 60~□~Es]+(t2+t3+t4+t5) 여기서 cmt: 덤프트럭의 1회 사이클시간(분) cms: 적재기계의 1회 사이클시간(초) Es: 적재기계의 작업효율 n: 덤프트럭 1대의 토량을 적재하는데 소요되는 적재기계의 사이클 횟수 n=[eqn: rm Qt over q□k]

항 목	구 분	현 행						개 정	비 고
10-19 크러셔	신설	10-19 크러셔 1. 정치식크러셔 가. 벨트컨베이어 운반능력(ton/hr) : □생 략□ 나. 에이프런피더 운반능력(ton/hr) : □생 략□ 다. 죠크러셔 생산능력(ton/hr)						10-19 크러셔 1. 정치식크러셔 가. 벨트컨베이어 운반능력(ton/hr) : □현행과 같음□ 나. 에이프런피더 운반능력(ton/hr) : □현행과 같음□ 다. 죠크러셔 생산능력(ton/hr)	* 건축부문도 일괄적으로 개정
		규격 출구간격	1016	1024	1836	2540	4248	□현행과 같음□
		19( ¾) 25( 1) 40( 1½) 50( 2) 65( 2½) 80( 3) 90( 3½) 100( 4) 125( 5) 150( 6) 175( 7) 200( 8) 250(10)	10∼20 15∼25 20∼35 25∼45 30∼55 30∼65 35∼75 - - - - - -	10∼30 15∼40 25∼55 35∼70 40∼80 45∼95 55∼105 - - - - - -	- - 40∼80 50∼100 60∼120 70∼140 80∼160 85∼165 115∼130 135∼265 - - -	- - - - - - 80∼160 90∼180 110∼220 140∼280 180∼360 200∼400 -	- - - - - - - 180∼360 225∼450 275∼550 315∼630 360∼720 450∼900
		[주] ① 규격의 앞의 두 숫자는 죠간의 최대거리, 뒤의 두 숫자는 죠의 폭을 in으로 각각 표시한다.(예시:1836은 죠간의 거리 18in, 폭 36in을 말함) ② 출구 간격은 mm단위이고 ( )내는 in 단위를 말한다. ③ 위의 표는 부순돌 상태에서 단위용적중량 1.6ton/m3을 기준으로 한 능력이다. ④ 생산능력은 투입되는 암석의 크기, 단위용적중량, 공급량, 운전조건, 암질 등 작업조건에 따라 변동되므로 작업효율을 아래와 같이 적용한다. 가. 양호＞위표의 최대치를 사용한다. 나. 보통＞위표의 평균치를 사용한다. 다. 불량＞위표의 최소치를 사용한다. ⑤ 1회 통과식(Open Circuit)에서의 생산골재의 크기에 따른 시간당 생산량은 별표 10-19-1을 사용하여 산정한다. ⑥ 재투입식(Closed Circuit)에서의 생산골재의 크기에 따르는 시간당 생산량은 별표 10-19-2를 사용하여 산정한다.						[주] ① □현행과 같음□ ②□현행과 같음□ ③□현행과 같음□ ④□현행과 같음□ ⑤□현행과 같음□ ⑥□현행과 같음□ ⑦ 이동식(견인식)의 경우에도 본 품을 적용한다.

항 목	구 분	현 행							개 정			비 고
12-15 콘크리트포장 거푸집	보완	12-15 콘크리트포장 거푸집 (100m당)							12-15 콘크리트포장 거푸집(□03개정) (거푸집연장 100m당)
		구분 포장두께	설비	조립	소운반	해체 정비	기타	계	포장두께(cm)	형틀목공(인)	보통인부(인)
		15∼20cm 20∼25 25∼30 30∼40	인 2 2 2 2	인 1.5 1.5 1.5 1.5	인 1.0 1.0 1.5 2.0	인 1.0 1.0 1.5 2.0	인 0.5 1.0 1.0 1.5	인 6.0 7.0 8.0 9.0	20이하 20초과∼25이하 25초과∼30이하 30초과∼40이하	4.5 5.0 5.5 6.0	1.5 2.0 2.5 3.0
		[주] ① 철재거푸집 1본의 길이는 3m로 하고 핀폴은 1m당 1개로 계상하되 20회 사용을 원칙으로 한다. ② 거푸집 1회전은 6일을 표준으로 한다. ③ 잡재료는 철재거푸집 및 핀폴손료의 2%까지 계상할 수 있다. ④ 철재거푸집 및 핀폴의 잔존율은 10%로 한다.							[주] ① □현행과 같음□ ② □현행과 같음□ ③ □현행과 같음□ ④ □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행					개 정											비 고
12-26 차선도색	보완	12-26 차선도색 12-26-1 상온(페인트)형 수동식 (10□당)						12-26 노면표시(□03개정) 12-26-1 페인트(상온형) 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용) (10□당)
		구 분	종 별	단위	수량	비고		구 분	단위		수 량
											실선		파선		횡단보도,주차장		문자,기호
		재 료	페인트 유리알	□ □	3.1 2.9
								페인트	□		3.1		3.1		3.1		3.1
		인 력	특별인부 보통인부	인인	0.06(0.07) 0.11(0.13)
								유리알	□		2.9		2.9		2.9		2.9
		12-26-2 상온(페인트)형 기계식 (10□당)
								특별인부	인		0.06		0.07		0.11		0.25
								보통인부	인		0.13		0.15		0.22		0.53
								12-26-2 페인트 기계식(자주식 라인마커 사용) (10□당)
		구 분	종 별	단위	수량	비고		구 분	단위	규격		상 온 형				가 열 형
												실선		파선		실선	파선
								페인트	□			3.1		3.1		4.2	4.2
		재 료	상온페인트 유 리 알	□ □	3.1 2.9
								유리알	□			2.9		2.9		4.6	4.6
		인 력	특별인부 보통인부	인인	0.03(0.035) 0.06(0.08)
								프로판가스	□			-		-		0.2	0.2
		12-26-3 가열(페인트)형 기계식 (10□당)
								특별인부	인			0.01		0.015		0.015	0.02
								보통인부	인			0.03		0.035		0.035	0.05
		구 분	종 별	단위	수량	비고
								라인마커	시간	10□/hr		0.047		0.053		0.053	0.067
		재 료	페 인 트 유 리 알 프로판가스	□ □ □	4.2 4.6 0.2
		인 력	특별인부 보통인부	인인	0.03(0.04) 0.07(0.09)

항 목	구 분	현 행					개 정							비 고
		12-26-4 용착성 도료형 수동식 (10□당)						12-26-3 융착식도료 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용) (10□당)
		구 분	종 별	단위	수량	비고		구 분	단위	수 량
										실선	파선	횡단보도,주차장	문자,기호
		재 료	융착성도료 유 리 알 프라이머 프로판가스	□ □ □ □	45.3 2.0 2.0 2.0	표면살포용
								융착식도료	□	45.3	45.3	45.3	45.3
								유리알	□	2.0	2.0	2.0	2.0
		인 력	특별인부 보통인부	인인	0.11 0.23
								프라이머	□	2.0	2.0	2.0	2.0
								프로판가스	□	2.0	2.0	2.0	2.0
		[주] □12-26-1에서 12-26-6□ 공통 ① 본 품은 차선도색 폭 15□를 기준한 것이며, ( )는 파선 작업일 경우이다. ② 차선도색기, 선도차, 재료운반차 및 용해차 등의 현장까지 운반비와 제소모품비 및 기계경비는 별도 계상한다. ③ 잡재료는 인력품의 5%까지 계상할 수 있다. ④ 문자, 기호 및 횡단보도 등의 경우에는 품을 별도 계상한다. ⑤ 재료의 양은 할증량이 포함된 것이다. ⑥ 사전 청소가 필요한 경우는 별도 계상할 수 있다. ⑦ 노면에 표지병등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 인력품을 10%까지 상향조정하여 적용할 수 있다.
								특별인부	인	0.08	0.10	0.15	0.33
								보통인부	인	0.17	0.20	0.30	0.71
								[주] ① 잡재료는 인력품의 5%로 계상한다. ② 페인트 및 유리알의 수량은 재료할증량이 포함된 것이다. ③ 본품에 명시되지 않은 기계에 대한 경비는 다음에 따라 계상한다. ㉮ 상온형 페인트 수동식 : 인력품의 17%(핸드가이드식 라인마커, 작업용 트럭 등) ㉯ 페인트 기계식 : 인력품의 15%(작업용트럭 등) ㉰ 융착식도료 수동식 : 인력품의 20%(핸드가이드식 라인마커, 용해조, 작업용트럭 등) ④ 파선은 실제의 도색면적을 대상으로 한다. ⑤ 본품에는 교통정리원이 포함되어 있지 않으므로 필요시 보통인부 1∼2인을 계상한다. ⑥ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다. ⑦ 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 인력품을 10%까지 상향 조정할 수 있다. ⑧ 본 품은 미공용구간을 기준한 것이므로 공용구간에 대해서는 인력품 및 장비사용시간에 다음의 계수를 곱하여 계상하되, 실선 및 파선에 대해서만 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
		※ 부록1. 건설기계가격표	㉮ 계수
	구 분	계 수
	페인트식	2.0
	융착식	1.8
㉯ 미공용구간과 공용구간의 구분
	구 분	공사종류
	미공용구간	ㅇ 도로신설공사의 노면표시공사 ㅇ 현 도로의 노면표시 보수공사
	공용구간	ㅇ 현 도로의 유지보수공사에 따른 노면표시공사 ㅇ 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사
※ 부록1. 건설기계가격표
기 종	분류번호	가격($)	기 종	분류번호	가 격
라인마커	7330-0010	14,362	라인마커	7330-0010	(54,585)
	( )내는 국산기계가격이며, 원화(단위:천원)로 표시한 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
12-27-3 도로유지공 7. 시선유도표지 설치 및 철거	신설	□ 없 음 □	12-27-3 도로유지공 7. 시선유도표지 설치 및 철거(□03 신설) (개소당)
			구 분	단위	흙속 매설용		가드레일용		옹벽용
					설치	철거	설치	철거	설치	철거
			보통인부	인	0.11	0.04	0.04	0.02	0.11	0.04
			[주] ① 본 품은 도로안전시설중 운전자에 대하여 도로의 선형 등을 알리기 위한 시선유도표지(델리네이터)의 설치 및 철거에 관한 품이다. ② 흙속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기후 되메우기 하여 매설하는 경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 시공하는 경우에는 별도로 계상한다. ③ 옹벽용은 천공작업이 포함된 것이며, 천공을 위한 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
12-35 방음벽 설치	보완	12-35 방음벽 설치 1. 앵커볼트 설치 (방음벽 m당)						12-35 방음벽 설치(□03 개정) 1. 앵커볼트 설치 (방음벽길이 m당)
								지주높이	직종	단위	수 량
		지주높이	직종	단위	수 량
											지주간격2m	지주간격3m	지주간격4m
					지주간격 2m	지주간격 3m	지주간격 4m
		3m미만	철공	인	0.38	0.32	0.28	2m	철공	인	0.30	0.26	0.22
								3m	철공	인	0.34	0.28	0.24
								4m	철공	인	0.38	0.30	0.26
		3m이상 6m미만	철공	인	0.57	0.38	0.33
								5m	철공	인	0.42	0.32	0.28
								6m	철공	인	0.46	0.34	-
								7m	철공	인	0.50	0.36	-
		6m이상 9m미만	철공	인	0.66	0.44	-
								8m	철공	인	0.54	-	-
								9m	철공	인	0.58	-	-
		[주] ① 본 품은 매설앵커볼(L형) 및 천공앵커볼트(케이컬앵커 볼트) 시공에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다. ② 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ③ 본품은 소운반 및 용접비용이 포함된 것이다. ④ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑤ 지주높이 9m 이상은 별도 계상한다.
								[주] ① 본 품은 매설앵커볼트(L형) 및 천공앵커볼트(케이컬앵커볼트) 시공에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다. ② 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ③ 본품은 소운반 및 용접비용이 포함된 것이다. ④ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다.

항 목	구 분	현 행						개 정							비 고
		2. 지주설치 (방음벽길이 m당)							2. 지주설치 (방음벽길이 m당)
		지주높이	직종	단위	수 량				지주높이	직종	단위	수 량
					지주간격2m	지주간격3m	지주간격 4m
												지주간격2m	지주간격3m	지주간격4m
									2m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.24 0.26	0.16 0.18	0.14 0.15
		3m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.33 0.50	0.18 0.27	0.14 0.20
									3m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.28 0.30	0.19 0.21	0.17 0.18
									4m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.32 0.35	0.23 0.25	0.20 0.22
		3m이상 6m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.33 0.50	0.18 0.27	0.14 0.20
									5m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.37 0.40	0.27 0.29	0.24 0.25
									6m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.42 0.44	0.30 0.32	- -
		6m이상 9m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.68 1.00	0.45 0.67	- -		7m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.47 0.50	0.33 0.35	- -
									8m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.53 0.57	- -	- -
									9m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.58 0.63	- -	- -
		[주] ① 본 품은 매설앵커방식 및 천공앵커방식으로 지주를 세울 경우에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다. ② 현장여건상 장비진입이 불가능하여 인력에 의존해야 할 경우에는 본품(인력+장비)의 30%까지 가산할 수 있다. ③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ④ 본 품은 소운반이 포함된 것이다. ⑤ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑥ 트럭크레인은 5톤을 기준한 것이다. ⑦ 지주높이 9m이상은 별도 계상한다.							[주] ① 본 품은 매설앵커방식 및 천공앵커방식으로 지주를 세울 경우에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다. ② 현장여건상 장비진입이 불가능하여 인력에 의존해야 할 경우에는 인력품의 40%까지 가산할 수 있다. ③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ④ 본 품은 소운반이 포함된 것이다. ⑤ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑥ 트럭탑재형크레인은 5톤을 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행						개 정							비 고
		3. 방음판 설치 (방음벽길이 m당)							3. 방음판 설치 (방음벽길이 m당)
		지주높이	직종	단위	수 량				지주높이	직종	단위	수 량
												지주간격2m	지주간격3m	지주간격4m
					지주간격2m	지주간격3m	지주간격 4m
		3m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.22 0.34	0.17 0.30	0.13 0.21		2m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.18 0.25	0.12 0.17	0.10 0.15
									3m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.27 0.36	0.20 0.26	0.18 0.25
									4m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.36 0.46	0.27 0.34	0.26 0.35
		3m이상 6m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.55 0.85	0.44 0.68	0.33 0.51
									5m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.45 0.57	0.35 0.42	0.34 0.45
									6m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.54 0.67	0.42 0.50	- -
		6m이상 9m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.77 1.19	0.62 0.94	- -		7m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.63 0.78	0.50 0.59	- -
									8m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.72 0.88	- -	- -
									9m	철공 트럭탑재형크레인	인 시간	0.81 0.99	- -	- -
		[주] ① 본 품은 금속제 방음판(방음판 높이 0.5m)을 기준한 것으로, 투명방음판(방음판 높이 1.0m)의 경우에는 본 품의 70%로 계상한다. ② 현장여건상 장비진입이 불가능하여 인력에 의존해야 할 경우에는 본 품(인력+장비)의 30%까지 가산할 수 있다. ③ 공구손료는 노무비의 3%로 계상한다. ④ 본 품은 소운반이 포함된 것이다. ⑤ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑥ 트럭크레인은 5톤을 기준한 것이다. ⑦ 지주높이 9m 이상은 별도로 계상한다.
									[주] ① 본 품은 금속제 방음판(방음판 높이 0.5m)을 기준한 것으로, 투명방음판(방음판 높이 1.0m)의 경우에는 본 품의 70%로 계상한다. ② 현장여건상 장비진입이 불가능하여 인력에 의존해야 할 경우에는 인력품의 40%까지 가산할 수 있다. ③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ④ 본 품은 소운반이 포함된 것이다. ⑤ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑥ 트럭탑재형크레인은 5톤을 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
17-2 강교도장	신설	□없 음□		17-2 강교도장(□03신설) 1. 표면처리 가. 소재 표면처리 (□당)						* 현행 □17-2∼17-6□은 순차적으로 □17-3∼17-7□로 조정
				구 분		단위	규 격		수 량
				도 장 공		인			0.011
				철구(Shot ball)		kg			0.127
				무기질아연말샵프라이머		□	도막두께20□		0.157
				나. 제품 표면처리 (□당)
				구 분	단위			수 량
				도 장 공	인			0.031
				철편(Grit)	kg			0.245
				[주] ① 본 품은 강교도장을 위하여 공장에서 행하는 표면처리를 기준한 것으로, 자재반입후의 소재 표면처리(Shot Blasting) 및 전처리프라이머, 강교제작후 도장전의 제품표면처리(Grit Blasting)를 대상으로 한 것이다. ② 표면처리 규격은 □강도로교 용접 및 도장요령□(건설교통부 제정)의 SSPC SP10(준나금속 블라스트 세정)을 기준한 것이다. ③ 제품 표면처리의 경우, 상형(BOX형) 내면에 대해서는 인력품을 60% 할증한다. ④ 본 품의 인력품에는 공장경비가 포함되어 있다. ⑤ 재료의 수량은 할증량이 포함된 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정												비 고
				2. 도장 가. 재료사용량 (□당)
				구 분		단위		사 용 량
				도 료		□		도막두께(□) 1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ × □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 고형분용적비(%)×10 1 - 손실율(%)/100
				희석재		□		도료 사용량의 25%
				[주] ① 도료사용량 산출식의 고형분용적비 및 손실율은 다음을 표준으로 한다. ㉮ 고형분용적비
					도료종별					고형분용적비(%)
					무기질아연말도료					68.3
					염화고무계도료(중도)					43.0
					염화고무계도료(상도)					39.0
					역청질계도료					54.7
					후막형에폭시계도료					64.0
					폴리우레탄계도료					50.7
					자연건조형불소도료					38.0
					콜탈에폭시계도료					73.0
				㉯ 손실율
					구 분		공 장 도 장 (에어리스스프레이)				현 장 도 장
											에어리스스프레이		붓 또는 롤러
							하도		중·상도		하도	중·상도	하도	중·상도
					손실율(%)		36		32		44	40	28	24
				② 잡재료는 도료와 희석재 합계액의 10%로 계상한다. ③ 희석재 사용량은 도료 희석 및 사용기구 세정에 사용되는 수량이다.

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
				나. 도장품 (인/□/회)
				구 분	단위	공장도장 (에어리스스프레이)	현장도장
							에어리스스프레이	붓 또는 롤러
				도장공	인	0.020	0.022	0.025
				공구손료	식	-	인력품의 5%	인력품의 2%
				[주] ① 본 품은 도장횟수 1회를 기준한 도장면적 1□당에 소요되는 품이며, 신설교량의 도장을 대상으로 한 것이다. ② 상형(BOX형) 내면에 대해서는 인력품을 60% 할증한다. ③ 본품은 상형 및 판형 교량을 기준한 것이므로, 특수교량 (아치교·트러스교·현수교·사장교 등)의 경우에는 인력품을 50% 할증한다. ④ 공장에서 상도(마감도장)까지 완료하고 현장에서 연결부만을 도장할 경우에는 연결부에 대해서 인력품을 50% 할증한다. ⑤ 공장도장의 인력품에는 공장경비가 포함되어 있다. ⑥ 현장도장의 경우 비계 등 작업대시설이 필요한 경우에는 별도 계상한다. 3. 표면처리면적 및 도장면적 산출기준 표면처리면적 및 도장면적은 표준품셈 □17-1 용접교제작□의 강교제작수량 산출기준에 따라 산출하며, 스터드볼트 및 연결볼트 등의 면적은 포함시키지 않는다.

항 목	구 분	현 행	개 정		비 고
18-10 답면고르기	신설	□ 없 음 □	18-10 답면고르기(□03신설)
			블록크기(□)	시간당작업량(□/hr)
			2,000미만	281
			2,000이상∼4,000미만	404
			4,000이상∼6,000미만	526
			6,000이상∼8,000미만	648
			8,000이상∼10,000미만	771
			[주] ① 본 품은 습지불도우저(4톤)를 사용하여 답면(畓面)을 고르는 품으로, 블록간 이동이 포함된 것이다. ② 물 가두기가 필요한 경우에는 보통인부 1인을 별도로 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
19-23 단수천공분기점분기	신설	□ 없 음 □	19-23 단수 천공 분기점 분기(□03 신설) (개소당)					* 현행 □19-23∼19-25□는 순차적으로 □19-24∼19-26□으로 조정
			구 분		배관공 (인)	보통인부 (인)	천공기 (시간)
			본관(□)	연결관(□)
			50	13∼20	0.08	0.17	0.74
			75	13∼20	0.08	0.18	0.77
				25∼30	0.09	0.18	0.90
				40∼50	0.09	0.19	0.93
			100	13∼20	0.09	0.18	0.80
				25∼30	0.09	0.19	0.93
				40∼50	0.11	0.22	1.06
			150	13∼20	0.09	0.18	0.83
				25∼30	0.10	0.19	0.96
				40∼50	0.11	0.22	1.13
			200	13∼20	0.09	0.19	0.86
				25∼30	0.10	0.20	1.00
				40∼50	0.12	0.23	1.20
			250	13∼20	0.10	0.20	0.90
				25∼30	0.11	0.22	1.03
				40∼50	0.12	0.24	1.26
			[주] ① 본 품은 물이 흐르지 않은 상수도관을 분기하는 품이며, 소운반을 포함한 것이다. ② 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기는 별도 계상한다. ③ 자재(새들 및 볼트)는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행																				개 정																							비 고
20-9 대구경 보링	보완	20-9 대구경 보링(지하수개발) 20-9-1 점토, 모래, 자갈 및 호박돌층 (1m당)																				20-9 대구경 보링(지하수개발)(□03 개정) 20-9-1 토사, 모래, 자갈 및 호박돌층 (1m당)
		지층			점 토 층																	지층			토 사 층
		구분 규격(mm)			100		150			200	250	300		350		400			450	500		구분 규격(mm)			100		150		200		250		300		350		400				450			500
		중 급 기 술 자	인		0.01		0.02			0.02	0.03	0.03		0.04		0.04			0.05	0.05		중 급 기 술 자	인		0.01		0.02		0.02		0.02		0.02		0.03		0.03				0.04			0.04
		중 급 기 능 사	인		0.07		0.09			0.11	0.12	0.14		0.16		0.18			0.20	0.22		중 급 기 능 사	인		0.05		0.06		0.08		0.09		0.10		0.11		0.12				0.13			0.14
		보 링 공	인		0.07		0.09			0.11	0.12	0.14		0.16		0.18			0.20	0.22		보 링 공	인		0.05		0.06		0.08		0.09		0.10		0.11		0.12				0.13			0.14
		특 별 인 부	인		0.07		0.09			0.11	0.12	0.14		0.16		0.18			0.20	0.22		특 별 인 부	인		0.03		0.03		0.04		0.04		0.05		0.06		0.06				0.08			0.08
		보 통 인 부	인		0.10		0.13			0.16	0.12	0.21		0.24		0.27			0.30	0.30		보 통 인 부	인		0.05		0.06		0.08		0.09		0.10		0.11		0.12				0.13			0.14
		윙 비 트	개		0.0032																	고 성 능 착 정 기	시간		0.21		0.25		0.30		0.35		0.40		0.45		0.49				0.54			0.59
		벤 토 나 이 트	□		0.35		0.53			0.70	0.88	1.05		1.25		1.43			1.60	1.78		윙 비 트	개		0.0032
		(1m당)																				벤 토 나 이 트	□		0.35		0.53		0.70		0.88		1.05		1.25		1.43				1.60			1.78
																						(1m당)
		지층		모 래 층																		지층				모 래 층
		구분 규격(mm)		100		150		200			250	300	350		400			450			500	구분 규격(mm)				100		150		200		250		300		350		400		450			500
		중 급 기 술 자	인	0.02		0.03		0.03			0.04	0.05	0.06		0.06			0.07			0.08	중 급 기 술 자		인		0.02		0.02		0.03		0.03		0.04		0.04		0.05		0.05			0.06
		중 급 기 능 사	인	0.10		0.12		0.15			0.18	0.21	0.24		0.27			0.31			0.35	중 급 기 능 사		인		0.07		0.09		0.11		0.13		0.15		0.16		0.19		0.21			0.24
		보 링 공	인	0.10		0.12		0.15			0.18	0.21	0.24		0.27			0.31			0.35	보 링 공		인		0.07		0.09		0.11		0.13		0.15		0.16		0.19		0.21			0.24
		특 별 인 부	인	0.10		0.12		0.15			0.18	0.21	0.24		0.27			0.31			0.35	특 별 인 부		인		0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08		0.09		0.10			0.12
		보 통 인 부	인	0.15		0.18		0.22			0.27	0.31	0.36		0.40			0.46			0.52	보 통 인 부		인		0.07		0.09		0.11		0.13		0.15		0.16		0.19		0.21			0.24
		윙 비 트	개	0.0041																		고 성 능 착 정 기		시간		0.28		0.34		0.43		0.51		0.59		0.65		0.74		0.82			0.90
		벤 토 나 이 트	□	0.35		0.53			0.70		0.88	1.05	1.25		1.43		1.60				1.78	윙 비 트		개		0.0041
																						벤 토 나 이 트		kg		0.35		0.53		0.70		0.88		1.05		1.25		1.43	1.60			1.78

항 목	구 분	현 행																			개 정																					비 고
		(1m당)																			(1m당)
		지층			자 갈 층																지층			자 갈 층
		구분 규격(□)			100		150		200	250		300		350		400		450	500		구분 규격(□)			100		150		200		250		300		350		400			450		500
		중 급 기 술 자	인		0.03		0.04		0.06	0.07		0.08		0.10		0.11		0.13	0.15		중 급 기 술 자	인		0.02		0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08			0.09		0.10
		중 급 기 능 사	인		0.14		0.19		0.24	0.29		0.35		0.40		0.46		0.54	0.62		중 급 기 능 사	인		0.10		0.13		0.16		0.20		0.24		0.28		0.32			0.36		0.40
		보 링 공	인		0.14		0.19		0.24	0.29		0.35		0.40		0.46		0.54	0.62
																					보 링 공	인		0.10		0.13		0.16		0.20		0.24		0.28		0.32			0.36		0.40
		특 별 인 부	인		0.14		0.19		0.24	0.29		0.35		0.40		0.46		0.54	0.62		특 별 인 부	인		0.05		0.06		0.08		0.10		0.12		0.14		0.16			0.18		0.20
		보 통 인 부	인		0.21		0.28		0.36	0.43		0.52		0.60		0.69		0.81	0.93		보 통 인 부	인		0.10		0.13		0.16		0.20		0.24		0.28		0.32			0.36		0.40
		윙 비 트	개		0.0064																고 성 능 착 정 기	시간		0.38		0.52		0.65		0.81		0.97		1.11		1.27			1.42		1.57
		벤 토 나 이 트	kg		0.35		0.53		0.70	0.88		1.05		1.25		1.43		1.60	1.78		윙 비 트	개		0.0064
		(1m당)																			벤 토 나 이 트	kg		0.35		0.53		0.70		0.88		1.05		1.25		1.43			1.60		1.78
																					(1m당)
		지층		호 박 돌 층																	지층				호 박 돌 층
		구분 규격(□)		100		150		200		250	300		350		400		450			500	구분 규격(□)				100		150		200		250		300		350		400	450		500
		중 급 기 술 자	인	0.05		0.07		0.10		0.14	0.17		0.20		0.24		0.27			0.31	중 급 기 술 자		인		0.04		0.05		0.07		0.09		0.12		0.14		0.16	0.18		0.20
		중 급 기 능 사	인	0.21		0.31		0.41		0.54	0.68		0.81		0.96		1.09			1.25	중 급 기 능 사		인		0.15		0.21		0.29		0.37		0.47		0.56		0.66	0.75		0.84
		보 링 공	인	0.21		0.31		0.41		0.54	0.68		0.81		0.96		1.09			1.25	보 링 공		인		0.15		0.21		0.29		0.37		0.47		0.56		0.66	0.75		0.84
		특 별 인 부	인	0.21		0.31		0.41		0.54	0.68		0.81		0.96		1.09			1.25	특 별 인 부		인		0.07		0.11		0.14		0.19		0.23		0.28		0.33	0.38		0.43
		보 통 인 부	인	0.31		0.46		0.61		0.81	1.02		1.21		1.44		1.63			1.87	보 통 인 부		인		0.15		0.21		0.29		0.37		0.47		0.56		0.66	0.75		0.84
		윙 비 트	개	0.012																	고 성 능 착 정 기		시간		0.59		0.86		1.14		1.48		1.86		2.23		2.62	2.99		3.36
		벤 토 나 이 트	kg	0.35		0.53		0.70		0.88	1.05		1.25		1.43		1.60			1.78	윙 비 트		개		0.012
																					벤 토 나 이 트		kg		0.35		0.53		0.70		0.88		1.05		1.25		1.43	1.60		1.78

항 목	구 분	현 행																개 정																		비 고
		20-9-2 암반층 (1m당)																20-9-2 암반층 (1m당)
		지층			풍 화 암													지층			풍 화 암
		구분 규격(mm)			100	150	200		250			300		350	400	450	500	구분 규격(mm)			100		150		200		250	300		350	400		450		500
		중 급 기 술 자	인		0.02	0.03	0.04		0.04			0.05		0.06	0.07	0.08	0.09	중 급 기 술 자	인		0.02		0.02		0.03		0.03	0.04		0.04	0.05		0.05		0.06
		중 급 기 능 사	인		0.09	0.12	0.16		0.19			0.23		0.26	0.30	0.34	0.38	중 급 기 능 사	〃		0.07		0.09		0.11		0.14	0.16		0.18	0.21		0.23		0.25
		보 링 공	인		0.09	0.12	0.16		0.19			0.23		0.26	0.30	0.34	0.38	보 링 공	〃		0.07		0.09		0.11		0.14	0.16		0.18	0.21		0.23		0.25
		특 별 인 부	인		0.09	0.12	0.16		0.19			0.23		0.26	0.30	0.34	0.38	특 별 인 부	〃		0.03		0.04		0.06		0.07	0.08		0.09	0.10		0.11		0.12
		보 통 인 부	인		0.13	0.18	0.24		0.28			0.34		0.39	0.45	0.51	0.57	보 통 인 부	〃		0.07		0.09		0.11		0.14	0.16		0.18	0.21		0.23		0.25
		윙 비 트	개		0.044													고 성 능 착 정 기	시간		0.26		0.34		0.45		0.54	0.64		0.72	0.82		0.91		1.00
		벤 토 나 이 트	kg		0.35	0.53	0.70			0.88		1.05		1.25	1.43	1.60	1.78	윙 비 트	개		0.0044
		에 어 해 머	개
																		벤 토 나 이 트	kg		0.35		0.53		0.70		0.88	1.05		1.25	1.43		1.60		1.78
		버 튼 비 트 (Button)	개															(1m당)
		(1m당)
		지층		연 암				보통암							경 암			지층				연 암
		구분 규격(mm)		150		200	250	150			200		250		150	200	250	구분 규격(mm)				100		150		200			250			300		350
		중 급 기 술 자	인	0.01		0.01	0.02	0.02			0.02		0.04		0.03	0.05	0.07	중 급 기 술 자		인		0.01		0.01		0.01			0.02			0.02		0.03
		중 급 기 능 사	인	0.05		0.07	0.09	0.10			0.11		0.16		0.14	0.21	0.29	중 급 기 능 사		〃		0.03		0.04		0.05			0.07			0.09		0.13
		보 링 공	인	0.05		0.07	0.09	0.10			0.11		0.16		0.14	0.21	0.29	보 링 공		〃		0.03		0.04		0.05			0.07			0.09		0.13
		특 별 인 부	인	0.05		0.07	0.09	0.10			0.11		0.16		0.14	0.21	0.29	특 별 인 부		〃		0.02		0.02		0.02			0.03			0.05		0.07
		보 통 인 부	인	0.07		0.10	0.13	0.15			0.16		0.24		0.21	0.31	0.43	보 통 인 부		〃		0.03		0.04		0.05			0.07			0.09		0.13
		윙 비 트	개															고 성 능 착 정 기		시간		0.13		0.14		0.19			0.27			0.38		0.53
		벤 토 나 이 트	kg															기 포 제		□		0.10		0.19		0.38			0.98			2.11		4.20
		에 어 해 머	개	0.0004				0.0011							0.0033			에 어 해 머		개		0.0004
		버 튼 비 트 (Button)	개	0.0018				0.0043							0.0135			버 튼 (Button) 비 트		〃		0.0018

항 목	구 분	현 행	개 정														비 고
			(1m당)
			지층			보 통 암
			구분 규격(mm)			100		150		200		250		300		350
			중 급 기 술 자	인		0.02		0.02		0.02		0.03		0.04		0.05
			중 급 기 능 사	인		0.07		0.07		0.08		0.11		0.15		0.21
			보 링 공	인		0.07		0.07		0.08		0.11		0.15		0.21
			특 별 인 부	인		0.03		0.04		0.04		0.06		0.08		0.11
			보 통 인 부	인		0.07		0.07		0.08		0.11		0.15		0.21
			고 성 능 착 정 기	시간		0.26		0.29		0.31		0.45		0.60		0.84
			기 포 제	□		0.10		0.24		0.62		1.61		3.39		8.73
			에 어 해 머	개		0.001
			버 튼 (Button) 비 트	개		0.0043
			(1m당)
			지층				경 암
			구분 규격(mm)				100		150		200		250		300
			중 급 기 술 자		인		0.02		0.03		0.04		0.05		0.06
			중 급 기 능 사		인		0.05		0.10		0.15		0.20		0.24
			보 링 공		인		0.05		0.10		0.15		0.20		0.24
			특 별 인 부		인		0.03		0.05		0.07		0.10		0.12
			보 통 인 부		인		0.05		0.10		0.15		0.20		0.24
			고 성 능 착 정 기		시간		0.29		0.41		0.58		0.82		0.98
			기 포 제		□		0.18		0.45		1.15		2.95		5.48
			에 어 해 머		개		0.0033
			버 튼 (Button) 비 트		개		0.0135

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
		[주] ① 본품은 해머식 착정공법에 의한 암반지하수개발을 목적으로 하는 고성능 착정기(엔진 450HP 기준)를 이용하며,굴착심도는 200m이하를 기준로 한 것이다. ② 대구경 보링에 필요한 기계경비와 본표 이외의 소모재료(기포제, 메탈크라운 등)가 필요할 때는 별도 계상할 수 있다. ③ 케이싱 설치, 에어써징, 우물설치 및 양수시험에 필요한 인력품은 아래와 같으며, 기계경비는 별도 계상한다.	[주] ① □현행과 같음□ ② □현행 3항과 같음□ ③ □현행 4항과 같음□ ※ 11-2 손료산정 (7101) 고성능 착정기
구 분	단위	인 력 품	비 고
중급기술자	중급기능사	보링공	특별인부	보통인부
케이싱설치 에어써징 우물설치 양수시험	1m 1m 1m 1시간	0.03 0.004 0.004 0.06	0.13 0.01 0.01 0.12	0.13 0.01 0.01 0.12	0.13 0.01 0.01 0.12	0.20 0.02 0.02 0.37	철재케이싱 (250mm)
④ 기타 기계기구 설치, 수중모터펌프 설치 및 전기검층에 필요한 경비는 별도로 계상한다. ※ 11-2 손료산정 (7101) 고성능 착정기
분 류 번 호	규 격 (HP)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)	분 류 번 호	규 격 (HP)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7101-0450 (삭제)	450 (삭제)		5,400 (삭제)	900 (삭제)	0.9 (삭제)	0.7 (삭제)	0.14 (삭제)	1,667 (삭제)	1,296 (삭제)	972 (삭제)	3,935 (삭제)
7101-0450 0525	450 525		5,400 5,400	900 900	0.9 0.9	0.7 0.7	0.14 0.14	1,667 1,667	1,296 1,296	972 972	3,935 3,935
※ 부록1. 건설기계가격표
※ 부록1. 건설기계가격표
기 종	분류번호	가격	기 종	분류번호	가격($)
고성능착정기	7101-0525	(451,628)	고성능착정기	7101-0450	367,000
( )내는 국산기계가격이며, 원화(단위:천원)로 표시한 것이다.

항 목	구 분	현 행			개 정								비 고
21-24 수치지도작성	보완	21-24 수치지도 작성 7. 지하시설물도작성 (단위 :m/일)			21-24 수치지도 작성 7. 지하시설물도작성 가. 지하시설물 조사/탐사 (단위: 인, m)
		구 분	1일작업량	비고	구분	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (측량)	초급기능사 (측량)	계	1일작업량	비고
		계획및작업관리	고급기술자로서 총투입인원의 1/10
					작업계획	고급기술자로서 총투입인원의 1/10
					자료수집및작업준비	1	1			2	1,000
		자료조사및편집	1,000
					지하시설물조사편집	1	2	1		4	511
		지상시설물조사	511	외업
					지하시설물위치측량	1	2	1	3	7	458
		관로조사및탐사	458	외업
					지하시설물원도작성		2	2		4	1,044
		편 집	1,044
					대장조서및속성DB작성	1	2	1		4	600
		대장조서작성	600
		[주]① 지하시설물도작성이란 기존도면을 이용하여 지하시설물과 연관된 지상시설물조사 및 지하에 매설된 각종 시설물의 위치를 탐사하여 도면으로 제작하는 것으로써 지하시설물 대상조서의 작성이 포함되어 있다. ② 본 품은 기존도면을 이용하여 지하시설물도를 작성하는 것으로써 지하시설물도를 수치입력 및 구조화 편집할 경우에는 별도의 품을 계상한다. ③ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다. ㉮ 상각비계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 지하시설물도 탐지기의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다. ㉯ 지하매설물 탐지기의 가동일당 정비비의 계산식은 다음과 같다. 가동일당 정비비 = [eqn: {취득가격 } over {365} TIMES~ 0.1]			[주]① □현행과 같음□ ② 지하시설물의 위치측량에 사용되는 기준점(평면,표고) 설치 및 측량을 하는 경우에는 별도의 품을 계상한다. ③ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다. ㉮ 상각비계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 지하시설물도 탐사기의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다. ㉯ 지하시설물 탐사기의 가동일당 정비비의 계산식은 다음과 같다. 가동일당 정비비 = [eqn: {취득가격 } over {365} TIMES~ 0.1]

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
		④ 지형 및 시설물 종류별 증감계수는 다음과 같다. ㉮ 지형구분에 따른 증감계수	④ 지형 및 시설물 종류별 증감계수는 다음과 같다. ㉮ 지형구분에 따른 증감계수
	구분	밀집 시가지	시가지	교외지	농경지	구릉지	산지	비고
	구분	밀집 시가지	시가지	교외지	농경지	구릉지	산지	비고
	증감계수	1.68	1.00	0.78	0.65	0.65	0.65
	증감계수	1.68	1.00	0.78	0.65	0.65	0.65
㉯ 매설물 종류별 증감계수	㉯ 시설물 종류별 증감계수
	구분	상수도	하수도	가스	전력	통신	난방	송유관	기타		구분	상수도	하수도	가스	전력	통신	난방	송유관	기타
	증감계수	1.1	0.73	1.03	0.85	0.85	1.0	1.0	0.85		증감계수	1.1	0.73	1.03	0.85	0.85	1.0	1.0	0.85
㉰ 공동구축에 따른 증감 수식 공동구축시설물의 개수가 2 이상일 경우 다음의 절감률을 적용한다. 절감률 : 3%×(N-1) [eqn: N] : 공동구축 시설물 갯수
⑤ 작업반 편성은 다음과 같이 한다.
	구분	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사(측량)	초급기능사(측량)	계	비고
	계획및작업관리	고급기술자로서 총 투입인원의 1/10
	자료조사및편집	1	1			2
	지상시설물조사	1	2	1		4
	관로조사및탐사	1	2	1	3	7
	편 집		2	2		4
	대장보서작성	1	2	1		4

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
		⑥ 본 품은 상수도 50mm이상, 하수도 300mm이상, 가스 75mm이상, 통신 50mm이상의 관경 및 고압전력을 기준으로 작성된 것으로서 관경이 작을 경우에는 품을 증가한다. ⑦ 본 품은 출력된 1/500지형도를 이용하여 지하시설물도를 작성하는 것으로서 지형도가 없을 때에는 품을 별도로 계상한다. ⑧ 지형의 구분은 21-26(지도제작) - □2□ 편집제도의 [주]란에 의한 지형구분을 적용하되 시가지중에서 고층밀집 지역을 밀집시가지로 한다. ⑨ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 측량용역단가기준에 따라 별도 계상한다. ⑩ 본 품은 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만 성과심사비는 공공측량성과심사업무처리규정에 의한다.	⑤ 본 품은 상수도 50mm이상, 하수도 300mm이상, 가스 75mm이상, 통신 50mm이상의 관경 및 고압전력을 기준으로 작성된 것으로서 관경이 작을 경우에는 품을 증가한다. ⑥ 본 품은 출력된 1/500지형도를 이용하여 지하시설물도를 작성하는 것으로서 지형도가 없을 때에는 품을 별도로 계상한다. ⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인력에 대한 여비는 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다. ⑧ 본 품의 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 공공측량성과심사업무처리규정에 의한다 나. 지하시설물도 정위치편집 ① 지하시설물도의 정위치편집이라 함은 지하시설물 조사/탐사의 측량성과를 표준코드등을 이용하여 신규로 제작하거나 기존의 지하시설물도를 수정 보완하는 작업을 말한다. ② 지하시설물도 정위치편집의 시간당 작업량은 다음과 같다. (단위 : □)
				구 분	1/1,000	비고
				시간당 작업량	0.10
			③ 지형 및 시설물종류별 증감계수는 □가. 지하시설물 조사/탐사□를 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정									비 고
			④ 정위치 편집의 편성인원은 22-24수치지도작성 □2. 수동입력□을 적용한다. ⑤ 기계비 및 재료비는 22-24수치지도작성□2.수동입력□을 적용한다. ⑥ 본 품에는 작업준비, 정리, 인접부의 접합작성이 포함되어 있다. ⑦ 본 품의 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 공공측량성과심사업무처리규정에 의한다 다. 지하시설물도 구조화편집 ① 지하시설물도의 구조화편집이라 함은 정위치편집된 지하시설물의 상호 상관관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성데이터를 편집하는 작업을 말한다. ② 작업반 편성은 고급기술자 1인, 정보처리기사 1인, 중급기능사(지도제작) 1인으로 구분하고, 참여비율은 다음과 같다.
					구 분	고급기술자	정보처리기사		중급기능사 (지도제작)		비 고
					참여비율(%)	10	60		30
			③ 지하시설물도 구조화편집의 작업량은 다음과 같다. (단위 : □)
				구 분				1/1,000		비고
				시간당 작업량				0.14
			④ 기계비 및 재료비는 22-24수치지도작성□2.수동입력□을 적용한다. ⑤ 본 품의 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 공공측량성과심사업무처리규정에 의한다

항 목	구 분	현 행															개 정																	비 고
		[설계예] ①설계제원 ㉮시설물의 종류 :상수도관 10km, 가스관 27km, 송유관 20km ㉯지형의 구분 (단위 : %)															[설계예] ①설계제원 ㉮시설물의 종류 :상수도관 10km, 가스관 27km, 송유관 20km ㉯지형의 구분 (단위 : %)
			구분	밀집시가지		시가지			교외지		농경지		구릉지		산악지	비고		구분		밀집시가지		시가지		교외지		농경지			구릉지		산악지		비고
			상수관	40		30			20		0		0		10
																		상수관		40		30		20		0			0		10
			기스관	35		40			0		0		15		10
																		가스관		35		40		0		0			15		10
			송유관	0		0			40		10		20		30
																		송유관		0		0		40		10			20		30
		㉰출력된 1/500지형도를 이용 ②설계 ㉮인건비
																	㉰출력된 1/500지형도를 이용 ②설계 ㉮인건비
		구분			중급 기술자		초급 기술자	중급기능사 (측량)		초급기능사 (측량)		계		비고
																			구분		중급 기술자		초급 기술자		중급기능사 (측량)		초급기능사 (측량)			계		비고
		계획및작업관리			고급기술자(2,106×1/10=210.06일														작업계획		고급기술자(2,100.78×1/10=210.07일)
		자료조사및편집			59.14일		59.14일					118.28일		59.144km/1,000=59.14일					자료수집및작업준비		59.14일		59.14일							118.28일		59.144km/1,000=59.14일
		지상시설물조사			115.74일		231.48일	115.74일				462.96일		59.144km/511=115.74일					지하시설물조사편집		115.74일		231.48일		115.74일					462.96일		59.144km/511=115.74일
		관로조사및탐사			129.13일		258.26일	129.13일		387.39일		903.91일		59.144km/458=129.13일
																			지하시설물위치측량		128.38일		256.76일		128.38일		385.14일			898.66일		55.595km/458=121.38일
		편 집					113.30일	113.30일				226.60일		59.144km/1,044=56.65일
																			지하시설물원도작성				113.30일		113.30일					226.60일		59.144km/1,044=56.65일
		대장보서작성			98.57일		197.14일	98.57일				394.28일		59.144km/600=98.57일
																			대장조서및속성DB작성		98.57일		197.14일		98.57일					394.28일		59.144km/600=98.57일
																			계		401.83일		857.82일		455.99일		385.14일			2,100.78일
		계			402.58일		859.32일	456.74일		387.39일		2106.03일

항 목	구 분	현 행					개 정								비 고
		[설계예] 지형증감계수:상수도 [eqn: =0.40 times 1.68 + 0.30 times 1.0 + 0.20 times 0.78 + 0.1 times 0.65 = 1.193] 가스관 [eqn: =0.35 times 1.68 + 0.40 times 1.0 + 0.15 times 0.65 + 0.1 times 0.65 = 1.150] 송유관 [eqn: =0.40 times 0.78 + 0.10 times 0.65 + 0.20 times 0.65 + 0.30 times 0.65 = 0.702] 탐사길이 [eqn: =10 times 1.1 times 1.193 + 27 times 1.03 times 1.150 + 20 times 1.0 times 0.702 = 59.144]km ㉯ 기계비					[설계예] 지형증감계수 : 상수도[eqn: =0.40 times 1.68 + 0.30 times 1.0 + 0.20 times 0.78 + 0.1 times 0.65 = 1.193] 가스관[eqn: =0.35 times 1.68 + 0.40 times 1.0 + 0.15 times 0.65 + 0.1 times 0.65 = 1.150] 송유관[eqn: =0.40 times 0.78 + 0.10 times 0.65 + 0.20 times 0.65 + 0.30 times 0.65 = 0.702] 탐사길이[eqn: =10 times 1.1 times 1.193 + 27 times 1.03 times 1.150 + 20 times 1.0 times 0.702 = 59.144]km 공동구축탐사길이[eqn: = 탐사길이 times LEFT {1 - 0.03 times (N-1)RIGHT } = 59.144 times(1- 0.03 times 2) = 55.595 km] - 정위치편집
							구 분		고급기술자		정보처리기사		중급기능사 (지도제작)	비고
							1.작업관리		7.39일		7.39일
			구 분	상 각 비	정 비 비	비 고
							2.편 집						73.93일	59.144km/(0.10km×8시간) = 73.93일
			지하시설물탐사장비	129.13일	129.13일	59.144km/458=129.13일
							계		7.39일		7.39일		73.93일
							작업반편성		10%		10%		100%
							- 구조화 편집
							구 분	고급기술자		정보처리기사		중급기능사 (지도제작)		비고
							1.작업관리	5.28일
							2.편 집			31.68일		15.84일		59.144km/(0.14km×8시간) = 52.80일
							계	5.28일		31.68일		15.84일
							작업반편성	10%		60%		30%

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
			㉯ 기계비 - 지하시설물 조사/탐사
				구 분			상 각 비		정 비 비	비 고
				지하시설물탐사장비			121.38일		121.38일	59.595km/458 = 121.38일
			- 정위치편집
				구 분		상 각 비		정 비 비		비 고
				컴퓨터		73.93일		73.93일		59.144km/(0.10□×8시간)= 73.93일
			- 구조화 편집
				구 분	상 각 비			정 비 비		비 고
				컴퓨터	46.20일			46.20일		59.144km/(0.16□×8시간)= 46.20일

항 목	구 분	현 행	개 정																							비 고
			9. 수치표고자료 구축 가. 항공레이저에 의한 방법 1) 레이저에 의한 자료취득 및 처리 (단위:100□)
			항 목		작업 일수 (일)	투입인원(1일당)									투입인원 (합계)										비고
						특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자		중급 기능사 (지도)	조종사		항법사	정비사	특 급 기술자		고 급 기술자	중 급 기술자	중급 기능사 (지도)		조종사	항법사		정비사
			작업준비		3	0.2	0.4								0.6		1.2								( ) 내는 외업을 표시함
			레이저지형 자료 취득		(20)	(1)					(1)		(1)	(1)	(20)						(20)	(20)		(20)
			원시지형 자료처리		3	1	1.5	1.5		1.5					3		4.5	4.5	4.5
			수치표고 자료제작		30	1	1.5	1.5		1.5					30		45	45	45
			정리 및 점검		3	0.2	0.4			0.2					0.6		1.2		0.6
			합 계												(20) 34.2		- 51.9	- 49.5	- 50.1		(20) -	(20) -		(20) -
			[주] ① 수치표고자료의 간격은 5m, 작업량은 100□를 1작업단위로 한다. ㉮ 작업량에 따른 증감계수
				작 업 량					100□			300□				600□				1,000□			비 고
				증감계수					1.0			0.6				0.46				0.37
			※ 작업량이 1,000□를 초과할 경우에는 증감계수 0.37을 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정											비 고
			㉯ 격자 간격에 따른 증감계수
				격 자 간 격		1m	2m		5m	10m	30m		비 고
				증 감 계 수		2.0	1.5		1.0	0.4	0.1
			② 본 작업을 수행하기 위한 기계비 및 재료비는 별도 계상한다. ③ 레이저 측량장비의 상각비 및 유지관리비 계산식 - 레이저 측량장비의 상각비는 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 총 가동시간은 3,000시간으로 한다. - 레이저 측량장비의 유지관리비 계산식은 다음과 같다.
					가동일당 유지관리비 =			(취득가격)				× 0.05
								278
			④ 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 □21-24 수치지도 작성□의 □2. 수동 입력□을 적용한다. ⑤ 레이저 측량장비의 일평균 가동시간은 기상장애와 위성의 배치상태에 따른 위치정확도 저하율을 고려하여 2.5시간을 기준으로 할 수 있다. ⑥ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다. ⑦ 레이저측량장비 및 승무원, 제3자의 보험료는 별도 계상한다. ⑧ 본품은 다음의 성과품이 포함된 것이다. (1) 지형자료 취득 데이터 (2) 지형자료 처리 데이터 (3) DEM성과 (4) 음영기복도 (5) 성과점검 및 관리파일 : 1식

항 목	구 분	현 행	개 정									비 고
			⑨ 본 품에 명시되어 있지 않은 간격 및 작업량에 대하여는 보간법으로 적용할 수 있다. [설계예] ① 설계제원 ㉮ 작 업 량 : 1000□ ㉯ 격자간격 : 5m ② 설계 ㉮ 인건비
				항 목	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	중급기능사 (지도)	조종사	항법사	정비사
				작업준비	2.22
				레이저지형 자료 취득	185				185	185	185
				원시지형 자료처리	11.1	16.6	16.6	16.6
				수치표고 자료제작	111	166.5	166.5	166.5
				정리 및 점검	2.22

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
				비 고
				특급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(0.6) = 2.22인
				특급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(20)×(2.5) = 185인 조 종 사 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(20)×(2.5) = 185인 항 법 사 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(20)×(2.5) = 185인 정 비 사 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(20)×(2.5) = 185인
				특급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(3) = 11.1인 고급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(4.5) = 16.6인 중급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(4.5) = 16.6인 중급기능사(지도) : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(4.5) = 16.6인
				특급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(30) = 111인 고급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(45) = 166.5인 중급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(45) = 166.5인 중급기능사(지도) : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(45) = 166.5인
				특급기술자 : (1000□÷100□)×(0.37)×(1.0)×(0.6) = 2.22인
			㉯ 기계경비
					항 목	장비구분	상 각 비	유 지 관 리 비
					레이저지형자료취득	레이저측량장비	185일	185일
					원시지형자료처리	컴 퓨 터	16.6일	16.6일
					수치표고자료제작	컴 퓨 터	166.5일	166.5일

항 목	구 분	현 행	개 정																				비 고
			나. 수치사진측량장비에 의한 방법 (단위 : 1도엽)
				항 목				작업일수 (일)	투입인원(1일당)							투입인원(합계)						비고
									고 급 기술자		중 급 기술자			중급기능사 (도화)		고 급 기술자		중 급 기술자		중급기능사 (도화)
				작업계획 및 준비				1	0.3							0.3
				표정				1			0.25			0.5				0.25		0.5
				수치표고자료제작				3			0.25			0.6				0.75		1.8
				품질관리				1			0.5							0.5
				정리 및 점검				1	0.2							0.2
			[주] ① "수치사진측량장비『Digital Photogrammetry Workstation (DPW)』"란 항공사진 및 위성영상데이터를 이용하여 지형지물을 수치형식으로 측정하여 저장하는 장비를 말한다. ② 수치표고자료의 간격은 5m, 작업지역면적은 1/5,000 1도엽(6.1□)를 1작업단위로 한다. - 격자간격에 따른 증감계수
					격자 간격		1m			2m			5m		10m				30m		비고
					증감 계수		1.09			1.05			1.0		0.96				0.88
			③ 본 작업을 수행하기 위한 기계비 및 재료비는 별도 계상한다. ㉮ 수치사진측량장비의 상각비는 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 년 가동일수는 278일로 한다. ㉯ 수치사진측량장비의 유지관리비 계산식은 다음과 같다.
						가동일당 유지관리비 =						(취득가격)					× 0.1
												278

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
			④ 데이터 처리 작업을 위한 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 □21-24 수치지도 작성□의 □2. 수동 입력□을 적용한다. ⑤ 본품은 다음의 성과품이 포함된 것이다. ㉮ 기준점 선정부 ㉯ DEM성과 ㉰ 음영기복도 ㉱ 성과점검 및 관리파일 : 1식 ⑥ 본 품에 명시되어 있지 않은 간격에 대한 증감계수는 보간법으로 적용할 수 있다. [설계예] ① 설계제원 ㉮ 작 업 량 : 100 도엽 (1/5,000) ㉯ 격자간격 : 5m ② 설계 ㉮ 인건비
				항 목	고 급 기술자	중 급 기술자	중급 기능사 (도화)	비 고
				작업계획 및 준비	30			고급기술자 : (100도엽)×(0.3)×(1.0) = 30인
				표정		25	50	중급기술자 : (100도엽)×(0.25)×(1.0) = 25인 중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.5)×(1.0) = 50인
				수치표고자료제작		75	180	중급기술자 : (100도엽)×(0.75)×(1.0) = 75인 중급기능사(도화) : (100도엽)×(1.8)×(1.0) = 180인
				품질관리		50		중급기술자 : (100도엽)×(0.5)×(1.0) = 50인
				정리 및 점검	20			고급기술자 : (100도엽)×(0.2)×(1.0) = 20인

항 목	구 분	현 행	개 정														비 고
			㉯ 기계경비
						항 목			장비구분		상 각 비				유 지 관 리 비
						표정			수치사진측량기		50일				50일
						수치표고자료제작			〃		180일				180일
						품질관리			컴퓨터		50일				50일
			다. 해석도화기에 의한 방법 (단위 : 1도엽당)
				항 목			작업일수(일)		투입인원(1일당)			투입인원(합계)				비고
									고 급 기술자	중급기능사(도화)		고 급 기술자		중급기능사(도화)
				작업계획 및 준비			1		1.0			1.0
				표정			1			0.2				0.2
				수치표고자료추출			40			1.0				40
				품질관리			1		2.4			2.4
				정리 및 점검			1		1.0			1.0
				합계			44					4.4		40.2
			[주] ① 수치표고자료의 간격은 5m, 작업지역면적은 1/5,000 1도엽(6.1□)를 1작업단위로 한다. - 격자간격에 따른 증감계수
					격자간격		1m	2m		5m		10m	30m			비고
					증감계수		39	6.25		1.0		0.25	0.027

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
			② 본 작업을 수행하기 위한 기계비 및 재료비는 별도 계상한다. ③ 데이터 취득을 위한 해석도화기의 상각비 및 가동일당 정비비는 □21-22 세부도화□의 □2. 축척별 작업량□을 적용한다. ④ 데이터 처리 작업을 위한 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 □21-24 수치지도 작성□의 □2. 수동 입력□을 적용한다. ⑤ 본품은 다음의 성과품이 포함된 것이다. ㉮ 표정기록부 ㉯ DEM성과 ㉰ 음영기복도 ㉱ 성과점검 및 관리파일 : 1식 ⑥ 본 품에 명시되어 있지 않은 간격에 대한 증감계수는 보간법으로 적용할 수 있다. [설계예] ① 설계제원 ㉮ 작 업 량 : 100 도엽 (1/5,000) ㉯ 격자간격 : 5m ② 설계 ㉮ 인건비
				항 목	고 급 기술자	중급기능사(도화)	비 고
				작업계획 및 준비	100		고급기술자 : (100도엽)×(1.0)×(1.0) = 100인
				표정		20	중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.2)×(1.0) = 20인
				수치표고자료추출		4000	중급기능사(도화) : (100도엽)×(40)×(1.0) = 4000인
				품질관리	240		고급기술자 : (100도엽)×(2.4)×(1.0) = 240인
				정리 및 점검	100		고급기술자 : (100도엽)×(1.0)×(1.0) = 100인

항 목	구 분	현 행	개 정													비 고
			㉯ 기계경비
				항 목			장비구분			상 각 비				유 지 관 리 비
				표정			해석도화기			20일				20일
				수치표고자료제작			〃			4000일				4000일
				품질관리			컴퓨터			240일				240일
			라. 수치지도를 이용한 방법 (단위 : 1도엽)
			항 목		작업일수(일)	투입인원(1일당)					투입인원(합계)				비고
						고 급 기술자		중 급 기술자	중급 기능사(도화)		고 급 기술자	중 급 기술자	중급 기능사 (도화)
			작업계획 및 준비		1	0.05					0.05
			지형자료추출 및 수정		1			0.09	0.05			0.09	0.05
			표고자료보완 및 확인		1			0.05				0.05
			추출지형자료 편집		1				0.1				0.1
			수치표고자료제작		1				0.15				0.15
			품질관리		1			0.06				0.06
			정리 및 점검		1			0.05				0.05
			합 계		7	0.05		0.25	0.3		0.05	0.25	0.3

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
			[주] ① 수치표고자료의 간격은 5m, 작업지역면적은 1/5,000 1도엽(6.1□)를 1작업단위로 한다. - 격자간격에 따른 증감계수
				격자간격	1m	2m	5m	10m	30m	비 고
				증감계수	1.09	1.05	1.0	0.96	0.88
			② 건물의 정사보정에 활용하는 수치표고자료는 □21-24수치지도 작성□의 □2. 수동 입력□ 의 지형증가계수중 산악지에 대한 지형계수를 적용할 수 있다. ③ 데이터 처리 작업을 위한 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 □21-24 수치지도 작성□의 □2. 수동 입력□을 적용한다. ④ 본품은 다음의 성과품이 포함된 것이다. ㉮ 수치지도 편집 데이터 ㉯ DEM성과 ㉰ 음영기복도 ㉱ 성과점검 및 관리파일 : 1식 ⑤ 본 품에 명시되어 있지 않은 간격에 대한 증감계수는 보간법으로 적용할 수 있다. [설계예] ① 설계제원 ㉮ 작 업 량 : 100 도엽 (1/5,000) ㉯ 격자간격 : 5m

항 목	구 분	현 행	개 정										비 고
			② 설계 ㉮ 인건비
				항 목		고 급 기술자		중 급 기술자	중급기능사(도화)	비 고
				작업계획 및 준비		0.05				고급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0) = 5 인
				지형자료추출 및 수정				0.09	0.05	중급기술자 : (100도엽)×(0.09)×(1.0) = 9 인 중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.05)×(1.0) = 5 인
				표고자료보완 및 확인				0.05		중급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0) = 5 인
				추출지형자료 편집					0.1	중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.01)×(1.0) = 1 인
				수치표고자료제작					0.15	중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.15)×(1.0) = 15 인
				품질관리				0.06		중급기술자 : (100도엽)×(0.06)×(1.0) = 6 인
				정리 및 점검				0.05		중급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0) = 5 인
			㉯ 기계경비
					항 목		장비구분				상 각 비	유 지 관 리 비
					지형자료추출 및 수정		컴퓨터				5일	5일
					표고자료보완 및 확인		〃				5일	5일
					추출지형자료 편집		〃				1일	1일
					수치표고자료제작		〃				15일	15일
					품질관리		〃				6일	6일

항 목	구 분	현 행	개 정														비 고
			10. 영상지도제작 가. 항공사진자동독취 및 DB구축 1) 작업단계별 소요일수 및 동원인력 (단위 : 500매당)
			작업공정		인수		인원수
							1일당					합계
							고급 기술자		정보처리기사 1급		중 급 기능사 (항공사진)	고급 기술자		정보처리기사1급		중 급 기능사 (항공사진)
			계획준비		2		0.4		0.4		0.4	0.8		0.8		0.8
			자동독취		12		0.6		0.6		2	7.2		7.2		24
			화면오류 및 파일저장		3		2.4		2.0		3.4	7.2		6		10.2
			항공사진촬영성과입력		3		0.8		0.4		0.8	2.4		1.2		2.4
			정리		2		1.0				2	2				4
			점검		2		1.0				1.0	2				2
			계		24		6.2		3.4		9.6	21.6		15.2		43.4
			[주] ① 계획준비 ·정리·점검에 의한 작업량에 따른 증감계수
				작업량		50매		200매		500매			1,000매이상		비 고
				증감계수		2.0		1.3		1			0.90
			□ 작업량 증감율 (R) = 0.8+10/Q(Q는 실시작업량) □ 작업량이 1,000장을 초과해도 증감계수는 0.90까지만 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정												비 고
			② 표준해상도에 의한 증감 계수
				해상도		450DPI이하		900∼1,000DPI	1,100∼1,250DPI			1,800∼1,900DPI		3,600DPI이상
				증감계수		0.38		0.76	1.00			1.51		3.02
			③ 필름종류에 의한 증감계수
					작업공정 종 류		계획준비			자동독취	화면오류 및 파일저장		비고
					흑백필름		1.0			1.0	1.0
					칼라필름		1.3			3.0	2.0
			④ 측량성과데이터 등록은 촬영기록부, 표정도, 촬영코스별검사표 이외의 입력을 필요로 하는 경우는 별도 계상한다. ⑤ 기계비 및 유지관리비는 별도 계상한다. ㉮ 독취기의 상각비 계상은 장비 취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 년간 가동일수는 278일로 한다.. ㉯ 독취기의 유지관리비의 계산식은 다음과 같다. [eqn: 가동일당~유지관리비~=~ 취득가격 over 278 times 0.1] ㉰ 컴퓨터의 상각비 및 유지관리비는 □21-24 수치지도작성 2. 수동입력□을 적용한다. ⑥ 본품에서 공공측량성과심사에 소요되는 비용은 건설교통부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다. ⑦ 본품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있다. ㉮ 사진래스터 파일 : 2부 ㉯ 촬영성과파일(촬영기록부, 표정도, 코스별검사표) ㉰ 항공사진성과점검 및 관리대장 ㉱ 저해상도 영상데이터파일 1식 ㉲ 용역결과보고서 1식

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
			[설계예] ① 설계제원 ㉮ 사용필름 : 흑백필름 ㉯ 사용장비 : 자동독취기 (항공사진용) ㉰ 표준해상도 : 1,200DPI ㉱ 사진매수 : 1,200매 ㉲ 기록매체 : DVD ② 설계 ㉮ 인건비
				구분	고급기술자	정보처리기사 (1급)	중급기능사 (항공사진)	비고
				작업계획	1.72	1.72	1.72	고급기술자 0.8×1200/500×0.9 정보처리기사 0.8×1200/500×0.9 중급기능사 0.8×1200/500×0.9
				자동독취	17.28	17.28	57.6	고급기술자 7.2×1200/500 정보처리기사 7.2×1200/500 중급기능사 24×1200/500
				화면오류 및 파일저장	17.28	14.4	24.48	고급기술자 7.2×1200/500 정보처리기사 6×1200/500 중급기능사 10.2×1200/500
				성과입력	5.76	2.88	5.76	고급기술자 2.4×1200/500 정보처리기사 1.2×1200/500 중급기능사 2.4×1200/500
				정리	4.32		9.6	고급기술자 2×1200/500×0.9 중급기능사 4×1200/500×0.9
				점검	4.32		4.32	고급기술자 2×1200/500×0.9 중급기능사 2×1200/500×0.9
				계	50.68	36.28	103.48

항 목	구 분	현 행	개 정																	비 고
			㉯ 기계경비
				공 정				장 비			상각비			유지관리비			비고
				자동독취				독 취 기			57.6일			57.6일
				화면오류 및 파일저장				컴 퓨 터			24.48일			24.48일
				항공사진성과입력				컴 퓨 터			5.76일			5.76일
			나. 영상지도제작 1) 작업단계별 소요일수 및 동원인력 (단위 : 1/25,000 1도엽당)
			작업공정		인수	인원수
						1인당							합계
						고급 기술자	정보 처리 기사 1급		중급 기술자	중급 기능사 (도화)		중급 기능사 (지도제작)	고급 기술자		정보 처리 기사 1급	중급 기술자		중급 기능사 (도화)	중급 기능사 (지도 제작)
			계획준비		1	1.0			1.0				1			1
			기준점선정		2	1.0			0.5	1.0			2			1		2.0
			영상보정		2		0.5		0.5	1.0					1.0	1		2.0
			영상집성		1.5		0.5		0.5	1.0					0.75	0.75		1.5
			색상보정		2		0.5		0.5			1.0			1	1			2.0
			영상융합		1		1.5		1.5	2.0		1.0			1.5	1.5		2.0	1.0
			레이어추출 및 일반화		2		0.5		0.5			1.0			1	1			2.0
			영상편집 및 출력		1		0.5		0.5			1.0			0.5	0.5			1.0
			정리 점검		0.5	1.0			1.0				0.5			0.5
			계		13	3.0	4.0		6.5	5.0		4.0	3.5		5.75	8.25		7.5	6.0

항 목	구 분	현 행	개 정														비 고
			[주] ① 계획준비 ·정리·점검에 의한 작업량에 따른 증감계수
				작업량			10도엽		20도엽		50도엽		100도엽이상			비고
				증감계수			1.5		1.3		1.0		0.9
			□작업량 증감율 (R) = 0.8+10/Q(Q는 실시작업량) □작업량이 100도엽을 초과해도 증감계수는 0.90까지만 적용한다. ② 대상영상에 따라 다음의 증감계수를 사용한다.
					구분					증감계수				비고
					위성영상					1.0
					항공사진					1.3
			③ 제작하고자 하는 영상지도의 축척이 다를 경우에는 다음 증가계수를 적용한다.
						축척별		1/5,000이상				1/5,000∼1/25,000			1/25,000미만
						증가계수		0.1				0.5			1.0
			④ 영상데이터의 구입, 기준점측량(사진, 지상), 정사영상제작용 수치표고모델 및 건물의 영상보정에 사용하는 수치표고자료가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 영상융합은 2개이상의 데이터를 이용하여 영상지도를 제작할 경우에만 사용한다. ⑥ 건물에 대한 정사 보정시 발생하는 폐색 영역의 편집은 영상편집공정을 1회 증가하여 실시한다. ⑦ 기계경비, 재료비는 별도 계상한다. ㉮ 수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)의 상각비의 계상은 장비 취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 년 가동일수는 278일로 한다. ㉯ 수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)의 유지관리비의 계산식은 다음과 같다. [eqn: 가동일당~유지관리비~=~ 취득가격 over 278 times 0.1] ㉰ 컴퓨터의 상각비 및 유지관리비는 □21-24 수치지도작성 2. 수동입력□을 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
			⑧ 본품에서 공공측량성과심사에 소요되는 비용은 건설교통부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다. ⑨ 본품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있다. ㉮ 기준점 및 검사점 선점부 ㉯ 모델링 성과부 ㉰ 영상보정관련자료 ㉱ 정사영상파일 ㉲ 수치지도 및 난외 주기 전산파일 ㉳ 영상지도이미지파일 ㉴ 용역결과보고서 1식
			[설계예] ① 설계제원 ㉮ 작업량 : 20도엽 ㉯ 축척 : 1/50,000 ㉰ 대상영상 : 위성영상 데이터 IRS-1C(흑백5.8m) 및 Land-sat(30m 다중분광) ② 설계 ㉮ 인건비
				구분	수량	비고
				고급기술자	(1.5×1.3+2)×20×1.0×1.0 = 79
				정보처리기사1급	5.75×20×1.0×1.0 = 115
				중급기술자	(1.5×1.3+6.75)×20×1.0×1.0 =263.25
				중급기능사(도화)	7.5×20×1.0×1.0 = 150
				중급기능사(지도제작)	6.0×20×1.0×1.0 = 120

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
			㉯ 기계경비
				공 정	장비	상각비	유지관리비	비고
				영상보정	수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)	40일	40일	2.0×20×1.0×1.0=40
				영상집성	수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)	30일	30일	1.5×20×1.0×1.0=30
				색상보정	수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)	40일	40일	2.0×20×1.0×1.0=40
				영상융합	수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)	40일	40일	2.0×20×1.0×1.0=40
				레이어추출 및 일반화	컴 퓨 터	40일	40일	2.0×20×1.0×1.0=40
				영상편집 및 출력	컴 퓨 터	20일	20일	1.0×20×1.0×1.0=20

항 목	구 분	현 행														개 정														비 고
21-29 신규등록 측량	보완	21-29 신규등록 측량														21-29 신규등록 측량
		구분 작업별		일수	인 원 수										적요
																구분 작업별		일수	인 원 수										적요
					1일당					합계
																			1일당					합계
					지적 기사	지적 산업기사	지적 기능 산업 기사	지적기능사	인부	지적 기사	지적 산업기사	지적 기능 산업 기사	지적 기능사	인부
																			지적 기사	지적 산업기사	지적 기능 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 산업 기사	지적 기능사	인부
		자료조사 등 사 소도작성 실지측량 원도작성 면적측정 조서작성 신청서작성 이동통지도작성 점 검 성과인계		0.11 0.17 0.12 1.09 0.12 0.13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03	1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1		(1.09) 0.03	0.11 0.17 0.12 0.03	0.12 (1.09) 0.13 0.03 0.03 0.03	(1.09)		( )는 외업임
																자료조사 등 사 소도작성 실지측량 원도작성 면적측정 조서작성 신청서작성 이동통지도작성 점 검 성과인계		0.11 0.17 0.12 (1.09) 0.12 0.13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03	1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1		(1.09) 0.03	0.11 0.17 0.12 0.03	0.12 (1.09) 0.13 0.03 0.03 0.03	(1.09)		( )는 외업임
		소 계	외업							(1.09)		(1.09)	(1.09)
																소 계	외업	1.09						(1.09)		(1.09)	(1.09)
			내업							0.03	0.43	0.34					내업	0.80						0.03	0.43	0.34
		합 계								1.12	0.43	1.43	1.09			합 계		1.89						1.12	0.43	1.43	1.09
		[주] ① 신규등록 측량이라 함은 지적법 제2조제10호의 규정에 의하여 토지를 새로이 지적공부에 등록할 경우에 실시하는 지적측량을 말한다.														[주] ① 신규등록 측량이라함은 지적법 제2조제13호의 규정에 의하여 새로이 조성된 토지 및 등록이 누락되어 있는 토지를 지적공부에 등록하기 위하여 실시하는 지적측량을 말한다,

항 목	구 분	현 행														개 정														비 고
21-30 등록전환 측량	보완	21-30 등록전환 측량														21-30 등록전환 측량
		구 분 작업별		일수	인 원 수										적요	구분 작업별		일수	인 원 수										적요
					1일당					합 계
																			1일당					합계
					지적 기사	지적 산업기사	지적 기능 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업기사	지적 기능 산업 기사	지적 기능사	인부
																			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 산업 기사	지적 기능사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 산업 기사	지적 기능사	인부
		자료조사 등 사 소도작성 실지측량 축 도 신 도 원도작성 면적측정 조서작성 신청서작성 이동통지도작성 점 검 성과인계		0.10 0.11 0.13 (1.33) 0.10 0.09 0.10 0.14 0.04 0.03 0.04 0.04 0.17	1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1		(1.33) 0.04	0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.17	0.13 (1.33) 0.14 0.04 0.03 0.04	(1.33)		( )는 외업임	자료조사 등 사 소도작성 실지측량 원도작성 면적측정 조서작성 신청서작성 이동통지도작성 점 검 성과인계		0.10 0.11 0.13 (1.33) 0.10 0.09 0.10 0.14 0.04 0.03 0.04 0.04 0.17	1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1		(1.33) 0.04	0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.17	0.13 (1.33) 0.14 0.04 0.03 0.04	(1.33)		( )는 외업임
		소계	외업	(1.33)						1.33		1.33	1.33			소계	외업	(1.33)						1.33		1.33	1.33
			내업	1.09						0.04	0.67	0.38					내업	1.09						0.04	0.67	0.38
		합 계		2.42						1.37	0.67	1.71	1.33			합 계		2.42						1.37	0.67	1.71	1.33
		[주] ① 등록전환 측량이라 함은 지적법 제2조제11호의 규정에 의하여 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옯겨 등록하는 지적측량을 말한다.														[주] ① 등록전환 측량이라 함은 지적법 제2조제14호의 규정에 의하여 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하는 지적측량을 말한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
21-31 분할측량 21-32 경계복원 측량	보완 보완	21-31 분할측량	21-31 분할측량
		표 : □ 생 략 □	표 : □ 현행과 같음 □
		[주] ① 분할측량이라 함은 지적법 제2조제13호의 규정에 의하여 지적공부에 등록된 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하는 지적측량을 말한다.	[주] ① 분할측량이라 함은 지적법 제2조제15호의 규정에 의하여 지적공부에 등록된 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하는 지적측량을 말한다.
		21-32 경계복원 측량	21-32 경계복원 측량
		표 : □ 생 략 □	표 : □ 현행과 같음 □
		[주] ① 경계복원 측량이라 함은 지적법 제25조 제2항제4호에 의하여 지번별로 확정하여 등록한 선의 굴곡점 또는 수치 지적부에 등록된 점의 좌표를 지표상에 복원하는 측량을 말한다.	[주] ① 경계복원 측량이라 함은 지적법 제32조 제2항제4호에 의하여 지적법 제2조 제9호에서 말하는 □경계점□을 지상에 복원하는 측량을 말한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
21-33 지적삼각측량 21-34 지적도근 측량	보완 보완	21-33 지적삼각 측량	21-33 지적삼각 측량
		표 : □ 생 략 □	표 : □ 현행과 같음 □
		[주] ① 지적삼각측량이라 함은 지적법시행령 제34조에 의한 기초 측량이며 평면직각 종횡선 좌표로 산출한다. ④ 지적삼각보조점 측량수수료는 본품의 50%를 적용한다. 단, 지적법시행령 제37조 제4항 규정에 의거 영구표지를 설치하고, 지적삼각측량방법에 준하였을 경우에는 삼각측량품을 적용한다.	[주] ① 지적삼각측량이라 함은 지적법시행규칙 제35조에 의한 기초 측량이며 평면직 각 종횡선 좌표로 산출한다. ④ 지적삼각보조점 측량수수료는 본품의 50%를 적용한다. 단, 지적법시행규칙 제38조 제4항 규정에 의거 영구표지를 설치하고, 지적삼각측량방법에 준하였을 경우에는 삼각측량품을 적용한다.
		21-34 지적도근 측량	21-34 지적도근 측량
		표 : □ 생 략 □	표 : □ 현행과 같음 □
		[주] ① `지적도근측량은 지적법시행령 제38조의 규정에 의한 지적측량을 말한다.	[주] ① 지적도근측량이라 함은 지적법시행규칙 제39조의 규정에 의한 지적측량을 말한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
21-35 지적확정측량	보완	21-35 지적확정 측량 1. 시가지 구획정리 지적확정 측량	21-35 지적확정 측량 1. 시가지 구획정리 지적확정 측량
		표 : □ 생 략 □	표 : □ 현행과 같음 □
		[주] ① 시가지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제2조 제6항의 규정에 의한 지적측량을 말한다. 〔계산예〕 ② 지적3각 측량품 :□w1	[주] ① 시가지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법 제26조 규정에 의한 토지개발사업에 수반되는 세부측량을 말한다. 〔계산예〕 ② 지적삼각 측량품 :□w1
		2. 경지구획정리 지적확정측량	2. 경지구획정리 지적확정측량
		표 : □ 생 략 □	표 : □ 현행과 같음 □
		[주] ① 경지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제2조 제6항의 지적측량을 말한다. ② 농촌근대화촉진법에 의한 경지구획정리에 있어서는 축척은 1/1,000로 하고 지역이 작고 협장하거나 산재한 지역을 측량하고자 할때에는 사전에 관계 시·도와 협의하여 인접지의 도면축적으로 시행할 수 있다.	[주] ① 경지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법 제26조 규정의 농어촌정비 사업 중 □경지정리□ 사업에 수반되는 세부측량을 말한다. ② 경지구획정리의 축척은 1/1,000로 하되 필요한 경우에는 미리 시·도지사의 승인을 얻어 6천분의 1까지 작성할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
21-36 지적도 작성	보완	21-36 지적도 작성 2. 지적도 재작성	21-36 지적도 작성 2. 지적도 재작성
		표 : □ 생 략 □	표 : □ 현행과 같음 □
		[주] ① 지적도 재작성은 지적법 제14조 규정에 의하여 것으로 지적공부가 더럽혀지거나 헐어져서 그 효용을 다할 수 없을 경우 새로이 지적도를 작성하는 업무를 말한다.	[주] ① 지적도 재 작성은 지적법 제13조 규정에 의하여 것으로 지적공부가 더럽혀지거나 헐어져서 그 효용을 다할 수 없을 경우 새로이 지적도를 작성하는 업무를 말한다.

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
부록 1. 건설기계가격표	보완	부록1. 건설기계가격표			부록1. 건설기계가격표
		기 종	분류번호	가격(원)	기 종	분류번호	가 격
		트럭탑재형 크 레 인	2105-0002 0003 0005	(6,500) (7,500) (12,000)	트럭탑재형 크 레 인	2105-0002 0003 0005	(24,835) (32,107) (41,399)
		( )내는 국산기계가격이며, 원화(단위:천원)로 표시한 것이다.			( )내는 국산기계가격이며, 원화(단위:천원)로 표시한 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
<부록3. 참고품> 14. LMC 교면포장	신설	□없 음□	14. LMC(Latex Modified Concrete) 교면포장 본 품은 라텍스(Latex)를 콘크리트의 구성재료와 일정량 혼합하여 콘크리트의 성능을 개선시킨 라텍스혼합개질콘크리트(LMC)를 교량 콘크리트바닥판 위에 포장하는 공법에 관한 것으로, 건설교통부에서 건설신기술로 지정고시한 □신설콘크리트 교면 포장용 SB라텍스 혼합 개질콘크리트 제조 및 시공방법□을 기준한 것이다. 1. 포장준비공 (□당)
			구 분	규 격	단위	수 량
			특별인부		인	0.0396
			보통인부		인	0.0489
			콘크리트표면절삭기	320mm	시간	0.175
			숏블라스트기	380mm	시간	0.022
			발전기	100kw	시간	0.022
			물탱크(살수차)	16,000□	시간	0.023
			[주]① 본 품은 신설교량의 교면포장 준비공에 대한 것이므로, 기존교량의 포장 준비공은 별도로 계상한다. ② 본 품에는 콘크리트바닥판 절삭, 절삭폐기물 모으기, 교면물청소, 습윤상태 유지(비닐덮기) 등이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
			2. 레일 및 레일받침대 설치 및 해체 (레일연장 m당)
			구 분	규 격			단위	수 량
			특별인부				인	0.0549
			보통인부				인	0.1063
			레 일	□63.5×2(STS304)			개	0.0035
			레일받침대	거치식 또는 지지식			개	0.0056
			[주] ① 레일 및 레일받침대의 수량은 손율이 기 계상된 것이다. ② 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. 3. 장비 조립 및 해체 (회당)
			구 분		규격	단위		수 량
			건설기계조장			인		2.56
			건설기계운전기사			인		7.69
			지 게 차		7.5톤	시간		20.5
			[주]① 본 품은 콘크리트롤러페이버, 콘크리트조면마무리기, 양생작업대 등의 장비를 조립·해체하는 것이다. ② 장비 조립·해체 횟수는 교량 개소별로 각각 계상한다. 다만, 본 공법의 최대시공폭은 12m이므로 동일교량 내에서도 시공폭이 12m를 초과할 경우 또는 상·하행선으로 분리되어 있는 등의 경우에는 최대시공폭 및 상·하행선 분리 등을 고려하여 조립·해체 횟수를 각각 계상한다. ③ 장비 운반비는 별도로 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
			4. LMC 포장 (□당)
			구 분	규격	단위	수 량
			포 장 공		인	0.0079
			특별인부		인	0.0264
			보통인부		인	0.0418
			LMC믹서	7.0□	시간	0.029
			콘크리트롤러페이버	12.0m	시간	0.0095
			콘크리트조면마무리기	12.0m	시간	0.0095
			물탱크(살수차)	16,000□	시간	0.023
			굴 삭 기	0.7□	시간	0.040
			공기압축기	3.5□/min	시간	0.017
			발 전 기	50kw	시간	0.017
			[주]① 본 품은 포장두께 5cm를 기준한 것으로, 포장두께가 매 5cm 증가할 때마다 본 품(인력+장비)을 5%씩 할증한다. ② LMC 원재료의 할증은 시멘트 3%, 잔골재 12%, 굵은골재 10%, 라텍스 3%로 계상하고, LMC 할증은 4%로 계상한다. ③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
			5. 양생 (□당)
			구 분	규격	단위	수 량
			특별인부		인	0.005
			보통인부		인	0.016
			양생작업대	12.0m	시간	0.01
			양생재		□	1.125
			양생포	부직포 200g/□	□	0.12
			비 닐	t=0.1mm	□	0.13
			물탱크(살수차)	16,000□	시간	0.012
			[주]① 양생포 및 비닐의 수량은 손율이 기 계상된 것이다. ② LMC 포장과 기존포장이 접속되는 부위의 줄눈설치를 위한 포장절단 및 줄눈설치는 별도로 계상한다. ③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 본 품에는 뒷정리가 포함되어 있다. <LMC 교면포장 모습>

항 목	구 분	현 행	개 정										비 고
			※ 손료산정 ㅇ 콘크리트표면절삭기
			규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
									상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
			320	4,000	800	0.9	0.9	0.14	2,250	2,250	1,120	5,620
			[주] ① 규격은 장비의 시공 유효폭이다. ② 팔각날, 드럼셋트 등의 소모품은 별도 계상한다. ㅇ 숏블라스트기
			규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
									상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
			380	4,000	800	0.9	0.9	0.14	2,250	2,250	1,120	5,620
			[주] ① 규격은 장비의 시공 유효폭이다. ② 동력은 별도 계상한다. ③ 숏볼, 필터 등의 소모품은 별도 계상한다. ④ 본 품에는 분진흡입기가 포함되어 있다. ㅇ LMC믹서
			규격 (□)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
									상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
			7.0	4,000	800	0.9	0.9	0.14	2,250	2,250	1,120	5,620
			[주] 본 장비는 이동식이다.

항 목	구 분	현 행	개 정										비 고
			ㅇ 콘크리트롤러페이버
			규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
									상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
			12.0	5,600	800	0.9	0.7	0.14	1,607	1,250	1,075	3,932
			ㅇ 콘크리트조면마무리기
			규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
									상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
			12.0	7,000	1,000	0.9	0.7	0.14	1,286	1,000	860	3,146
			ㅇ 양생작업대
			규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
									상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
			12.0	7,000	1,000	0.9	0.3	0.14	1,286	428	860	2,574

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
			※ 운전경비 산정
			기 계 명	규격	주연료 (□)		잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장(인/일)
			콘크리트표면절삭기	320mm	휘발유 3.3		6	-	-	-
			숏블라스트기	380mm	-		-	1	-	-
			LMC믹서	7.0□	31.9		20	1	-	-
			콘크리트롤러페이버	12.0m	휘발유 4.1		6	1	-	-
			콘크리트조면마무리기	12.0m	휘발유 5.1		6	1	-	-
			양생작업대	12.0m	휘발유 3.0		6	1	-	-
			※ 건설기계가격
			기 종			가격($)
			콘크리트표면절삭기			(18,500)
			숏블라스트기			(75,000)
			LMC믹서			164,020
			콘크리트롤러페이버			78,500
			콘크리트조면마무리기			65,000
			양생작업대			(25,000)
			[주] ① ( )의 가격은 국산기계가격으로, 원화(단위:천원)로 표시한 것이다. ② 상기가격은 부가가치세가 제외된 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정										비 고
<부록3. 참고품> 15. P.B.D공법	신설	□없 음□	15. P.B.D(Plastic Board Drain)공법(□03 신설) 1. 장비 조립 및 해체 (회당)
			구 분	명 칭				단위	규격			수량
			인 력	비 계 공 용 접 공 특별인부 보통인부				인인인인				4 3 3 5
			장 비	크레인(무한궤도) 발 전 기 용접기(교류)				일일일	150톤 350kw 400Amp			1 2 2
			2. 장비 및 인력 편성 가. 장비
			장비명		타설깊이별 규격						수 량
					25m이하		25m초과 ∼35m이하		35m초과 ∼50m이하
			유압식P.B.D압입기		200PS		250PS		300PS		1대
			나. 인력
			직 종			단위				수량
			특별인부 보통인부			인인				2 1

항 목	구 분	현 행	개 정										비 고
			3. 작업능력 Q=[eqn: { 3,600×□×E} over {□ }] Q : 시간당작업량(m/hr) □ : P.B.D 1본당 타설깊이(m/본) E : 작업효율(0.8) cm : 1회 사이클시간(sec) □=t1／t2／t3 t1＞준비 및 이동시간(sec)
					타설깊이					t1
					25m이하					90
					25m초과∼35m이하					100
					35m초과∼50m이하					110
			t2＞타입시간 = [eqn: { □} over { V_1}](sec) t3 : 인발시간 = [eqn: { □} over {V_2 }](sec) V1＞표준타입속도(m /sec) V2＞표준인발속도(m /sec)
				타설깊이				V1				V2
				25m이하				0.55				0.58
				25m초과∼35m이하				0.52				0.53
				35m초과∼50m이하				0.48				0.50
			[주] ① 본 품은 연약지반개량을 위하여 압입방식으로 Plastic Board를 타설하는 품으로서, N치 10이하인 연약지반 상부에 샌드매트가 포설된 경우를 대상으로 한 것이며, N치가 10을 초과하는 지반이나 토사 또는 암석 등으로 매립된 지반에 대해서는 별도 계상한다. ② 샌드매트 포설비는 별도 계상한다. ③ 유압식 P.B.D압입기에는 리더, 케이싱(맨드렐) 및 자동기록장치가 포함되어 있다. ④ 지반이 연약하여 장비이동을 위해 스틸 플레이트(6,100×6,100×30□)를 깔아야 할 경우에는 그 비용을 별도 계상한다. ⑤ 슈(앵커)의 재료비는 별도 계상한다. ⑥ 드레인 보드의 할증율은 3%로 한다.

항 목	구 분	현 행	개 정																	비 고
			※ 손료산정 ㅇ 유압식 P.B.D 압입기
			규격 (PS)	내용 시간		연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율		연간 관리 비율	시간당
													상각비 계수			정비비 계수		관리비 계수	계
			200 250 300	6,000 6,000 6,000		1,000 1,000 1,000		0.9 0.9 0.9		0.9 0.9 0.9		0.14 0.14 0.14	1,500 1,500 1,500			1,500 1,500 1,500		875 875 875	3,875 3,875 3,875
			[주] ① 본 장비에는 리더, 케이싱(맨드렐) 및 자동기록장치가 포함되어 있다. ② 규격은 P.B.D Driver의 압입능력(PS)을 말한다. ※ 운전경비 산정
			기계명		규격				주연료 (□)		잡재료		조종원 (인/일)		조수 (인/일)		건설기계 조장(인/일)
			유압식 P.B.D압입기		200PS 250 300				29.8 37.5 45.2		25 25 25		1 1 1		- - -		0.2 0.2 0.2
			※ 건설기계가격
			기 종				규격(PS)							가 격
			유압식 P.B.D 압입기				200 250 300							(445,000) (582,500) (720,000)
			( )내는 국산기계가격이며, 원화(단위:천원)로 표시한 것이다.

Ⅱ. 건 축 부 문

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
4-3-1 나무높이에 의한 굴취 4-4-1 나무높이에 의한 식재	보완 보완	4-3-1 나무높이에 의한 굴취 "표 생략" 〔주〕① 본 품은 곰솔, 독일가문비나무, 동백나무, -----등 이와 유사한 수종에 적용한다. ②∼⑨ "생략" 4-4-1 나무높이에 의한 식재 "표 생략" 〔주〕 ① 본 품은 곰솔, 독일가문비나무, 동백나무, ----등 이와 유사한 수종에 적용한다. ②∼⑫ □생략□	4-3-1 나무높이에 의한 굴취 "표 현행과 같음" 〔주〕① 본 품은 곰솔(나무높이 3m이상은 □4-3-3 근원직경에 의한 굴취□적용), 독일가문비나무, 동백나무, -----등 이와 유사한 수종에 적용한다. ②∼⑨ "현행과 같음" 4-4-1 나무높이에 의한 식재 "표 현행과 같음" 〔주〕 ① 본 품은 곰솔(나무높이 3m이상은 □4-4-3 근원직경에 의한 식재□적용), 독일가문비나무, 동백나무, ----등 이와 유사한 수종에 적용한다. ②∼⑫ □현행과 같음□	* 토목부문도 일괄적으로 개정 * 토목부문도 일괄적으로 개정

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
4-4-4 관목류 식재	보완	4-4-4 관목류 식재 2. 군식 "표 생략" 〔주〕①∼⑩ □생 략□ ⑪ 군식은 1건공사에 총 500주 이상 식재시에 적용한다. ⑫ □생략□	4-4-4 관목류 식재 2. 군식 "표 현행과 같음" 〔주〕①∼⑩ □현행과 같음□ ⑪ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우를 말한다. (주/□)								* 토목부문도 일괄적으로 개정
			수관폭 (□)	20	30	40	50	60	80	100
			주수	32	14	8	5	4	2	1
			⑫ □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
4-4-7 롤형 지피식물 식재	신설	□ 없 음 □	4-4-7 롤형 지피식물 식재 (□당)						* 토목부문도 일괄적으로 개정
			구 분	규 격	단 위	잔 디		초화류
						운동장	녹지대
			롤형잔디 롤형초화류 모래 마사토 유기질비료 무기질비료 조경공 보통인부 진동로울러 (자주식)	65×154×2 〃 - - - 21-17-17 - - 2.5ton	roll " □ □ □ □ 인 인 hr	1 - 0.005 - - - 0.03 0.09 0.0058	1 - 0.135 - 0.0065 0.05 0.04 0.12 -	- 1 - 0.1 0.005 0.05 0.03 0.11 -
			[주] ① 본 품의 운동장 잔디식재는 식재면 고르기, 잔디 소운반 및 깔기, 배토, 다짐을 기준한 것으로 배수층과 식생층 조성은 제외되어 있다. ② 녹지대 잔디 및 초화류식재는 터파기, 지반고르기, 잔토처리, 모래 또는 마사토 포설, 비료포설, 잔디 또는 초화류 소운반 및 깔기, 다짐을 기준한 것이다. ③ 관수는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
4-5-1 전정 2. 가로수 전정	신설	□ 없 음 □	4-5-1 전정 2. 가로수 전정 (주당)				* 토목부문도 일괄적으로 개정 * 현행 □4-5-1 전정작업□은 □1. 일반전정□으로 수정
			흉고직경(□)	조경공(인)	보통인부(인)	고소작업차(hr)
			20이하 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51이상	0.21 0.28 0.35 0.50 0.53 0.55 0.64 0.71	0.65 0.82 1.06 1.51 1.59 1.71 1.84 2.05	0.95 0.97 1.15 2.21 3.33 3.40 3.80 4.27
			[주] ① 본 품은 낙엽수의 기본전정(강전정)을 기준한 것이다. ② 약전정은 본 품의 50%를 적용한다. ③ 상록수는 본 품의 30%를 가산한다. ④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ⑤ 고소작업차는 트럭탑재형크레인(5ton)을 적용한다. ⑥ 본 품은 교통정리 등 안전관리와 전정후 뒷정리가 포함된 것이다. ⑦ 폐기물처리비는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정				비 고
4-6 정원석 석축공	보완	4-6 정원석 석축공 (ton당)				4-6 정원석 쌓기 및 놓기 (ton당)				* 토목부문도 일괄적으로 개정
		구 분	직 종		비 고	구 분	공사규모(총시공량)	조경공(인)	굴삭기(hr)
			조경공(인)	보통인부(인)
		쌓 기 놓 기	2.5 2.0	2.5 2.0		쌓기	20ton 미만	1.212	0.657
							20ton 이상	1.040	0.684
						놓기	20ton 미만	0.968	0.657
							20ton 이상	0.836	0.684
		〔주〕① 본 품은 평지에 자연석 또는 수석을 기술적으로 배치하여 경관을 조성하는 경우에 적용한다. ② 본 품은 다짐 및 정지품이 포함된 것이다. ③ 운반비는 별도 계상한다. ④ 지형 등 작업의 난이도에 따라 20%까지 가산할 수 있다. ⑤ 정원석이란 2목도 이상 되는 돌을 말한다.				〔주〕①∼④ □현행과 같음□ ⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ⑥ 굴삭기는 0.7□를 적용한다. ⑦ 사이목 식재는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
6-3-5 유로폼	보완	6-3-5 유로폼 (10□당)						6-3-5 유로폼 (10□당)						* 토목부문도 일괄적으로 개정 * 강관동바리 삭제 * 강관동바리 삭제
		구 분	규 격		단위	수 량		구 분	규 격		단위	수량
						벽	바닥					벽	바닥
		패 널 패 널 슬라브코너패널 내부 〃 보 웨이지핀(WEDGE PIN) 드롭헤드(DROP HEAD) 볼 트(너트포함) 플랫타이 (FLAT TIE) 강 관 파 이 프 훅·크램프(HOOK CLAMP) 강 관 동 바 리 목 재 박 리 재	600×1,800□ 600×1,200□ 220×1,500□ (200+200)×1,200□ 100×1,650□ L=200□ D 48.6□		매 매 매 매 매 개 개 조 개 m 개 개 □ □	- 0.64 - 0.018 - 19.002 - - 20.026 0.773 2.827 0.147 - 0.125	0.392 - 0.118 - 0.058 6.567 0.074 0.377 - - - 0.228 0.007 0.125	패 널 패 널 슬라브코너패널 내부 〃 보 웨이지핀(WEDGE PIN) 드롭헤드(DROP HEAD) 볼 트(너트포함) 플랫타이 (FLAT TIE) 강 관 파 이 프 훅·크램프(HOOK CLAMP) 목 재 박 리 재	600×1,800□ 600×1,200□ 220×1,500□ (200+200)×1,200□ 100×1,650□ L=200□ D 48.6□		매 매 매 매 매 개 개 조 개 m 개 □ □	- 0.64 - 0.018 - 19.002 - - 20.026 0.773 2.827 - 0.125	0.392 - 0.118 - 0.058 6.567 0.074 0.377 - - - 0.007 0.125
		형 틀 목 공 보 통 인 부	조립·해체		인인	1.27 0.76	1.27 0.76	형 틀 목 공 보 통 인 부	조립·해체		인인	1.27 0.76	1.27 0.76
		〔주〕① ∼ ⑦ "생 략" ⑧ 본 품의 사용조작회수(손율)기준은 다음을 기준으로 한 것이다.						〔주〕① ∼ ⑦ "현행과 같음" ⑧ 본 품의 사용조작회수(손율)기준은 다음을 기준으로 한 것이다.
								구 분		사용조작회수
		구 분		사용조작회수
								패널류		20회 사용시 잔존율 10%
		패널류		20회 사용시 잔존율 10%
		보, 드롭헤드, 강관동바리, 강관파이프, 훅·크램프, 웨이지 핀		25회 사용시 잔존율 10%				보, 드롭헤드, 강관파이프, 훅·크램프, 웨이지 핀		25회 사용시 잔존율 10%
		⑨ "생 략"						⑨ "현행과 같음"

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
7-2-5 스터드볼트 (Stud bolt) 설치	신설	□ 없 음 □	7-2-5 스터드볼트(Stud bolt) 설치 (1,000개당)
			구 분	단 위	수 량
					자동용접	수동용접
			용접공 보통인부	인인	1.1 2.2	1.4 2.8
			[주] ① 본 품은 철골조에 데크플레이트가 설치된 상태에서 스터드볼트를 2열로 용접하는 것을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 소운반이 포함된 것이다. ③ 자동용접은 스터드볼트 전용용접기를 사용하는 것을 말하며, 수동용접은 아크용접기를 사용하는 것을 말한다. ④ 공구손료는 자동용접인 경우 인력품의 40%, 수동용접인 경우 인력품의 20%로 계상한다. ⑤ 잡재료는 주재료비의 5%로 계상한다.

항 목	구 분	현 행					개 정			비 고
13-8 코킹 및 신축줄눈	보완	13-8 코킹 및 신축줄눈 1. 수밀코킹 (m당)					13-8 코킹 및 신축줄눈 1. 수밀코킹 (m당)
		공종별 구분	단위	1□	1.2□각	1.5□각	구 분	단위	수 량
		코 킹 방 수 공	□ 인	0.12 0.04	0.18 0.04	0.28 0.04
							방 수 공	인	0.04
		〔주〕본 품은 재료의 할증, 공구손료 및 소운반품이 포함되어 있다.					[주] ① 본 품은 공구손료 및 소운반품이 포함된 것이다. ② 재료량은 정미수량에 할증율 20%를 가산하여 산출한다.

`

항 목	구 분	현 행	개 정			비 고
14-1-7 폴리카보네이트 지붕잇기	신설	□ 없 음 □	14-1-7 폴리카보네이트 지붕잇기 (□당)
			구 분	단 위	수 량
			폴리카보네이트 샷 시 공 보통인부	□ 인 인	1.1 0.17 0.08
			[주] ① 본 품은 폴리카보네이트의 소운반, 절단·가공, 설치, 코킹, 마무리까지를 기준한 것이다. ② 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ③ 몰딩, 실리콘 등 잡재료는 주재료비의 5%로 계상한다.

항 목	구 분	현 행			개 정	비 고
19-3 조합유성페인트칠	보완	19-3 조합유성페인트칠 [주] ①∼⑥ □생 략 □ ⑦ 소모재료비는 필요에 따라 다음을 표준으로 하여 별도 계상한다. (□당)			19-3 조합유성페인트칠 [주] ①∼⑥ □ 현행과 같음 □ ⑦ 소모재료비는 주재료비의 5%(붓칠, 로울러칠) 또는 10%(뿜칠)로 계상한다.	* 기계설비부문도 일괄적으로 개정
			넝 마(kg)	가솔린(□)
			0.01	0.05

항 목	구 분	현 행						개 정					비 고
20-3 도배바름	보완	20-3 도배바름 1. 벽지 및 반자지 (□당)						20-3 도배바름 1. 벽지 및 반자지 (□당)
		초배지(□)	재배지(□)	정배지(□)	풀(kg)	도배공(인)	보통인부(인)	초배지(□)	정배지(□)	풀(kg)	도배공(인)	보통인부(인)
		1.2(1회)	2.4(2회)	1.2(1회)	0.05	0.05	0.05	1.2(1회)	1.2(1회)	0.3	0.02	0.02
		〔주〕① 반자지(천장)는 품의 30%를 가산한다. ② 반자지 치수는 70□×50□, 벽지 치수는 70□×52□, 선화지 치수는 110□×78□이다.						〔주〕① 반자지(천장)는 인력품의 30%를 가산한다. ② 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
20-7 걸레받이 붙임	보완	20-7 걸레받이 붙임 1. 테라조 및 합성수지계 걸레받이 붙임 □ 표 생략□ 〔주〕① 재료의 소운반은 별도 계상한다. ② 뒤채움 모르타르는 미장공사에서 계상한다.	20-7 걸레받이 붙임 1. 테라조 및 합성수지계 걸레받이 붙임 □표 현행과 같음□ 〔주〕① 재료의 소운반은 포함되어 있다. ② □현행과 같음□

Ⅲ. 기계설비부문

항 목	구 분	현 행				개 정					비 고
제Ⅱ편 기계설비공사 1-2-6 적산열량계설치	보완	1-2-6 적산열량계 (대당)				1-2-6 적산열량계 설치 1. 주거용 가. 세대용 <현행과 같음> 나. 건물용
		규 격(□)	배 관 공	내선전공	계장공
		Ø25이하	0.91	0.75	0.16
		[주] ① 본 품은 옥내배관 설치기준이다. ② 본 품은 소운반, 적산열량계 설치, 인디케이터 설치, PVC 전선관배관, 비닐 전선배관, 4각 콘크리트박스, 밸브 스트레이너 및 배관조립 설치품이 포함된 것이다.
						(대당)
							규격	배관공	내선전공	계장공
							Ø50	0.79	0.78	0.16
							Ø65	0.89	0.78	0.16
							Ø80	0.91	0.78	0.16
							Ø125	0.97	0.78	0.16
							Ø150	1.18	0.78	0.16
						[주] ① 본 품은 가배관을 철거하고, 건물입구(지하층 또는 기계실)에 적산열량계을 설치하는 것으로서 시험·소운반이 포함되어 있다. ② 본 품은 배관세정작업, 유량계, 온도감지기, 열량지시계, 단자함을 설치하는 것과 이들간의 전기배선 및 결선을 포함한다. ③ 전선관, 밸브, 스트레이너 설치품은 별도 계상한다. ④ 열량지시계는 노출기준이며, 매립시는 별도계상 한다.

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
			2. 산업용 (대당)
				규 격	플랜트배관공	특별인부	계장공
				Ø32	0.71	0.71	0.71
			[주] ① 본 품은 가배관을 철거하고, 지역난방공사와 같이 산업용으로 적산열량계를 설치하는 것으로서 시험·소운반이 포함되어 있다. ② 본 품은 배관세정작업, 유량계, 온도감지기, 열량지시계, 단자함을 설치하는 것과 이들간의 전기배선 및 결선을 포함한다. ③ 전선관, 밸브, 스트레이너 설치품은 별도 계상한다. ④ 열량지시계는 노출기준이며 매립시는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
2-1-9 전기보일러설치	신설	" 없 음 □ □ 없 음 □	2-1-9 전기보일러 설치 (대당)
			규 격			보일러공			비계공
			135,000kcal (30kw)			3.8			2.3
			[주] ① 본 품은 축열식심야 전기보일러, 실내온도조절기 설치기준으로 시운전 및 소운반이 포함되어 있다. ② 본 품에는 팽창탱크, 안전핀, 순환펌프 설치가 포함되었으며, 기초공사, 전선관, 전기배선은 별도 계상한다. ③ 사용장비는 다음기준에 따라 적용한다.
				장 비 명			규 격			사용기간
				트럭탑재형 크레인			5톤			3hr
2-1-10 전기온수기 설치	신설
			2-1-10 전기온수기 설치 (대당)
			규 격		보일러공			비계공
			350□		2.0			0.3
			[주] ① 본 품은 축열식심야 전기온수기 설치기준으로 시운전 및 소운반이 포함되어 있다. ② 본 품에는 안전핀, 감압밸브 설치가 포함되었으며 기초공사, 전선관, 전기배선은 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
2-5-8 중앙처리장치(CPU) 설치	신설	" 없 음 □	2-5-8 중앙처리장치(CPU) 설치
			공 정		단 위		기 사		계장공
			설 치		인/Point		0.061		0.029
			통신상태점검		인/DDC				0.718
			점검·시험		인/Point		0.005		0.019
			[주] ① 본 품은 개발되어 있는 프로그램을 중앙처리장치에 설치하고 현장특성에 맞추어 프로그램을 수정·보완하는 것으로 소운반이 포함되어 있다. ② 본 품은 프로그램으로 중앙처리장치와 DDC(Direct Digital Controller)사이를 연결하는 것이다. 다만 Service Module이 설치된 통신상태점검은 DDC에 포함된 것으로 본다. ③ 중앙처리장치와 DDC사이의 전선, 통신선 설치품은 별도 계상한다. ④ 본 품은 중앙처리장치에 Control 등록, 입·출력 Point 등록을 포함한다. ⑤ 그래픽작업은 장비별로, 보고서는 일간, 월간, 년간 각각 작성하는 것을 기준한 것이다. ⑥ 시설물 준공후, 시스템 운영·관리에 지원이 필요한 경우 다음기준에 따라 별도 가산한다.
				기 간		3개월		6개월
				가산율		점검·시험품의 15%		점검·시험품의 30%

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
2-5-9 입·출력장치설치	신설	" 없 음 □	2-5-9 입·출력장치(I/O Equipment) 설치
			공 정		단 위		기 사		계장공
			설 치		인/Point		0.008		0.042
			점검·시험		인/Point		0.046		0.080
			[주] ① 본 품은DDC(단자함내의 결선포함)을 설치하고, 점검·시험 및 소운반이 포함되어 있다. ② 본 품은 프로그램으로 DDC와 현장계기 사이를 연결하고, Hardware와 프로그램 Setting 하는 것이다. ③ DDC와 현장계기 사이의 전선, 통신선 설치품과 DDC외함 설치품은 별도 계상한다. ④ 시설물 준공후, 시스템 운영·관리에 지원이 필요한 경우 다음기준에 따라 별도 가산한다.
				기 간		3개월		6개월
				가산율		점검·시험품의 20%		점검·시험품의 40%

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
2-5-10 콘솔설치	신설	" 없 음 □	2-5-10 콘솔(Console) 설치
			공 정	단 위	기 사	계장공
			조립 및 설치	인/대		6.8
			시험 및 조정	인/대	1.9
			[주] ① 본 품은 Desk를 현장에서 조립·설치하고 PC, Keyboard, Monitor, Printer를 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다. ② 본 품은 PC를 Hard Formatting하고 운영체계를 Hard에 Setup한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
제Ⅲ편 플랜트설비공사 1-1-1 플랜트배관	보완	1-1-1 플랜트 배관 < 표 > 생략	1-1-1 플랜트 배관 < 표 > 현행과 같음
		[주] ① 본 품은 Raw Material 기준으로 한 것이며 소운반, 절단, Edge Cutting, 나사내기, 배열, Fitting재 취부, Valve류 취부, 용접, 나사접합, Hangering, Supporting, Flushing, 기밀시험(leak test) 및 내압시험(Air, gas, Water test) 등이 포함되어 있다. ② 본 품은 Fitting류, Bracket류, Support류(hanger, shoe, Guide, Clamp, U-Bolt 등) 및 Valve류 등의 중량을 전체배관 설치중량의 30%로 간주하여 배관하는 품으로 10% 증감할 때마다 본 품에 10%씩 가감하고(단, 매설배관은 제외), Fitting류, Bracket류, Support 및 밸브류 등이 공장에서 제작조립된 경우에는 본 품에 30%까지 감하여 적용할 수 있다. 현장에서 제작설치되는 PIPE RACK은 SUPPORT류에서 제외하고 별도 계상한다. ③∼⑬ □ 생략 □	[주] ① 현행과 같음. ② 본 품은 Fitting류, Bracket류, Support류(hanger, shoe, Guide, Clamp, U-Bolt 등) 및 Valve류 등의 중량을 전체배관 설치중량의 30%로 간주하여 배관하는 품으로 10% 증감할 때마다 본 품에 10%씩 가감하고(단, 매설배관은 제외), Fitting류, Bracket류, Support 및 밸브류 등이 공장에서 제작조립된 경우에는 본 품에 30%까지 감하여 적용할 수 있다. 또한 설치중량에는 Fitting류, Bracket류, Support류 및 Valve류 등의 중량을 포함하여야 하며 현장에서 제작·설치되는 PIPE RACK은 SUPPORT류에서 제외하고 별도 계상한다 ③∼⑬ 현행과 같음

항 목		구 분	현 행			개 정			비 고
제5장 쓰레기 소각기계설비공사		보완	제5장 쓰레기 소각기계설비 공사 ㅇ 본 처리공정은 STOKER식 소각로에 대한 기본적인 공정을 예시한 것으로 추가설비·소각로 형식이 다른 경우, 그 처리공정에 의한다			제5장 쓰레기 소각 기계설비공사 ㅇ 본 처리공정은 STOKER식 소각로에 대한 기본적인 공정을 예시한 것으로 추가설비·소각로 형식이 다른 경우, 그 처리공정에 의한다
5-1 소각로설치
			처리공정		작업내용	처리공정		작 업 내 용
			반입시설	쓰레기벙커	쓰레기 임시저장시설	반입시설		현행과 같음
				이동식크레인	쓰레기를 호퍼로 운반하기 위한 크레인
						연소설비 (소각로)		현행과 같음
			연소설비 (소각로)	투입호퍼	쓰레기를 소각로에 반입하기 위한 시설
						폐열보일러		현행과 같음
				급진기	쓰레기를 화격자에 밀어넣는 장치
						환경설비	반건식반응탑	ㅇ 소석회 슬러지를 분사하여 유해가스를 약품에 흡착시키는 장치
				화격자	쓰레기를 소각시키는 곳
							여과집진기 (백필터)	ㅇ 반응탑에서 흡착된 유해가스, 중금속을 여과포에 걸러 제거하는 장치
				재 축출기	소각제를 모으는 장치
							탈질설비	ㅇ 촉매 또는 무촉매를 이용하여 질소산화물을 분해 정화하는 장치
			폐열보일러	Tube Panel	보일러몸체
							활성탄·반응조제 공급설비	ㅇ 연도(반건식 반응탑과 여과집진기사이)에 활성탄 및 반응조제를 공급하거나 저장하는 시설
				Buckstay	열팽창으로부터 보일러를 보호하기 위하여 보일러 몸체에 H빔을 띠 형태로 설치
							소석회 공급설비	ㅇ 반건식 반응탑에 소석회를 공급하거나, 저장하는 시설
				보일러 드럼	증기를 저장하는 곳
			환경설비	반건식 반응탑	소석회, 활성탄슬러지를 분사하여 유해가스를 약품에 흡착시키는 장치
				백필터	반응탑에서 흡착된 유해가스, 중금속을 여과포에 걸러 제거하는 장치
				탈초설비	산화티타늄 등 촉매을 이용하여 질소산화물을 분해 정화하는 장치

항 목		구 분	현 행				개 정				비 고
			5-1 소각로 설치 1. 공종별 설치				5-1 소각로 설치 1. 공정별 설치
			작 업 구 분	직 종	단 위	공 량
							작 업 구 분	직 종	단 위	수 량
							ㅇ기술관리 -소각로 본체 설치공사	기계기사	인/일	1.45
			ㅇ기술관리 -소각로 본체 설치공사	기계기사	일당	1.45
			ㅇ 포장해체 -수송용 포장목재 해체 및 정리	목공 특별인부	□당	0.07 0.33	ㅇ 포장해체 -수송용 포장목재 해체 및 정리	목공 특별인부	인/□	0.07 0.33
			ㅇ 표면손질	특별인부	□당	0.15	ㅇ 표면손질	특별인부	인/□	0.15
			ㅇ 급진기(Fuel Feeder) 설치 -투입홉퍼, Flap Damper 및 Hanger설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트제관공 플랜트용접공	Ton당	4.45 3.35 3.73 4.75 2.96
							ㅇ 급진기(Fuel Feeder) 설치 -투입홉퍼, Flap Damper 및 Hanger설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트제관공 플랜트용접공	인/Ton	4.45 3.35 3.73 4.75 2.96
			ㅇ 소각로 모듈(Grate Module) 설치 -하부 흡퍼 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트제관공 플랜트용접공	Ton당	3.61 3.05 4.70 3.12 2.38
							ㅇ 소각로 모듈(Grate Module) 설치 -하부 흡퍼 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트제관공 플랜트용접공	인/Ton	3.61 3.05 4.70 3.12 2.38
			ㅇ 화격자(Fire Bar)설치	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	Ton당	4.81 2.16 1.16 3.10 2.39	ㅇ 화격자(Fire Bar)설치	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	인/Ton	4.81 2.16 1.16 3.10 2.39
			ㅇ 내화물	제철축조공 목공 비계공 특별인부 보통인부	Ton당	2.67 0.32 0.17 1.71 2.56	ㅇ 내화물	제철축조공 목공 비계공 특별인부 보통인부	인/Ton	2.67 0.32 0.17 1.71 2.56
			ㅇ 재 축출기 설치 -Wet Scrapper설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 플랜트제관공 특별인부	Ton당	5.47 4.36 3.44 3.37	ㅇ 재 축출기 설치 -Wet Scrapper설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 플랜트제관공 특별인부	인/Ton	5.47 4.36 3.44 3.37
			ㅇ 원치 설치 및 철거 -조양을 위한 원치플리·로프 등의 설치와 사용후 철거까지 포함	기계설치공 비계공 용접공 특별인부	대당	3.30 11.0 3.30 4.95	ㅇ 원치 설치 및 철거 -조양을 위한 원치플리·로프 등의 설치와 사용후 철거까지 포함	기계설치공 비계공 용접공 특별인부	인/대	3.30 11.0 3.30 4.95
			ㅇ 검사 및 교정 -외관검사, 교정작업 (비파괴시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%			ㅇ 검사 및 교정 -외관검사, 교정작업 (비파괴시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%

항 목		구 분	현 행				개 정	비 고
			[주] ① 본품은 급진기, 소각로모듈, 화격자, 내화물, 재 축출기 등 소각로 설비의 조립·설치를 기준으로 소운반을 포함한다. ② 보온이 필요한 경우 별도 계상한다. 2. 사용장비				[주] ① □ 현행과 같음 □ ② 급진기, 소각로모듈, 화격자, 내화물, 재축출기 등에 대한 중량은 공정별로 각각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다. ③ 현행 ②와 같음 2. 사용장비 (현행과 같음)
			장 비 명	규 격	단 위	수 량
			지 게 차	5톤	대	1
			크 레 인	30톤	대	1
				50톤	대	1
				150톤	대	1
				200톤	대	1
			타워 크레인	32톤	대	1
			윈 치	3톤	대	1
			용 접 기	15KVA	대	2
			[주] ① 본 장비는 소각로 1대 설치를 기준한 것이다. ② 장비 사용시간은 작업조건, 작업량 등을 감안하여 산정한다. ③ 본 장비는 소각로 설치에 대한 기본적인 장비임으로 현장여건·작업조건 등에 따라 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

항 목		구 분	현 행				개 정				비 고
5-2 폐열보일러 설치		보완	5-2 폐열보일러 설치 1. 공정별 설치				5-2 폐열보일러 설치 1. 공정별 설치
			작 업 구 분	직 종	단 위	공 량
							작 업 구 분	직 종	단 위	수 량
							ㅇ기술관리 -Boiler본체 설치공사	기계기사	인/일	1.90
			ㅇ기술관리 -Boiler본체 설치공사	기계기사	일당	1.90
			ㅇ 포장해체 -수송용 포장목재 해체 및 정리	목공 특별인부	□당	0.04 0.18	ㅇ 포장해체 -수송용 포장목재 해체 및 정리	목공 특별인부	인/□	0.04 0.18
			ㅇ 표면손질	특별인부	□당	0.15	ㅇ 표면손질	특별인부	인/□	0.15
			ㅇ 용접면 손질 -용접 Joint부위 Grinding	특별인부	□당	0.04
							ㅇ 용접면 손질 -용접 Joint부위 Grinding	특별인부	인/□	0.04
			ㅇ 보일러 드럼 설치 -Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	Ton당	1.86 0.92 1.21 1.55	ㅇ 보일러 드럼 설치 -Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	인/Ton	1.86 0.92 1.21 1.55
			ㅇ Tube Panel 조립 및 설치 -절탄기 및 Header류 설치포함 -Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	Ton당	2.08 1.49 0.89 1.26 1.18	ㅇ Tube Panel 조립 및 설치 -절탄기 및 Header류 설치포함 -Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	인/Ton	2.08 1.49 0.89 1.26 1.18
			ㅇ Buckstay 조립 및 설치 -Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	Ton당	3.01 1.70 2.47 1.39	ㅇ Buckstay 조립 및 설치 -Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	인/Ton	3.01 1.70 2.47 1.39
			ㅇ 본 용접(Boiler Tube 용접부 전체) - Tube용접용 Support 및 운반 포함	플랜트용접공 플랜트배관공 특별인부	Ton당	9.36 8.35 0.95	ㅇ 본 용접(Boiler Tube 용접부 전체) - Tube용접용 Support 및 운반 포함	플랜트용접공 플랜트배관공 특별인부	인/Ton	9.36 8.35 0.95
			ㅇ Sealing 용접(Boiler용접부 전체) -용접용 Support 설치 및 운반 포함	플랜트용접공 플랜트제관공 특별인부	Ton당	4.86 9.73 2.63	ㅇ Sealing 용접(Boiler용접부 전체) -용접용 Support 설치 및 운반 포함	플랜트용접공 플랜트제관공 특별인부	인/Ton	4.86 9.73 2.63
			ㅇ 원치 설치 및 철거 -조양을 위한 원치플리·로프 등의 설치와 사용후 철거까지 포함	기계설치공 비계공 용접공 특별인부	대당	3.3 11.0 3.3 4.95	ㅇ 원치 설치 및 철거 -조양을 위한 원치플리·로프 등의 설치와 사용후 철거까지 포함	기계설치공 비계공 용접공 특별인부	인/대	3.3 11.0 3.3 4.95
			ㅇ 검사 및 교정 -외관검사, 교정작업 (비파괴시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%			ㅇ 검사 및 교정 -외관검사, 교정작업 (비파괴시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%

항 목		구 분	현 행				개 정	비 고
			[주] ① 본품은 보일러 드럼, Tube Panel, Buckstay 등 폐열보일러의 조립·설치 기준으로 소운반을 포함한다. ② 보온이 필요한 경우 별도 계상한다. 2. 사용장비				[주] ① □ 현행과 같음 □ ② 보일러 드럼, Tube Panel, Buckstay 등에 대한 중량은 공정별로 각각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다. ③ 현행 ②와 같음 2. 사용장비 (현행과 같음)
			장 비 명	규 격	단 위	수 량
			지 게 차	5톤	대	1
			크 레 인	150톤	대	1
				200톤	대	1
				300톤	대	1
			타워 크레인	30톤	대	1
			윈 치	3톤	대	1
			용 접 기	15KVA	대	6
			[주] ① 본 장비는 폐열보일러 1대 설치를 기준한 것이다. ② 장비 사용시간은 작업조건, 작업량 등을 감안하여 산정한다. ③ 본 장비는 폐열보일러 설치에 대한 기본적인 장비임으로 현장여건·작업조건 등에 따라 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

항 목		구 분	현 행	개 정				비 고
5-4 반건식, 반응탑 설치		신설	□ 없 음 □	5-4 반건식 반응탑 설치 1. 공정별 설치
				작 업 구 분	직 종	단 위	수 량
				ㅇ기술관리 -설치공사 기간중	기계기사	인/일	1.03
				ㅇ 포장해체 -수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정리함	목공 특별인부	인/□	0.12 0.12
				ㅇ 표면손질	특별인부	인/□	0.39
				ㅇ 현장교정 -수송도중 변형된 것을 바로잡기	플랜트 제관공 특별인부	인/Ton	0.64 0.29
				ㅇ 기초작업 -Chipping 및 Grouting	플랜트기계설치공 특별인부	인/Ton	0.03 0.04
				ㅇ 소운반 -작업 위치까지 필요한 자재를 운반	특별인부 건설기계운전조	인/Ton 조/Ton	0.62 0.20
				ㅇ 본체 조립 -분리 운반된 Body 조립 포함	플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부 건설기계운전조	인/Ton □ □ 조/Ton	0.94 1.25 1.01 1.13
				ㅇ Inner Plate 및 Hanger 조립 - Suspention Device 조립 포함	플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부	인/Ton	1.49 2.18 2.16
				ㅇ 본체 설치 -반응물 배출장치(Lump Crusher) 및 Rotary Valve 설치 포함 ※ 소석회 분무장치 제외	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부 비계공 건설기계운전조	인/Ton □ □ □ □ 조/Ton	1.78 0.54 0.92 1.53 1.85 0.48
				ㅇ 검사 및 교정 -Gas Leak Test 포함	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%

항 목		구 분	현 행	개 정				비 고
				[주] ① 본품은 반응탑 본체, Rotary Valve 등 반건식 반응탑의 조립·설치기준으로 소운반이 포함되어 있다 ② 공정별 중량은 공정별로 각 각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다. ③ 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다. 2. 사용장비
				장 비 명	규 격	단 위	수 량
				크 레 인	250톤	대	1
				타워 크레인	30톤	대	1
				지 게 차	7.5톤	대	1
				용 접 기	15KVA	대	2
				[주] ① 본 장비는 반건식 반응탑 조립·설치시, 일반적으로 사용하는 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비 및 규격을 별도 계상할수 있다

항 목		구 분	현 행	개 정					비 고
5-5 탈질설비 설치		신설	□ 없 음 □	5-5 탈질설비 설치 1. 공정별 설치
				작 업 구 분	직 종		단 위	수 량
				ㅇ기술관리 -설치공사 기간중	기계기사		인/일	0.96
				ㅇ 포장해체 -수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정리함	목공 특별인부		인/□	0.06 0.14
				ㅇ 표면손질	특별인부		인/□	0.24
				ㅇ 소운반 -작업 위치까지 필요한 자재를 운반	특별인부 건설기계운전조		인/Ton 조/Ton	0.66 0.21
				ㅇ 기초작업 -Chipping 및 Grouting	플랜트기계설치공 특별인부		인/Ton	0.01 0.01
				ㅇ 현장교정 -수송 도중 변형된 것을 바로 잡기	특별인부 플랜트기계설치공		인/Ton	2.07 0.04
				ㅇ 본체 조립 -분리 운반된 Body 조립 포함	플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부 건설기계운전조		인/Ton □ □ 조/Ton	1.91 2.04 3.93 1.32
				ㅇ Inner Plate 및 Hanger 조립 - Suspention Device 조립 포함	플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부		인/Ton	1.14 3.36 3.37
				ㅇ 용접손질 -용접 Joint부위 용접효율을 높이기 위함	플랜트제관공 특별인부		인/Ton	2.19 0.07
				ㅇ 본체 설치 -Reactor 설치포함	플랜트기계설치공 플랜트제관공 비계공 특별인부 플랜트용접공 건설기계운전조		인/Ton □ □ □ □ 조/Ton	4.28 0.54 1.66 2.28 3.97 4.07
				ㅇ Sealing 용접 -용접용 Support설치 및 운반포함	플랜트용접공 플랜트제관공 특별인부	인/Ton		14.74 4.99 1.07
				ㅇ 검사 및 교정 -Gas Leak Test 포함	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%

항 목		구 분	현 행	개 정				비 고
				[주] ① 본품은 촉매를 이용하여 질소산화물을 분해 정화하는 장치로서 탈질설비의 조립·설치와 소운반이 포함되어 있다 ② 공정별 중량은 공정별로 각 각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다. ③ 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다. 2. 사용장비
				장 비 명	규 격	단 위	수 량
				크 레 인	200톤	대	1
				지 게 차	5톤	대	1
				용 접 기	15KVA	대	2
				[주] ① 본 장비는 탈질설비 조립·설치시 일반적으로 사용하는 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비 및 규격을 별도 계상할수 있다

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
6-1 수중펌프설치	신설	" 없 음 □	6-1 수중펌프 설치 1. 설치품 (대당)
			규 격	기계설치공		배 관 공		보통인부
			7.5kw	6.1		2.4		4.1
			15kw	7.3		2.6		4.3
			30kw	9.7		3.0		4.6
			[주] ① 본 품은 자동탈착식 수중펌프설치로서 앙카볼트, 펌프고정장치, 가이드바, 수중펌프 인양케이블설치와 시험·소운반이 포함되어 있다. 2. 사용장비 (대당)
			장 비 명		규 격	사용시간 (hr)
						7.5kw	15kw		30kw
			크 레 인		30톤	4	4		4
			지 게 차		3.5톤	4	4		4
			용 접 기		15KVA	32	35		40
			[주] ① 본 장비는 펌프설치시 기본적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
6-2 모노레일 설치	신설	" 없 음 □	6-2 모노레일 설치 1. 설치품 (TON당)
			측량사	비계공	기계설치공		용접공	특별인부		계장공
			0.5	1.3	3.5		2.6	3.4		0.8
			[주] ① 본 품은 레일고정판, 레일, Trolley Bar, 2차측 전선관(전기배선 포함) 설치기준으로 시운전·소운반이 포함되어 있다. ② 본 품의 설치중량은 레일고정판, 레일, Trolley Bar, Bracket류, Support류의 중량으로 한다. ③ 전동기, 철골빔, 1차측 전선관(전기배선 포함) 설치품과도장작업은 별도 계상한다. 2. 사용장비 (TON당)
			장 비 명			규 격			사용시간(hr)
			트럭탑재형 크레인			5톤			1.3
			용 접 기			15KVA			7.6
			[주] ① 본 장비는 모노레일 설치시 기본적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다.