｢민간건설공사 표준도급계약서｣ 일부개정 주요내용

□  개정이유

○ 최근 재난 수준의 폭염으로 인해 옥외작업이 대부분인 건설현장의 폭염피해 및 안전사고 발생이 우려됨에 따라,

- 폭염 등 기상 여건으로 인하여 공사이행이 현저히 곤란할 경우, 공사기간 연장 및 계약금액 조정이 가능하도록 근거 마련

□  주요내용

○ 수급인이 도급인에게 공기연장을 요구할 수 있는 불가항력 사유에 ‘폭염‧한파’를 추가(제17조제1항)

* 공기연장 사유 추가에 따라 복잡해진 조문을 명확‧단순하게 정비

○ 계약금액의 조정이 가능한 사유에 ‘불가항력 사유에 따른 공사기간의 연장’을 추가(제23조 제1항)

* 계약금액 변경사유 추가에 따라 복잡해진 조문을 명확‧단순하게 정비

□  시행일

○ 고시 발령일(‘18.8.9) 부터 시행

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제17조(공사기간의 연장) ① "도급인"의 책임있는 사유 또는 태풍․홍수․악천후․전쟁․사변․지진․전염병․폭동 등 불가항력(이하 “불가항력”이라고 한다.)의 사태, 원자재 수급불균형, 근로시간단축 등 법령의 제․개정 등으로 현저히 계약이행이 어려운 경우 등 "수급인"의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 "수급인"은 서면으로 공사기간의 연장을 "도급인"에게 요구할 수 있다.	제17조(공사기간의 연장) ① "수급인"은 다음 각 호의 사유로 인해 계약이행이 현저히 어려운 경우----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. “도급인”의 책임있는 사유 2. 태풍‧홍수‧폭염‧한파‧악천후‧전쟁‧사변‧지진‧전염병‧폭동 등 불가항력의 사태(이하 “불가항력”이라고 한다.) 3. 원자재 수급불균형 4. 근로시간단축 등 법령의 제‧개정
② ∼ ④ (생 략)	② ∼ ④ (현행과 같음)
제23조(기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 제21조 및 제22조에 의한 경우 이외에 계약내용의 변경이나 근로시간 단축, 근로자 사회보험료 적용범위 확대 등 공사비, 공사기간에 영향을 미치는 법령의 제․개정으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 계약금액을 조정하며, 이 경우 증감된 공사에 대한 일반관리비 및 이윤 등은 산출내역서상의 율을 적용한다.	제23조(기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정) ① ----- ----------------------- 다음 각 호에 의해 ------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 계약내용의 변경 2. 불가항력에 따른 공사기간의 연장 3. 근로시간 단축, 근로자 사회보험료 적용범위 확대 등 공사비, 공사기간에 영향을 미치는 법령의 제‧개정
② (생 략)	② (현행과 같음)