매립시설조성공사 현장설명서

[2·3·4공구]

2011. 11

부산그린파워(주)

1. 공 사 명 : 부산그린파워(주) 폐기물 매립시설 조성공사

2. 현장위치 : 부산시 강서구 송정동 1774번지

3. 공사개요

가. 매립시설 면적

구 분	면적 (㎡)	비고
1 공 구	64,381	현재 운영 중
2 공 구	38,231	공 사 구 간
3 공 구	33,720
4 공 구	35,053
유 보 지	10,196
매립시설 면적	181,581
기 타 부 지	23,000
사업부지 면적	203,085

나. 평면도

3공구

4공구

2공구

1공구

- 1공구 : 현재 운영 중인 폐기물 매립시설로서 금회 공사에 제외되는 공구

- 2공구 : 2013년 9월부터 영업개시를 목표로 공사 예정인 공구

- 3∼4공구 : 2016년 이후 착공 예정인 공구

다. 단면도

GL+4.0

GL+5.9

GL+6.6

GL+8.5

GL+8.5

GL+7.9

GL-15.5

GL-14.5

라. 공사기간

- 전체공사기간  : 2012년 1월 ~ 2019년 12월 (42개월)

- 연약지반개량  : 2012년 1월(착공) ~ 2014년 6월 (30개월)

- 2 공 구 조 성 : 2013년 3월 ~ 2013년  8월 (6개월)

- 3 공 구 조 성 : 2016년 1월 ~ 2016년  6월 (6개월)

- 4 공 구 조 성 : 2019년 7월 ~ 2019년 12월 (6개월)

※ 상기 공사기간은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음.

4. 설계도서 열람

가. 장    소 : 데이콤 웹하드(http://www.webhard.co.kr)

나. 방    법 : 당사 요청 시 제공 (담당자 : 전화 051-941-8009 관리부 김청명)

다. 열람기간 : 2011년 11월 25일 ~ 2011년 12월 9일

5. 공사범위

가. 토공

나. 연약지반개량공

다. 매립장차수공

라. 지하수집수공

마. 침출수집수공

바. 가스포집공

사. 우수배제공

아. 부대시설공

자. 기계 및 전기공사

차. 사급자재

6. 설계 VE 관련사항

가. 공사 입찰방법은 공사입찰공고에 의거하여 기존 설계 기본방침(ex. 매립  용량 2,920,015㎥ 등)의 변경 없이 원안설계와 동등 또는 그 이상의 기능과 효과를 가진 방안을 제시하고 이를 근거로 한 공사비 절감을 최우선 목표로 합니다.

나. 입찰에 참여하는 업체가 주관이 되어 설계 VE를 수행하며, 설계와 시공은  일괄 보증해야 합니다. 또한 이에 따른 비용 등 모든 제반사항은 입찰에 참여하는 업체 부담으로 합니다.

다. 설계 VE 대상공종

- 연약지반처리공법(DCM, 진공압밀)

- 토공사

- 차수공사

- 기타 및 부대공사

라. 기술 검증

- 입찰에 참여한 업체의 주관으로 원안 설계 검토와 공사비 절감을 위한      설계VE를 시행해야 합니다.

- 설계VE에 대한 기술 검증을 위하여 분야별로 전문기술사가 반드시 검증    하여야 하며 기술사의 경력 확인서를 필히 제출하여야 합니다.

- 설계와 시공은 시공사에서 일괄 보증해야 하며, 부산광역시, 한국건설기술    연구원 등 인·허가 및 시설검사와 관련된 모든 행정사항은 시공사 주관으    로 시행 완료 하여야 합니다.

- 설계 VE 공종은 기술적으로 시공이 가능해야 하며, 당사의 현장조건과    유사한 국내의 시공 실적이 있어야 합니다.

- 설계 VE공종은 계약 체결 시 설계내역서를 확정·반영하므로 공사 진행    중  당사의 요청을 제외한 설계변경은 인정되지 않습니다.

- 지반개량공법(DCM, 진공압밀)을 설계변경 하고자 하는 경우 원안설계    와 동등 또는 그 이상의 효과가 있는 공법으로서 국내의 시공실적이      있는 것으로 변경해야 합니다.

<공통사항>

- 2공구 매립시설의 준공은 2013년 8월 31일까지 엄수하여야 하며 준공기    간은 매립시설 설치검사, 매립시설 사용개시 등의 관련 행정사항을 포함    한 일정입니다.

- 폐기물관리법 및 기타 관련법 규정에 적법한 설계변경을 시행하여야      하며 법규정을 위반하는 경우에는 낙찰이 무효로 처리됩니다.

- 최종 사토반출은 원안의 설계조건 내(ex 운반거리 20㎞)에서 사토장 선    정을  하여야 하며 이와 관련된 일체의 업무는 계약기간 내에 시공사     주관으로 필히 처리해야 합니다.

<연직배수공법>

- 당사와 유사한 토질조건에서의 국내시공 실적이 있는 공법이어야 합니다.

- 선행하중을 위한 재하성토용 토사가 필요한 경우에는 공사부지 내 토사         만을 사용해야 하며, 외부 토사반입은 불허합니다.

<심층혼합처리공법>

- 매립시설 조성공사로 인해 내부 지반과 부지 외곽 시설물(도로, 지장물          등)에 영향이 없도록 하여야 하며, 원안 설계에서 제시된 기준 침하량           이하가 되도록 하여야 합니다.

- 지반 개량체의 28일 현장강도는 20kg/㎠ 이상으로 하여야 합니다.

- 원안의 설계 강도는 10kg/㎠, 투입 시멘트 사용량은 250kg/㎥이며 현장         강도 20kg/㎠이상으로 고화제 배합비(사용량)가 결정되어야 합니다.

- 시공사에서 시행한 타 현장의 사용실적에 따른 시험성적서를 첨부하여야         합니다.

- 시멘트 사용량은 현장강도 기준으로 산출하여 내역서에 명시하여야 합니         다.  또한 투입되는 자재(시멘트 등)의 증가 수량은 시공사 부담으로 하         여야 합니다.

- 상기 배합조건에 따른 부상토량을 산출하여 내역서 상에 명기하여야 하         며 정산 시에는 내역서에 명기된 부상토량만을 인정합니다.

- 산출된 부상토에 대한 처리는 관련법에 따라 적정하게 판단하여 처리하         고 이를 내역서에 반영하여야 합니다.

- 부상토성분은 Cr6+(육가크롬)을 포함한 환경오염 물질의 용출이 없는            친환경 재료를 사용하여 환경오염의 피해가 없어야 합니다.

- 개량공 작업 시 품질 및 시공의 안전을 위한 개량체 형성은 필히 연속적         으로 시공 하여야 합니다.

7. 계약조건

가. 우선협상대상자는 설계VE에 대한 결과를 계약 전 당사에 제출하고 적정성 여부를 당사 내부규정에 따라 처리합니다.

나. 우선협상대상자는 당사가 요청하는 설계변경 사항에 대해 필히 응해야 하며, 변경내용에 대해서는 우선협상과정에서 협의할 예정이고, 공사계약은 협의 완료 후 체결 됩니다.

다. 상기 "가" 및 “나”호의 조건이 수용되지 아니하는 경우 차순위 업체로 협상대상자가 변경됩니다.

라. 입찰시 총액으로 투찰한 금액을 계약내역서에 반영합니다.

마. 내역서 상에는 수량, 단가(자재비, 노무비, 경비 등) 등을 산출하고, 시공 단계 시 증가되는 수량은 시공사가 부담합니다.

바. 공구별 공사 시 착공일로부터 준공기간까지 물가변동으로 인한 계약금액은  조정이 불가합니다. (단, 3·4공구의 경우는 착공 시 당사와 협의 하에 정함)

사. 공사 중 공사비 증액으로 인한 설계변경은 불허합니다.

아. 공법변경 등으로 인한 설계변경 시 관련기관(부산광역시, 낙동강유역환경청 등)의 인허가 행정사항은 시공사 주관으로 시행 완료하여야 합니다.

자. 부득이한 사유로 당사에서 공사 중단을 요청하는 경우 즉시 이행 되어야 합니다.

차. 원안 설계의 원가계산서상의 경비항목(산재, 고용, 건강, 연금, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금, 안전관리비, 환경보전비 등)의 비율은 조정이 없어야하고 사후정산 처리하는 조건입니다.

카. 당사에서 시행 중인 매립시설 및 외곽도로의 안정성 확인을 위한 계측(경  사계 2개소, 수위계 2개소, 지표침하판 8개소, 지표침하계 9개소, 주1회 계  측, 월 1회 보고서 제출)과 원안 설계에 포함된 추가 계측부문은 시공사가  승계하여야 하며, 매립시설의 준공까지 그 결과를 당사에 제출하여야 하고  이로 대한 비용은 시공사 부담으로 합니다.

타. 매립시설 공사를 위한 지하수·우수 배제 등의 제반작업은 시공사 부담으로  시행하여야 합니다.

파. 당사에서 부산광역시로부터 취득한 폐기물최종처리업의 공사와 관련된 허가조건을 착공전 확인하고 이행하여야 합니다.

하. 공사시방서에는 공사 시 이행해야 할 '녹산국가산업단지 폐기물매립시설 조성사업 환경영향평가 협의내용 (낙동강유역환경청 환경관리과-565(2010.01.27)호) 및 환경영향평가서(2009.12, 부산그린파워㈜)에서 제시한 저감방안을 반영하여 당사의 협의내용이 적정 이행될 수 있도록 하여야 합니다.

거. 공사 현장에는 상기 '녹산국가산업단지 폐기물매립시설 조성사업 환경영향평가 협의내용' 등을 기재한 관리대장을 작성․비치하고, 관리책임자를 지정하여야 합니다.

너. 공사와 관련된 모든 인허가 행정사항(환경영향평가 협의의견, 폐기물최종처리업 허가조건 등)은 시공사가 당사와 협의하고 이행하여야 하며, 당사에 불이익이 발생할 경우 시공사가 책임을 집니다.

8. 특기사항

가. 시공사는 공사 착수 전 현황측량 및 경계측량을 실시하여 적정한 시공이 이루어지도록 하여야 합니다.

나. 시공사는 본 공사 발주 당시의 현장여건을 정밀 파악하고 본 공사로 인하여 인근 시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 인근 시설물에 훼손이 있을 경우에는 시공사 부담으로 즉시 원상복구하거나 변상 조치하여야 합니다.(ex. 공사로 인한 외곽도로 침하시 복구비용) 또한, 시공사는 공사 착수 전 공사에 지장을 초래할 수 있는 지중 매설물에 대한 조사를 실시하여야 하며 가스관로, 전기ㆍ통신관로, 상ㆍ하수도관로 등은 관할기관의 협조를 받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인 조치를 하여야 합니다.

다. 시공사는 지질조사보고서를 면밀히 검토하여 공사 시행중 토층구성이 상이하거나 지하수위의 변동, 지내력 부족 등의 사유로 기초공사에 하자가 예상될 경우 피해예방을 위하여 즉시 감독원에게 보고하고 감독원의 지시에 따라 변경시공 등 적절한 조치를 취하여야 합니다.

라. 시공사는 공사 착수 전에 설계도서를 검토하여 시공에 불합리하거나 현장상황과 상이한 부분이 있을 경우에는 즉시 감독원에게 서면으로 보고하여 도면이 보완될 수 있도록 조치한다. 또한, 시공 및 구조상 필요한 부분은 시공 상세도면 을 작성하여 감독원의 승인을 받아 시행하여야 합니다.

마. 시공사는 공사 시행중 품질관리를 위하여 필요시 토질, 구조, 시공 등 전문기관의 자문을 받을 수 있습니다.

바. 시공사는 공사 착수전에 가설시설물 설치계획서, 시공계획서, 품질(보증) 관리계획서, 안전관리계획서, 예정공정표 등이 포함된 착공계를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 가설사무실(상황실 및 감독원실)에 비치하여야 할 공사현황판 등 사무용집기를 감독원의 지시에 따라 설치하여야 하고, 필요시 운용요원을 배치해야 한다. 또한, 본 공사에 투입되는 모든 자재는 사전에 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 사용합니다.

사. 시공사는 건설기술관리법시행령 제41조 규정에 따라 품질관리계획 또는 품질 시험계획을 수립하여 시행하여야 합니다.

아. 시공사는 산업안전보건법 제30조에 따라 산업재해예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상하여야 한다. 또한 산업안전보건법시행령 제12조에 정한 바에 따라 산업안전보건법시행령 제14조에 의한 안전관리자를 선임하고 산업안전보건법시행령 제13조의 업무를 수행하도록 하여야 합니다.

자. 시공사는 현장대리인을 배치함에 있어 기술경험이 풍부하고 본 공사와 유사  한 시공경험이 있는 기술자를 선정․배치하되 사전에 감독원의 확인을 받아 공사착공과 동시에 현장에 상주토록 조치하여야 합니다. 또한, 원활한 공사 관리를 위하여 필요한 인원을 현장에 상주토록 하여야 합니다.

차. 시공사는 타 공종 공사의 진행에 지장이 없도록 상호 긴밀히 협의하여 공정계획을 수립․시행하여야 하며, 시공사로 인하여 타 공종 공사의 진행에 차질이 발생한 경우에는 공정회복에 따른 행정적, 금전적 책임을 부담하여야 합니다.

카. 시공사는 계약된 공사부분에 대하여는 시공사 책임하에 관리 및 보양 등을 실시하여 공사품질을 확보하여야 하며, 해당공사 부분의 관리 및 보양 또는 공정상 선행 시공되어야 할 부분의 후속시공으로 발생된 추가공사 부분의 재시공 또는 보완시공 발생시 관련 공종의 수정비용까지 부담할 책임이 있습니다.

타. 당사의 사정에 의한 사업규모 조정, 공기조정 요구 시 특별한 사유가 없는   한 이에 응해야 한다.

파. 공사시행 중 건축법, 도로법, 총포화약류단속법, 소방법, 공해방지법, 환경  보전법, 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법, 폐기물관리  법, 오수․분뇨 및 축산폐수의처리에관한법률 등에 저촉되지 않도록 해야  합니다.

하. 본공사 추진에 따른 모든 대관업무 및 각종 인․허가사항은 시공사가 당사를 대행하여야 합니다.

거. 시공사는 설계변경 및 시공변경 등에 대한 공사내용을 정확히 기록, 유지하 고 준공시 준공설계도서에 명확히 표기하여 제출(준공도면 : 3부)하여야 하며 준공사진첩 및 공사 종결보고서, 기타 공사관련 서류를 편철하여 제출한다. 또한, 상기 전체내용을 CD-ROM에 저장하여 1부 제출하여야 합니다. 단, 작성방법에 대하여는 감독원과 사전에 협의하여야 합니다.

너. 공사현장에서 발생되는 부산물 및 일체의 폐기물은 관계법을 준수하여 재활  용이 가능한 품목은 재활용하고 재활용이 어려운 일반폐기물은 관계법에 따라 처리되도록 조치하여야 합니다. 다만, 즉시 장외처리가 어려운 경우에는 공정진행에 방해되지 않는 장소에 모아서 보관하여야 하며 미관에 지장이 없도록 비닐 등으로 덮고 폐기물이 주위로 확산되지 않도록 조치하여야 합니다.

더. 시공사는 차량 세륜시설을 감독원의 지시에 따라 설치․관리하여야 합니다.

러. 수도, 전기등 공사를 시행하는데 소요되는 각종 설치비, 사용료는 시공사가   부담합니다.

머. 본 공사 입찰에 참가하고자 하는 자 반드시 아래 입찰설명서를 열람 숙지 하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.